제 안 요 청 서

사 업 명	2024년 국립중앙박물관 선사고대관 (도입부~고구려실) 전시환경 조성
주관기관	국립중앙박물관

2024년 4월

구분	직책	소속	성명	연락처	전자우편
사업책임자	학예연구관	고고역사부	류정한	02-2077-9457	FAX: 02-2077-9901 ckh476@korea.kr
사업실무자	학예연구사	고고역사부	최경환	02-2077-9469

I. 사업개요

1. 사업명: 2024년 국립중앙박물관 선사고대관(도입부~고구려실) 전시환경 조성

2. 사업목적

가. (관람 친화적 전시 환경) 10년 이상 노후화된 선사고대관 전시 및 시설을 개선하여 관람 친화적 전시 공간 조성

나. (우리 역사가 담긴 전시) 선사시대부터 이어온 우리 역사를 한눈에 조망할 수 있도록 전시 구현

다. (최신자료 및 연구성과 강화) 학술적 의미가 있는 최신 발굴자료 및 연구성과를 강화하여 연구자와 관람객의 기대 수준 충족

라. (사람 중심의 전시) 전시품의 의미와 가치를 그것을 사용한 사람을 중심으로 설명 및 연출하여 관람객의 공감대 형성

3. 사업내용

가. 시설현황

ㅇ (위치) 서울특별시 용산구 서빙고로 137, 국립중앙박물관 1층 선사고대관 내

- 구석기실(101호), 신석기실(102호), 청동기･고조선실(103호), 부여･삼한실(104호), 고구려실(105호)

ㅇ (사업면적) 1,613.38㎡

나. 사업범위

ㅇ 전시기획에 따른 전시 연출 설계(4대 보험 및 안전관리비 내역 포함)

ㅇ 기존 구조물(벽체 및 진열장 등) 철거

ㅇ 전시 연출을 위한 구조물 제작 설치(전시실 내부/외부)

ㅇ 전시 진열장(저반사 유리), 보조대 및 기타 전시 보조물 제작 설치

ㅇ 전시실 벽체 및 천장 친환경 특수도장

ㅇ 전시연출용 조명 계획 수립, 구입, 설치

ㅇ 외부 전문가 위촉을 통한 종합 색채 및 디자인 자문

ㅇ 전시실 내/외부 그래픽 제작 설치(서체, 패널, 설명카드, 이미지패널, 사인물 등)

ㅇ 미디어 시설 설치를 위한 각종 설비

ㅇ 전시 연출 보조 매체(정보영상 등 미디어 및 홍보물) 제작 설치(필요 시)

ㅇ 바닥 마감재 시공 및 휴게용 가구 제작 및 설치

ㅇ 전시 공간 및 시설 종합적 시운전

ㅇ 효과적인 유지․관리를 위한 운영자 매뉴얼 작성

ㅇ 기타 사업에 수반되는 행정 소요 및 우리 관 요구사항

다. 사업기간

ㅇ 계약체결일로부터 2024년 12월 13일(금)까지 공사 완료

※ 하자 보수 보증기간은 검수일로부터 2년까지

ㅇ 전시실 조성 완료 : 2024년 12월 13일(금)

- 발주 및 계약 : 2024. 3. ~ 5.

- 기획 및 설계 : 2024. 6. ~ 8.

- 기존 구조물 철거, 전시물 제작 설치, 테스트 및 보완(시범운영) : 2024. 7. 1. ~ 12. 16.

※ 전시품 진열기간 전까지 기본공사(벽체 및 전시품 받침대) 공정 및 전시품 전시환경이 마련되어야 하며, 일정은 변경될 수 있음

- 개관일자 : 2024. 12. 17.(화) 예정

- 지침서 작성(준공서류 및 납품서류) : 2024. 12. 13.(금)까지

라. 사업비

ㅇ 사업예산 : 금2,410,000,000원(금이십사억일천만원, 부가가치세 포함)

※ 제안서 제작, 기본 및 실시 설계, 전시물 제작설치, 제세공과금 등 부대비용 일체 포함

4. 계약방식

ㅇ「국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령」제43조(협상에 의한 계약체결)에 의함

5. 입찰 참가자격

가. <국가종합전자조달시스템입찰참가자격등록규정>에 의하여 나라장터(G2B)에 전자입찰서제출 마감일 전일까지 다음 분야의 입찰참가자격을 모두 등록한 자

ㅇ ‘실내건축공사업(업종코드: 4990)’으로 등록한 자

- <중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률> 제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 의한 직접생산확인증명서(세부품명: 전시홍보관설치및디자인서비스, 세부품명번호 10자리: 7215409902)를 소지한 자

ㅇ <중소기업기본법> 제2조에 따른 중·소기업자 또는 <소상공인 보호 및 지원에 관한 법률> 제2조에 따른 소상공인으로서 <중소기업 범위 및 확인에 관한 규정>에 따라 발급된 <중소기업·소상공인 확인서(용도: 공공기관 입찰용)>를 소지한 자

ㅇ <산업디자인진흥법> 제9조에 의한‘산업디자인전문회사(환경디자인분야, 업종코드: 4442)’또는‘산업디자인전문회사(종합디자인분야, 업종코드: 4444)’로 입찰참가 등록한 자

나. 공동수급체 구성 가능

ㅇ 공동수급체(공동이행)는 공동수급 표준협정서를 제출해야 함

ㅇ 공동수급협정서의 내용은 제출된 후에는 변경할 수 없음

ㅇ 공동수급체 구성원은 대표사 포함하여 5인 이하로 구성하여야 하며, 공동이행방식의 경우 구성원별 계약 참여 최소 지분율은 10% 이상으로 함

6. 제안일정

1	조달청 계약요청 의뢰	2024. 3.
2	입찰공고 게시	입찰공고서 참조
3	제안서 및 입찰서 제출 ※현장설명회 없음	입찰공고서 참조

7. 세부 제안 절차

가. 질의응답

ㅇ (질의서 접수) 입찰공고 게시 익일부터 3일간

ㅇ (질의서 회신) 질의서 접수 마감일로부터 5일 이내

ㅇ (질의처)

- 담당부서 : 국립중앙박물관 고고역사부

- 담당자 및 연락처 : 최경환(학예연구사) / 02-2077-9469 / ckh476@korea.kr

ㅇ (질의 방법)

- 모든 질의는 서면질의서[서식 9호]에 작성하여 전자우편으로 제출하여야 하며, 질의서에는 질의자의 업체명과 대표자의 성명을 기재한다.

- 질의에 대한 답변은 서면질의서[서식 9호]에 기재한 업체의 전자우편으로 송부한다.

8. 제출서류 : 입찰공고서 참조

ㅇ (정성제안서 1식) 기술능력 제안서(A3 20매 이내) 설계 설명서, 설계도, 예정공정표 등

ㅇ (정량제안서 1식) 사업수행능력 평가서

ㅇ (기타서류) 입찰참가자격 확인서류

※ 제안서 등 제출서류는 나라장터를 통해 전자적으로 제출하여야 하며, 나라장터를 통해 제출하는 제안서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출, 총 용량 300MB 미만

구분		제출서류	관련 서식	비고
사업 수행 능력 평가서	사업 수행 능력	① 제안서 응모 신청서	[서식 1호]	-해당하는 서류만 제출 -해당기관의 전산용증명원도 가능하나, 본 서식의 내용을 포함해야 함
		② 사업수행능력 자기 평가표	[서식 2호]
		③ 제안 업체의 일반현황	[서식 3호]
		④ 실적 증명서	[서식 4호]
		⑤ 사업수행 실적 집계표	[서식 5호]
		⑥ 기술인력 보유현황	[서식 6호]
		⑦ 투입인력 계획
		⑧ 신용평가 등급 확인서	[서식 7호]
	입찰 참가 자격	① 서약서	[서식 8호]
		② 위임장(대리인이 등록하는 경우)
		③ 사용인감계
		④ 인감증명서(법인/개인)
		⑤ 사업자등록증 및 법인등기부등본
		⑥ 경쟁입찰참가자격등록증
		⑦ 직접생산확인증명서
		⑧ 보안서약서
		⑨ 개인정보 수집ㆍ이용ㆍ제공 동의서
		⑩ 청렴계약이행서약서
	공동 수급	① 제안응모 대표자 선임계
		② 공동수급	[서식 11호]
기술능력제안서		① 기술제안서 표지	[서식 10호]
		② 서면질의서	[서식 9호]
		③ 제안서 본문 및 시안(작성방법 참조)

II. 제안 지침

1. 기본 지침

가. 일반 지침

ㅇ 전시 목적과 제안 요구사항을 충분히 숙지하고 현장을 답사하여 조사한 후 현장 여건을 고려하여 계획

ㅇ 전시물은 관련규정 및 제반규정에 적법하게 제작 설치될 수 있도록 계획

ㅇ 국립박물관의 위상에 맞는 품위 있는 전시 연출 계획 수립

ㅇ 공공 문화시설로서 노약자 및 장애자의 편익과 안전성을 도모하는 계획 수립

ㅇ 청소년 단체관람객의 전시실 관람시 안전성과 교육성이 고려된 계획 수립

ㅇ 전시 조성 기간에 발생되는 전기 사용 요금을 납부

ㅇ 기존 각종 설비(전기, 통신, 방범, 공조 등)의 목적과 기능이 유지되도록 하되, 사전에 발주기관과 의논하여 시공

ㅇ 발주기관은 중요한 사안의 결정을 위하여 회의를 소집하거나 자문을 받도록 사업자에게 요구할 수 있고, 사업자는 이에 대한 자문 결과를 보고서로 제출하며, 이때 발생하는 비용은 낙찰된 제안 업체가 부담

ㅇ 사업 수행 중 업무보고는 다음과 같이 한다.

- 착수보고 : 계약 체결 직후 사업 총괄책임자가 전체 공정예정표와 함께 착수보고

- 주간보고 : 주간업무보고서(금주 업무 및 다음 주 업무)를 작성하여 매주 지정한 요일에 제출

- 월간보고 : 사업 총괄책임자가 월 1회 이상 업무수행 사항(추진내용, 현황, 문제점과 대책, 참여 기술자 현황, 다음 달 계획 등)을 보고

- 중간보고 : 사업 총괄책임자가 사업 기간 중 1회 이상(실시설계 완료 시점) 보고

- 수시보고 : 기타 보고회를 개최할 중요한 사한이 있는 경우

- 최종보고 : 사업 총괄 책임자가 성과품 납품 전, 공정 90% 정도 진행 시 보고

※ 각 보고회는 원칙적으로 사업 현장 또는 발주기관이 별도 지정하는 장소에서 대면 보고하는 것으로 한다.

※ 사업자의 총괄책임자는 보고회 개최 시 관련 자료를 제출하고, 회의에 참석하여, 질의에 답변하고 회의결과를 과업에 적극 반영하여야 한다.

※ 최종보고회에서 상당량의 재검토 요구가 제기될 경우 보완 사항에 대한 추가 보고회를 개최할 수 있다.

나. 전시 공간 구성

ㅇ 공간구성

- 전시실의 관람 동선은 원활히 하고 상호 유기적인 체계가 이루어져야 하며 전시실 내부 관람객 휴게 공간을 고려하여 계획(전기배선 고려)

- 관람 피로를 낮추고 전시에 대한 흥미로운 정보를 얻을 수 있는 휴게 공간 조성

- 전시 구성에 따른 관련 전시품을 참고하여 계획

ㅇ 전시조명설비

- 전시물의 전체조명 계획에 따른 트랙조명 설치

- 전시물에 알맞은 고급 조명 장비 구입 및 설치

- 신규 조명 설치 시에는 전시품의 종류, 박물관 기존 설비 및 전시기법 등을 고려하여 적정한 시스템을 선택하여야 하며, 연색성과 색온도 등을 계획 시 반영

ㅇ 색채구성

- 전반적인 색채구성이 전체적인 조화를 이루고 전시주제와 맞도록 구성

2. 세부 지침

가. 전시 방향

ㅇ 관람객과 연구자 모두를 위한 전시

- 실별 대표 전시품을 다양한 시각의 설명･그래픽･지도･영상과 함께 제시하여 사회문화사적 중요성을 강조하고, 점자･음성 안내 등과 결합하여 누구나 관람할 수 있도록 유도

※ 실마다 통일된 디자인의 독립진열장+구조물(영상, 설명) 설치

- 관람객이 흥미를 느낄 수 있는 주제를 ‘들여다보기’로 전시에 반영하고, 어린이 눈높이의 쉬운 설명을 더해 다양한 연령층이 즐길 수 있는 전시 구현

ㅇ 병목 현상과 동선 혼란을 최소화한 동선

- 주 관람동선은 시계 반대방향으로 통일하는 것을 원칙으로 설계

- 전시실을 한눈에 조망하고 출입구를 넓힐 수 있도록 공간 조정

- 각 전시실 중심부에는 주요 전시품 배치하여 관람동선 유도

ㅇ 시간의 흐름에 따른 문화적 변화를 사람 중심으로 풀어낸 전시

- 단순한 전시품 나열이 아니라 ‘환경에 대응하는 인간의 삶’을 중심으로 문화의 변화와 발전을 이해할 수 있도록 구성

- 선사시대 각 전시실 사이에 연결고리 역할을 하는 포인트 전시를 배치하여 기술과 문화의 변화 및 발전상 강조

ㅇ 전시실에 대한 이해와 기대를 높여주는 도입부 공간

- 머나먼 과거가 아닌 현재와 연결된 시간이라는 선사고대관의 지향점을 보여줄 수 있는 공간 조성

- 한반도 최초의 인류, 문화 변화 등을 소재로 선사고대관의 시공간성을 압축･간접적으로 보여주는 완성도 높은 영상

ㅇ 고구려실 면적 및 전시품 확대

- 관람객이 가장 큰 관심과 기대를 가지는 전시실인 고구려실의 전시 공간을 확대

- 광개토대왕릉비 탁본, 벽화편(삼족오･기마인물 포함)･수막새 등 일제강점기 자료, 보루 출토 갑주 등 신규 발굴자료, 고분벽화 모사도 등

⇒ 주제별 종합적 전시로 과거의 사회･문화 모습을 입체적으로 복원

- 각 전시실마다 강조할 주제를 종합적･심층적으로 조명하며, 단순 나열식 전시는 지양

- 고고학적 맥락, 물질문화의 변화와 의미, 기술의 복원 등 과거의 사회･문화 모습에 대한 입체적 설명

나. 전시 시설 조건

ㅇ 전시공간연출

- 전시실의 천장, 벽, 바닥, 홀 등의 마감 재료는 주위 시설 및 조명과 조화를 이루고 전시물 보존에 적합한 품목을 선정하여 계획

- 전시 공사 등의 최종 마감자재는 선처리 혹은 후처리 방염되어야 하고 그에 따른 시험성적서 등의 증빙 자료 첨부 필수

- 전시품 보존 및 관람환경을 고려하여 전시자재는 실내공기징 관련법에 저촉되지 않아야 하며 성능과 안전도가 검증된 친환경 및 KS 표시품과 형식 승인품 및 그 이상의 제품을 우선 사용해야 함

※ 작품의 안전을 고려해 벽체 및 진열장 구조, 재질이 고려되어야 함

- 진열장(의장, 시스템)은 보안, 안전, 밀폐율(85% 이상), 관리의 편리성, 문화접근 취약계층 관람 편의성 등을 최우선으로 고려하여 제작 설치

※ 저반사유리(투과율 97% 이상)를 사용하여야 하며, 마감 유리에는 안전필름 부착

- 조명 색온도는 3500~4000K, 연색성은 85CRI 이상의 전시 조명을 제작하여 설치. 글레어의 차단, 색온도에 따른 광색감과 조도와의 조화, 광의 지향성과 확산성의 조화, 마감재의 반사광에 대한 고려 등을 반영하여 조명 계획을 수립

ㅇ 전시보조자료(전시대, 지지대, 받침대) 설치

- 전시 연출에 필요한 전시대, 지지대, 받침대, 기타 전시 사인물 등은 전시품의 특성이 최대한 나타나도록 디자인되어야 하며 전시 성격을 고려하여 연출

ㅇ 정보영상･키오스크 및 관련 H/W 제작·설치

- 전시 분위기 및 전시물의 이해를 돕고 흥미를 유발하는 정보영상 및 키오스크 등의 미디어를 제작하고, 필요할 경우 원활한 영상송출 및 동작을 위한 보조집기와 운영체계를 설치

※ 영상 송출 및 키오스크 운용을 위한 모든 소프트웨어는 정품으로 구입

ㅇ 그래픽(패널, 사인물) 및 홍보물

- 전시설계, 구획설정에 따라 전시품의 특성이 최대한 나타나도록 디자인되어야 하며 제작 중 수정·변경 가능

- 공간의 색조, 지도나 모식도 등의 그래픽, 정보를 전달하는 서체, 외국인을 위한 다국어 패널 등은 전체적 통일성과 각 전시실만의 개성이 드러나도록 디자인되어야 함

ㅇ 하자 및 불량품 재시공

- 시운전 또는 운영 단계에서 잦은 고장 및 수리(하자이행 기간 중 동일한 부속 및 부위 2회 이상)가 발생하는 시설･전시물･사인물･H/W 등은 하자 또는 불량품 납품으로 보아 근본적인 해결 방안을 제시하고, 발주기관의 요구 시 부분 또는 전면 재시공하여야 함

- 설계도서 및 시방서에 명기되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상, 관계법령에 규제되는 사항은 발주기관의 지시에 따라 보완 또는 재제작·설치하여야 하며 도면과 시방서의 내용이 상이하거나 명기가 없을 때 또는 해석상의 의견 차이가 있을 시에는 발주기관의 의견을 우선적으로 적용함. 건축설계에 사전요구하지 않아 발생하는 시공상의 추가공사에 대한 부분은 낙찰된 제안 업체의 부담으로 시공함.

ㅇ 폐기물 처리

- 전시시설, 체험물, 영상･키오스크 H/W, 사인물 등 사업 수행 중 발생하는 모든 폐기물은 사업자가 전적으로 책임지고 반출함

ㅇ 기타 본 지침에서 규정하지 않은 사항에 대해서는 <국립박물관 전시개편공사 기술지침>을 따름

다. 제안 유의사항

ㅇ 제안에 반영될 재료 및 특수재료에 대하여는 정부 또는 공인기관에서 인정한 일정기준 이상의 우수 재료를 선택

ㅇ 제안 업체는 제출한 제안 서류에 대하여 모든 책임을 지며 시공 도중 제안 서류의 미비점이 발견될 시는 수정하여 작업을 해야 하고, 이에 따른 추가비용은 별도로 계산하지 않음

ㅇ 도면에 표기된 단위는 관련 규정에 의하여 표시하고, 적합한 축적을 반드시 기재

ㅇ 시설물의 제작‧설치 차후 부품교체, 하자보수, 전시실 철거 등 관리유지에 용이하도록 고려하여 제안

ㅇ 본 지침서 이외의 수록되지 아니한 사항은 타 일반 공모의 관례에 의하고, 구성과 관련한 기초 자료는 제안 업체가 조사 및 검토하여야 한다.

3. 제안서 작성 요령

ㅇ 제안서에는 제안요청서에서 요구한 모든 사항에 대한 해결방안이 제시되어야 함

ㅇ 제출된 제안서의 내용은 조달청에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결시 계약조건의 일부로 간주함

ㅇ 발주기관은 필요시 제안 업체에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

ㅇ 제안 서류는 한글 및 아라비아숫자 표기, 미터법으로 작성

※ 제안서 용지규격, 페이지, 제본, 인쇄 등 형식적인 사항은 권고사항임

4. 유의사항

ㅇ 제안서 제출방법은 공고문 참조(나라장터)

ㅇ 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안 업체의 부담으로 함

ㅇ 제안 업체는 제출된 제안서류에 대한 사실여부 등의 책임을 짐

ㅇ 본 사업과 관련된 이의 및 이견이 있을 경우 제안 업체는 발주기관의 해석에 따라야 함

ㅇ 본 사업은 발주기관의 내부 사정에 따라 변동될 수 있으며, 이 경우에 제안 업체는 발주기관의 지시에 따라야 함

ㅇ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 별첨으로 제출

ㅇ 제안서 내용은 명확한 용어를 사용하며, ‘~를 제공할 수도 있다’, ‘~이 가능하다’, ‘~를 고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 평가함

ㅇ 제안 내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 이의 경우 제안 업체는 이에 응하여야 함

ㅇ 용역 결과에 따른 산출물의 소유권은 국립중앙박물관에 있음

5. 착수 및 완료(결과보고)

ㅇ 전시설계 및 제작은 계약일로부터 10일 이내에 착수해야 한다.

ㅇ 설계 보완은 박물관의 최종승인을 받아야 한다.

ㅇ 박물관의 지시에 따라 검토를 마친 뒤 세부지침서에 따른 결과물을 제출해야 한다.

ㅇ 결과물은 계약 만료일까지 박물관에 제출하여 소정의 검수절차를 거쳐야 한다.

ㅇ 박물관이 결과물에 대해 수정‧보완해야 할 사항을 요구할 경우 완료 후라도 제작자 부담으로 성실히 수정‧보완하여 제출해야 한다.

ㅇ 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충당금 및 ｢건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률｣ 제10조에 따른 퇴직공제부금, 산업안전보건관리비 등이 계상된 경우, 계약상대자는 계상된 금액을 조정 없이 산출내역서에 반영하여야 한다.

ㅇ 발주기관은 기성 및 준공대가 지급 시 ｢(계약예규)정부 입찰‧계약 집행기준｣ 제94조(대가지급 시 정산절차 등)에 따라 정산하여 지급한다.

ㅇ 준공 서류 상세내용

- 최종 설계 도면 인쇄물 2부

- 최종 설계 도면 파일

- 설명패널, 그래픽 원본 파일 / 홍보물 디자인 원본 파일

- 내역서 2부    ※ 보험료 및 산업안전보건관리비 사후정산 내역 반드시 포함

- 전체 내용 및 기타 본 전시물 제작과 관련한 내용을 수록한 저장매체

6. 제안서 세부내용

구 분	내 용	매 수	비고
기술 능력 제안서	전시 콘셉트(설계 지침에 따라 설계의도와 종합연출계획 및 시공 방법 등을 기술) 2. 전시평면(실내조감도, 평면도, 입면도, 상세도) 3. 실별 세부연출 4. 전시연출 상세(전시품 연출, 마감재, 색채, 조명계획 등) 5. 설계에 따른 공정 및 운영관리 ※ 위 내용이 포함되도록 20매 이내로 구성	총 20매 이내 (지정크기 A3)	-흑백/칼라

III. 제안서 평가

1. 제안서 평가

가. 평가위원회 구성 (※국립중앙박물관 실시)

ㅇ 규격 제안서의 공정한 기술능력 평가를 위해 7인 이상의 박물관 내‧외부의 전문가로 평가위원회를 구성한다.

ㅇ 평가위원회는 제출된 규격 제안서를 심사하여 종합평가순위를 결정한다.

ㅇ 평가위원의 명단은 공정한 심사를 위해 공개하지 아니한다.

나. 평가방법

ㅇ 제안서 평가는 기술능력평가와 가격평가로 구분하며, 기술능력평가는 정량적 평가(사업수행능력 평가)와 정성적 평가(기술능력제안서 평가)로 구분하여 실시한다.

ㅇ 제안서의 평가는 100점 만점을 기준으로 하되 기술능력평가 90점(정량적 평가 10점, 정성적 평가 80점), 입찰가격평가 10점으로 배점하여 평가하고, 종합평가 순위에 따라 최우수작으로 선정된 업체를 우선협상대상자로 한다.

※ 기술능력평가 배점한도의 85% 미만인 제안업체는 협상 대상에서 제외한다.

※ 본 사업은 전시 연출에 대한 이해와 창의성이 중요하므로, 기획재정부 <협상에 의한 계약체결기준>, 문화체육관광부 <협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 지침>에 의거하여 사업수행능력평가점수는 10점, 기술능력평가점수는 80점으로 조정한다.

※ 평가위원회를 통한 기술능력평가는 해당 사업 주관부서에서 실시하고 가격평가는 조달청에서 실시한다.

ㅇ 평가위원회는 소정의 세부평가기준에 의하여 기술능력평가(정성적 평가)를 실시한다.

ㅇ 성적 평가는 최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고점수⋅최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 3자리에서 반올림한다.

ㅇ 사업수행능력 평가는 정량적 지표에 의한 평가로서 발주기관에서 정한 기준에 따라 제출된 자료에 대해 평가점수를 산정한다.

ㅇ 우선협상자 선정은 기술능력평가와 입찰가격평가를 종합평가한 결과 고득점자로 한다.

ㅇ 합산점수가 동일한 경우에는 기술능력평가 점수가 높은 제안업체를 우선순위자로 하며, 기술능력평가 점수도 동일한 경우에는 기술능력평가(정성적 평가)의 세부항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 제안업체를 우선순위자로 한다.

ㅇ 기술능력평가(90점)는 상기의 방식으로 평가된 원 점수에 따라 입찰자의 순위를 정하고, 입찰자의 순위에 따라 고정점수를 부여하는 차등점수제를 적용하여 최종 평가한다.

- 원 점수 합계 최고점수를 기준으로 순위에 따른 강제 차등의 폭은 3점으로 한다.

- 1순위자에게 배점한도(90점 만점)를 부여하고, 2순위부터는 순차로 선순위 점수에서 3점을 감한 점수를 부여한다.

- 원점수 기준의 순위별 점수차가 차등 점수차보다 큰 경우에는 원점수의 점수차를 감한 점수를 부여한다.

- 기술능력평가 결과 점수가 동일한 제안 업체가 2곳 이상일 경우, 동일순위로 평가하여 점수를 산정하고, 그 다음 순위자의 평가점수는 후순위 점수 산정방법에 따라 점수를 부여한다.

- 단, 협상적격(배점한도 85%이상) 여부 판단은 차등점수가 아닌 원 기술능력평가점수를 기준으로 한다.

ㅇ 제안서 평가는 업체 프레젠테이션 20분, 평가위원회 질의와 업체의 답변 10분으로 진행한다.

ㅇ 제안서 심사(PT 발표) 세부 지침은 다음과 같다.

- 발표 자료는 온라인으로 제출한 자료로 하며, 추후 별도의 발표 자료 제출은 불가함

- PT 발표는 당일 현장 추첨을 통해 발표 순서를 정함

- PT 발표는 업체 프레젠테이션 20분 이내로, 질의응답은 10분 이내로 제한함

- PT 발표 장소 및 시간은 제안서 제출 후 별도로 유선 통보함

다. 평가결과 발표

ㅇ 제안서 평가 기관(수요기관)의 장은 제안서 평가 종료 후 평가결과를 개별업체 통보(평가위원별‧항목별 평가점수) 후 전자조달 시스템 또는 수요기관 정보처리장치 등을 통해 공개하며, 평가결과 공개 시 평가위원명은 비공개한다.

ㅇ 제안서 평가결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니할 수 있다. 이 경우 전자조달시스템 또는 발주기관의 정보처리장치에 제안서 평가결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재하여야 한다.

라. 기타

ㅇ 제안서 심사결과 및 세부내용에 대한 질의에는 응답하지 않으며, 제안 업체는 평가위원 구성, 평가기준, 방법, 결과에 대해 이의를 제기할 수 없다.

ㅇ 당선 제안서 공고 후 5일 내에 반출치 아니한 제안 서류는 주최자가 임의 파기한다.

2. 평가항목 및 평가기준

가. 규격 제안서의 평가

ㅇ 규격 제안서의 평가는 총점 90점 만점(기술능력 평가 80점, 사업수행능력 평가 10점)을 기준으로 하되 배점한도의 85% 이상인 경우에 적합으로 평가

ㅇ 사업수행능력 평가는 객관적 지표에 의한 정량평가로서 정해진 기준에 따라 제출된 자료에 대해 평가점수를 산정

나. 규격 제안서 평가(안)

ㅇ 평가항목 및 배점기준

구분		평가항목	세부 평가항목	배점		비고
기술능력평가	사업 수행 능력 평가 (10)	사업수행실적	․입찰일 전일 기준 3년간 실적누계	4	10
		기술능력	․참여기술자	3
		경영상태	․기업신용도 평가등급	3
	기술 능력 평가 (80)	사업 이해도	․사업목적과 내용의 이해도 ※ 유사사례 분석 및 적용의 타당성 포함	10	20
			․공고 규격 또는 기술과의 적합성	10
		기획 및 연출방법	․공간 조성 및 연출 콘셉트 및 디자인의 창의성과 적정성	10	20
			․각 전시실의 유기적인 조화 및 연계성	10
		세부연출 계획	․전시 연출 요소의 적정성과 독창성	10	30
			․공간 조성 및 연출 매체와 기법의 기술성 및 구현 가능성	10
			․마감재, 조명, 색채 구성의 적정성	10
		관리 및 운영계획	․관리 및 운영계획의 적정성 ․안정성과 편의성	5	10
			․사업수행 공정 및 수행방법의 타당성 ․품질보증 계획의 적정성	5
입찰가격평가(10)				10	10
계				100	100

ㅇ 사업수행능력평가 : 정량적 평가

※ 공동수급체 결성 시, { (A사 실적×A사 지분율)+(B사 실적×B사 지분율)…}에 대한 점수

- 사업수행실적 [배점 4점]

평가 항목	평 가 요 소	배점	평 가 방 법		비 고
			기 준	평점
수행 실적	본 사업규모(24억, 부가세포함) 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행(금액기준)실적 합산	4	A. 100%이상 B. 70%이상~100%미만 C. 40%이상~70%미만 D. 40%미만	4.0 3.6 3.2 2.8	-실적인정범위: 공공 및 민간 실적(박물관, 미술관, 과학관, 기념관, 전시관 등)의 전시연출 유사용역 및 시공실적 -건수 평가는 불가하고 실적금액으로만 평가

* 실적은 준공 또는 납품 완료된 것만 인정

* 실적인정범위

․국가, 지방자치단체, 공공기관, 민간업체 등에서 발주하여 아래의 전시관에 설치된 전시연출

․전시관: 과학관, 박물관, 체험관 등

* 준공(납품) 금액이 기재된 발주기관 발행 실적 증명서 사본(사실과 상위 없음 확인 날인 필)을 제출하여야 함(민간실적의 경우에는 계약서, 세금계산서를 제출해야 함)

* 실적증명서는 발급 후 1년 이내의 것만 유효함(입찰공고일 기준)

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 둘째자리에서 반올림함

* 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용. 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용

- 기술능력 [배점 3점]

평가항목	평가요소	배점	평가방법
참여기술자	등급 및 인원	3	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
			0.5	0.4	0.3	0.2
			○ 평점 = 인원 × 기술자별 점수 ※ 평점의 합이 최종점수(최저 2.1점 / 최고 3점)

* 기술자에 대한 등급은 과학기술부 공고 “엔지니어링사업대가의 기준”의 <별표 4>의 기술자 등급 및 자격기준에 의함

* 공고일 기준 2개월 이상 해당업체에 근무하고 있는 기술자만 해당

* 재직증명서, 공인기관자격증(해당자), 최종학교졸업증명서, 국민연금관리공단 확인서 첨부

- 경영상태 [배점 3점]

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	3
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	2.85
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	2.7
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	2.1

*「기업신용평가등급」 (회사채에 대한 신용평가등급에 준함)에 의한 평가

* 기획재정부「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」제16조, 문화체육관광부「협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리지침」제8조, 조달청「협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준」별표8에 따름

* ｢신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률｣ 제4조 제1항 제1호 또는 ｢자본시장과 금융투자법에 관한 법률｣ 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전(유효기간만료일이 입찰공고일인 경우 인정)에 평가하고 유효기간 내에 있는 ‘기업신용평가등급’으로 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가. 단, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으나, 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가함

* 신용평가등급 확인서 미제출 업체는 최하점수를 적용함

ㅇ 기술 수행능력평가 : 정성적 평가

※‘나. 규격 제안서 평가(안) - 평가항목 및 배점기준’ 참고

다. 가격평가(10점): 관계 법령에 따라 조달청이 실시

3. 저작권 및 사용권

ㅇ 타인의 지적 재산권 침해 등으로 분쟁이 발생할 경우 낙찰된 제안 업체에 책임이 있음

ㅇ 발주기관은 협상 대상 제안서의 수정‧보완 및 변경에 대한 일체의 우선적 권한을 가짐

ㅇ 본 수행의 결과로 발생하는 모든 성과물의 지식재산권은 발주기관에 귀속됨

ㅇ 제3자의 저작물을 이용한 경우 사전에 제3자에게 저작재산권을 양도받거나 이용 허가를 받음으로써 발주기관이 해당 산출물을 이용함에 있어서 법적 또는 기술적 문제가 발생하지 않도록 함

ㅇ 성과물 중 사진 저작물에 인물이 포함된 경우 제3자가 해당 저작물을 이용하는데 초상권에 관하여 민형사상 책임이 발생하지 않도록 함

ㅇ 본 사업수행과 관련한 국가 간, 기관 간의 협약에 의해, 성과물의 사용 및 배포에 제한이 있을 수 있음

4. 제안 업체의 실격

ㅇ 다음의 경우에는 관련 규정에 따라 처리함

- 제안서에 기재된 사업자의 기술과 경력사항 등 중요한 내용이 허위로 밝혀질 경우

- 제안서, 입찰, 계약에 관한 서류에서 허위사실 기재가 발견될 경우

- 제안 내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나, 담합하였다고 판단되는 경우

- 제안 업체가 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 제안 서류를 제출했을 경우

- 기타 평가위원회가 제안 서류가 실격이라고 의결할 경우

5. 기타

ㅇ 상기 기술한 내용 외에 평가관련 사항은 공개하지 아니함

ㅇ 주최자는 평가결과에 대한 질의에 응답하지 않으며, 제안 서류 제출자는 평가위원 구성, 평가기준, 평가결과에 대하여 일체 이의를 제기할 수 없음

ㅇ 실적증명은 첨부 양식을 원칙으로 하되 기 발행 받은 것은 1년 이내 시 유효함

ㅇ 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출해야 함

ㅇ 기타 사항은 「문화체육관광부 협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 지침」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 규정을 준용함

6. 제안 일정

ㅇ 제안 요청 사업설명회는 개최하지 않음

※ 현장 확인은 담당자와 사전 일정 협의 후 가능(☎02-2077-9469)

ㅇ 제안서 발표 일정

- 제안서 제출 업체는 지정된 일시‧장소에서 제안서에 대한 발표를 진행해야 함

- 제안서 발표 일정은 추후 공지(개별 연락)

- 발표시간은 업체당 30분(발표 20분+질의응답 10분)

- 설명자료는 제안서 접수 시 제출한 파일 활용

■ 제안서 발표 시 발표자의 자격, 참가자 등

ㅇ 제안서 발표자는 반드시 제안 업체가 지정한 사업관리자이어야 하며, 제안 업체 소속 임·직원으로서 입찰공고일 전부터 제안서 평가일까지 계속 재직 중인 자이어야 함

※ 발표자가 제안서에 명시된 사업관리자가 아닐 경우에는 발표할 수 없으며, 기제출된 제안서를 기준으로 평가함

※ 발표자 신분 확인[4대보험가입내역확인서, 재직증명서, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등) 필수 지참]

ㅇ 발표 장소에는 업체당 발표자 포함 2인 이내 직원만 입장할 수 있으며, 타 제안 업체의 발표를 청취할 수 없음

[서식 1호]

2024년 국립중앙박물관 선사고대관(도입부~고구려실) 전시환경 조성 제안서 응모 신청서
접 수 번 호		2024 -
접 수 일 자		2024년 월 일
제 출 자 (대 표 사)	업 체 명
	대 표 자
	주 소
	전 화	TEL : FAX :
국립중앙박물관에서 시행하는 「2024년 국립중앙박물관 선사고대관(도입부~고구려실) 전시환경 조성」 제안에 필요한 서류를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 국립중앙박물관장 귀하

[서식 2호]

사업수행능력 자기 평가표

항 목 (총 10점)	세 부 항 목		배 점	평 점	비고
사업수행 실적 (4점)	본 사업 규모 (24억1천만원, 부가세 포함) 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행 실적 합산 (금액기준)	A. 100% 이상	4.0
		B. 70% 이상~100% 미만	3.6
		C. 40% 이상~70% 미만	3.2
		D. 40% 미만	2.8
기술능력 (3점)	참여 기술자 등급별 인원수× 등급별 점수 ※ 최저 2.1점 / 최고 3점	A. 특급기술자 0.5			( )명×0.5점
		B. 고급기술자 0.4			( )명×0.4점
		C. 중급기술자 0.3			( )명×0.3점
		D. 초급기술자 0.2			( )명×0.2점
경영상태 (3점)	기업 신용도 평가등급	회사채 BBB0, 기업어음 A30, 기업신용평가등급 BBB0 이상 등급	3.0
		회사채 BB-, 기업어음 B0, 기업신용평가등급 BB- 이상 등급	2.85
		회사채 B-, 기업어음 B-, 기업신용평가등급 B- 이상 등급	2.7
		회사채 CCC+ 이하, 기업어음 C 이하, 기업신용평가등급 CCC+ 이하	2.1
계

[서식 3호]

제안 업체의 일반현황

1. 기본사항

업 체 명		대표자
주 소		관할세무서
전화번호		팩스번호
사업자번호		업 종
면허/허가/ 등록증보유현황
총종업원수		매출액 (최근년도)
부채비율(%) (타인자본/자기자본X100)
유동비율(%) (유동자산/유동부채X100)
자 본 금

2. 업체연혁

연월일	내 용	비 고

※ 자격보유업체는 면허증, 허가증, 등록증 사본 첨부

※ 제작공장 보유시에는 공장등록증 사본 첨부

※ 특허보유현황은 관련 특허 개수를 면허증, 허가증, 등록증 보유현황에 표시하고 특허증 사본 첨부

[서식 4호]

실 적 증 명 서

신 청 인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처		국립중앙박물관
	증명서용도		<2024년 국립중앙박물관 선사고대관(도입부~고구려실) 전시환경 조성> 실적 증명용
	사 업 규 모
사업수행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦				100%
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적		비 고
					비율(%)	실적(원)
			～
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2024년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급부서 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함.

[서식 5호]

사업수행 실적 집계표

구 분	공 사 명		공 사 기 간	준공금액 (단위: 백만원)	발 주 처		타사와 공동프로젝트수행여부	비 고
					기관명	전화번호
①최대실적 (1건)
	소 계
②기타실적
	소 계
합 계 (①+②)

① 사업명(연도순으로 기재하며 본 업무와 유관한 것만 기재): 해당 건수별로 정확하게

② 계약금액: 공동으로 업무를 수행한 경우 총액을 기재하되 자사의 비용만을 괄호 안에 기재

③ 구체적인 업무수행 내용: 수행작업내용을 단계별(현황분석 및 진단, 기본계획 및 실행계획수립, 업무개발, 장비구입 등)로 작성

④ 공동 프로젝트 수행여부: 타사와 공동으로 프로젝트를 수행한 경우 타사의 상호명을 기재

※ 실적증명원(사실과 상위 없음 확인 날인 필)사본 1부. 단, 수행(수주포함)중인 사업에 한하여 계약서 사본1부 첨부

※ 단, 확인결과 기재된 내용 중 허위사실이 발견된 경우 0점 처리함

[서식 6호]

기술인력 보유현황

구분	일련 번호	등 급	기 술 분 야	자 격 종 목	성 명	등록일 (취득일)	경 력 기 간	등록번호	비 고
실내건축 기 술 자
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○○
기타

※ 기술자의 구분은 엔지니어링기술진흥법 제10조 규정에 의한 엔지니어링사업 대가의 기준에 따르며 <별첨5>참조, 공고일 기준 2개월 이상 입사한 자로 본 사업에 참여할 기술자만 명기

※ 분야별 기술자 기재순서는 평가 시 참고할 수 있도록 순위별로 기재

※ 자격증, 최종학력증명서, 경력증명서 및 4대 보험 확인서 첨부

[서식 7호]

신용평가 등급 확인서

발행번호 :

업 체 명		기업 신용 등급
대 표 자
법인등기부등본 (주민등록번호)
사업자 등록번호
주 소
재무결산기준
등급 평가일
등급 유효기간

귀 사의 의뢰에 따라 작성한 기업신용등급인증용 기업신용등급을 아래와 같이 통보합니다.

교부일  2024.   .   .

신용평가기관 :                           인

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함.

[서식 8호]

서     약     서

국립중앙박물관에서 추진 중인 「2024년 국립중앙박물관 선사고대관(도입부~고구려실) 전시환경 조성」 입찰에 참여한 당사는 국립중앙박물관의 제안요청서를 성실히 준수하고 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 불이익을 감수 할 것이며, 응모와 관련한 응모 작품 제출, 심사, 낙찰, 계약 결과 등에 대하여 어떠한 이의 없이 귀 관의 결정에 따를 것을 확약하고 이 서약서를 제출합니다.

2024년     월      일

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

국립중앙박물관장 귀하

[서식 9호]

서   면   질   의   서

발송일시	2024년 월 일
제 안 서 접수번호		연락처	(전화) (FAX)
업 체 명	(대표: )
제안서 쪽수
질의내용	※ 질의는 대표사의 대표자만 할 수 있습니다. ※ 제안요청서를 다시 한 번 숙지하신 후 질의하여 주시기 바랍니다.

[서식 10호] 기술능력 제안서표지양식 (참고용)

2024년

2024년 국립중앙박물관 선사고대관(도입부~고구려실) 전시환경 조성

1. 표지크기 : A3

2. 단위는 ㎜

3. 문자는 굴림체, 흑색사용

4. 글자크기 : 제목 30, 72호, 날짜. 22호, 식별번호 22호

2024년 국립중앙박물관 선사고대관(도입부~고구려실) 전시환경 조성 제안서

5. 좌우간격은 중앙 정렬함

7. 제안서 심사에 제출하는 모든 문서의 여백, 앞뒤, 표지 등 어느 곳이든 작성 또는 공모업체 등을 인지할 수 있는 어떠한 표기도 하지 않아야 하며, 인지할 수 있다고 객관적으로 판단되는 특정표기가 발견될 시 공정한 심사를 위해 임의로 삭제할 수 있음.

[서식 11-1호] (해당 시 제출)

공동수급표준협정서 (공동이행방식)

(계약예규) 공동계약운용요령[시행 2021. 1. 1.]

[기획재정부계약예규 제539호, 2020. 12. 28., 일부개정]

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․입찰․시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대해 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명:

2. 계약금액: ※기재하지 말 것

3. 발주자명:

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭: ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지:

3. 대 표 자 성 명:

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자:                소재지:                           )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자:                소재지:                           )

②공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표자는 발주기관 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명‧날인과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리․의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ㅇㅇㅇ:    %

2. ㅇㅇㅇ:    %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

[본조신설 2012.4.2.]

제11조(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우 <신설 2012.4.2.>

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다. <개정 2010.9.8.>

③제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2024년  월  일

ㅇㅇㅇ (인)

ㅇㅇㅇ (인)

국립중앙박물관장 귀하

[서식 11-2호] (해당 시 제출)

공동수급 합의 각서

입찰공고번호	제 호	입 찰 일 자	2024년 월 일
입 찰 건 명

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참가하고자 귀 기관에서 정한 각종조건, 제안요청서 및 입찰공고사항 등을 전적으로 승낙하며 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 결의하였기에 본 합의각서를 제출합니다.

2024년  월   일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지 :

상           호 :

성           명 :              (인)

사업자 등록번호 :

주민 등록  번호 :

공동수급체 구성원

주사무소 소재지 :

상           호 :

성           명 :               (인)

사업자 등록번호 :

주민 등록  번호 :

국립중앙박물관장 귀하