‘스포츠·문화·관광이 하나로 어우러진 대한민국 , 세계의 중심으로’

올림픽스포츠콤플렉스 조성 사업계획(안)

2013. 1.

올림픽스포츠콤플렉스 조성사업 계획(안)

올림픽회관과 올림픽파크텔을 중심 건축물로 삼아 스포츠 테마 융․복합공간을 조성하여 대한민국이 글로벌 리더로 세계 스포츠 발전을 선도하는 핵심거점 구축 및 스포츠 특화 부가가치 창출

Ⅰ. 사업의 목적 및 필요성

□ 글로벌 스포츠 중심국가로 성장을 위한 핵심거점 구축

‘2018 평창동계올림픽’ 개최를 지원하는 동시에 동북아 스포츠 협력 HUB로 활용

세계 10대 스포츠강국의 위상에 걸맞은 스포츠 국제 협력 강화 및 스포츠 한국의 거점 구축

□ 올림픽공원을 스포츠·문화예술·관광이 한 데 어우러지는 융·복합 허브로 구축

올림픽의 상징성과 몽촌토성의 역사성을 살려 공원 내 문화예술 한류 거점(올림픽홀․K-아트홀․SOMA미술관․한성박물관 등)과 연계하여 복합 개발

국제 스포츠 교류, 문화예술 및 관광을 동일 공간에서 향유 가능한 공간체계 구축

□ 체육단체 업무환경 개선 및 업무시설 집적화로 융·복합 스포츠 행정 선진화 기반 마련

업무시설 집적화를 통해 ‘원스톱 스포츠 행정체계’ 구축 및 열악한 업무 환경 개선으로 체육계 숙원 해결

※ 체육단체 업무시설이 협소하고 노후화되어 있거나 올림픽공원 내 경기장 등 용도에 부합하지 않은 시설에 위치(농구, 태권도, 장애인배드민턴 : 벨로드롬/ 핸드볼, 소프트볼 : 핸드볼경기장/ 사격, 야구 등 : 외부)

Ⅱ. 사업계획(안)

1. 조성 방향

□ 올림픽회관 리모델링, 업무시설 증축, 올림픽파크텔 리모델링을 통해 체육단체 집적공간 확충 및 ‘원스톱 스포츠콤플렉스’ 조성

기존의 단순 업무․유스호스텔 시설 → 스포츠 특화 업무․회의․숙박․관광․문화생활 등 복합서비스 제공 시설로 확충

2. 사업 개요

□ 사 업 명 : ‘올림픽스포츠콤플렉스’ 조성사업

□ 총사업비(추정) : 4,437억원(기금 1,264억원/ 민자 3,173억원)

□ 사업기간 : 2013년 ~ 2015년(3년)

□ 사업위치 : 서울 송파구 방이동 88번지 일원(올림픽회관 인근)

□ 조성규모 : 부지 123,492㎡(37,356평), 연면적 173,747㎡(52,558평)

□ 조성내역 : 올림픽회관 리모델링, 업무시설 증축, 파크텔 리모델링,

숙박·상업시설 증축

구분	목적 / 기능(용도)	규 모
회관 리모델링	□ 체육단체 업무시설 집적화 □ 체육단체 사무공간	□ 24,303㎡(7,352평) □ 지하 2층, 지상 15층
업무시설 증축		□ 20,330㎡(6,150평) □ 지하 5층, 지상 13층
파크텔 리모델링	□ 유스호스텔 시설 기능 향상 □ 국내외 청소년 수련시설	□ 25,200㎡(7,623평) □ 지하 1층, 지상 18층
숙박시설	□ 국내외 스포츠 관계자 및 해외 관광객 편의 제공 □ 호텔(430실 규모, 특1급)	□ 85,500㎡(25,864평) - 호텔 67,500㎡ - 컨벤션시설 6,000㎡ - 상업시설 12,000㎡
컨벤션시설	□ 국제 스포츠 외교력 강화 □ 스포츠관련 행사 개최 공간 - 국제회의, 전시, 세미나 등
상업시설	□ ‘스포츠 전문 쇼핑몰’ 등 스포츠 특화서비스 제공

Ⅲ. 향후 추진계획

1. 사업 추진방침

□ 2018 평창동계올림픽대회 지원센터로 활용

올림픽스포츠콤플렉스 시설을 ‘프레올림픽(속칭)’ 개최시기(’17년 2월) 이전에 완공하여 2018 평창동계올림픽대회의 성공 개최를 위한 지원센터로 활용

※ 2018 평창동계올림픽대회 개최기간 : 2018. 2. 9 ~ 25(예정)

□ 기금/ 민자사업의 조화와 균형을 통해 융·복합 공간 완성도 제고

예비타당성조사 대상사업인 기금사업을 우선 추진하되, 동 조사 결과의 긍정적 도출을 전제로 민간자본 유치를 통해 숙박·상업 시설을 증축하여 올림픽스포츠콤플렉스 조성의 효과성 및 운영의 효율성을 제고할 계획

2. 사업 추진일정(기금사업)

□ ’13.  1. ~ ’13.  4.	예비타당성조사 실시(기재부/KDI)

□ ’13.  5. ~ ’13. 12.	타당성조사 및 기본계획 수립(공단)

□ ’14.  1. ~ ’14.  6.	설계 및 인허가(공단 ↔ 관계기관)

□ ’14.  7. ~ ’16.  6.	착공 및 준공(2년)

※ 민자사업은 기금사업 예비타당성조사 결과에 따라 일정계획 수립·추진

현 재	미 래