제 안 요 청 서

국립중앙박물관 어린이박물관

<제100회 어린이날 특별전시>

전 시 연 출 용 역

2022. 1.

국 립 중 앙 박 물 관

구분	직책	소속	성명	연락처	기타
사업 책임자	학예연구관	어린이박물관과	성명: 이태희	TEL: 02)2077-9630	FAX: 02)2077-9945 ddoo20@korea.kr
사업 실무자	학예연구사	어린이박물관과	성명: 박연희	TEL: 02)2077-9632

1		사업개요

1. 사업명 : 어린이박물관“제100회 어린이날 특별전시” 전시연출 용역

2. 사업목적

ㅇ 제100회 어린이날을 맞이하여 어린이날 제정의 의미를 돌아봄

ㅇ 어린이에게는 부모의, 부모에게는 어린이의 생각과 감정을 이해하는 소통의 계기를 마련하고 공감과 힐링의 경험 제공

3. 사업내용

가. 시설현황

1) 위   치 : 서울특별시 용산구 서빙고로 137 국립중앙박물관

2) 전시공간 : 어린이박물관 특별전시실 251㎡(외벽 포함)

나. 사업범위

1) 전시 기획에 따른 전시연출 기본설계와 실시설계

2) 시설 및 구조물 제작·설치, 유지운영, 사진전을 위한 전시물 설치

3) 전기 및 조명 등 관련 설비 보완 및 설치

4) 사진 패널, 진열장 및 보조대, 기타 전시보조물 제작 및 설치

5) 그래픽 제작·설치(텍스트·이미지 패널, 레이블 등)

6) 전시 영상콘텐츠 제작(촬영, 음향, 편집 등 제작업 포함) 및 설치

7) 전시관련 연출모형 제작 설치

8) 모형 및 미디어 시설 설치를 위한 전기설비

9) 전시연출을 위한 구조물 제작 및 설치

10) 전시 관련 체험 구성 및 제작

11) 기존 전시 철거 및 환경 정리

다. 사업기간 : 계약체결 후부터 2022년 5월 10일(화)까지

1) 실시설계 : 계약 후 30일 이내

2) 전시구조물 제작·설치(준공청소 포함) : 2022.4.22.까지

3) 전시 자료·콘텐츠 배치 및 그래픽 작업 : 2022.4.26.까지

4) 전시보완 및 시운전 : 2022.4.27.~5.2.

5) 전시기간: 2022.5.4.(수)~8.31.(수) *개막식: 2022.5.3.(화)

※ 하자 보수 및 보증기간 : 5개월

라. 사업비

1) 사업예산: 350,000,000원(금삼억오천만원)(부가세 포함)

2) 창작, 설계, 전시구조물 제작·설치, 전시공간 재정비, 전시콘텐츠 제작, 사진 출력, 액자제작 및 설치, 전시 영상콘텐츠 제작, VR 및 체험 프로그램 제작, 전시모형 제작, 보조대 및 기타 전시 보조물 제작, 제세공과금 등 기타부대비용 일체 포함

4. 계약 방식

ㅇ 협상에 의한 계약(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제43조)

5. 응모자격

ㅇ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 입찰서 제출 마감일 전일까지 기타자유업(행사대행업)(업종코드:9901)으로 입찰참가자격을 등록한 자.

ㅇ 필요 시 공동이행방식 가능

6. 제안일정

1) 조달청 계약의뢰 : 2022.1.

2) 입찰공고 게시 : 입찰공고서 참조

3) 제안서 및 입찰서 제출 : 입찰공고서 참조  ※ 현장설명회 없음

4) 제안서 평가 : 제안서 접수 마감일로부터 10일 이내

※ 제안서 평가 일정은 변동될 수 있음.

7. 제출서류 (입찰공고서 참조)

ㅇ 정성제안서 1식 : 제안서(A3 10~20매/내용: 설계설명서, 설계도, 예정공정표)

ㅇ 정량제안서 1식 : 응모서류 (A4/내용: 서식 1~10 에 해당하는 응모서류)

※ 제안서 등 제출서류는 나라장터를 통해 전자적으로 제출하여야 하며, 나라장터를 통해 제출하는 제안서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출하여야 하며, 총 용량은 200MB를 초과할 수 없습니다.

2		제안 지침

1. 기본지침

가. 연출방향

ㅇ 부모와 어린이가 공감하고 소통하는‘일상’의 가치와 의미를   ‘놀이’,‘선물’,‘대화’세 가지 키워드로 알아가는 추억과 힐링의 공간 연출

ㅇ 부모와 어린이의 일상과 관련한 일러스트와 디자인 속에서 색다르게 마주하는‘쉼’과‘놀이’를 통해 친근감을 가질 수 있도록 연출

ㅇ 높은 층고(6m) 및 자연광을 활용한 구조물 설치로 입체적 공간 연출

ㅇ 영상·디지털·아날로그 체험전시물을 적절히 안배하여 관람객이 전시를 효과적이고 흥미롭게 감상·체험하도록 연출

나. 일반 지침

ㅇ 기본방향, 주제, 내용, 연출, 예산 등을 충분히 숙지한 후 제안서 내용 및 발주기관과 추가로 협의한 사항을 토대로 설계

ㅇ 모든 과업은 본 지침에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부가 제정한 각종 기준과 연계 검토한 후 수행

ㅇ 설계 및 제작·설치·실물 구매는 각 단계별로 발주기관이 승인한 관련분야 전문가로부터 자문을 받고, 발주기관과 협의 후 시행

ㅇ 본 과업과 관련하여 기존 설비(건축, 전기, 통신, 소방, 방범 등)의 목적과 기능이 유지되도록 계획하며, 관련분야에 대한 법규(건설산업기본법, 전기공사업법, 정보통신사업법, 어린이놀이시설안전관리법 등)를 면밀히 검토하여 누락사항이 발생하지 않도록 하고 기존 설비와의 호환에 문제가 없도록 제작하여야 하며, 누락 발생 시 사업비 증액 없이 사업자가 보완·제작하여야 함

ㅇ 건축과 관계되는 구조나 기타 안전성에 문제가 없도록 해야 하며, 필요시 구조안전진단 등을 실시하며 이상의 안전 관련 점검 및 진단에 수반되는 비용은 사업자가 부담

ㅇ 모든 전시관련 자료(영상, 사진, 이미지, 데이터, 텍스트 등)의 확보(촬영, 구매, 임대, 지급 등) 및 제안내용 등이 특허권, 저작권 등 배타적 권리와 관련되었을 경우 사업수행자는 반드시 특허권, 저작권 등 배타적 권리의 확보증빙서류를 제출하여야 하며 분쟁 발생 시 사업자가 민형사상의 모든 책임을 져야함

ㅇ 사업수행 중 정책변경 등 불가피한 사유 발생 시 발주기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있으며 이에 따른 간접비의 지급은 없음

ㅇ 전시물 제작·설치 기간에는 사업을 총괄하는 PM이 박물관에 상주하며 진행하며, 필요한 현장사무용 공간은 사업자 비용부담으로 설치함

ㅇ 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 경우에는 발주기관의 해석에 따름

ㅇ 기존 각종설비(전기, 통신, 방범, 공조 등)의 목적과 기능이 유지되도록 하되, 사전에 발주처와 의논하여 시공하며, 전시 종료 시 원상복구 한다.

2. 세부 지침

가. 전시 공간 연출

ㅇ 국립박물관 위상에 맞는 전시 연출을 설계하며, 전시 방향, 목적, 주제를 참고하여 계획

ㅇ 전시실 입구를 포함한 전시 전체는 공공문화시설로 어린이박물관의 특성에 맞고, 관람객(장애인, 외국인 등 포함)의 인지성과 편의성을 반영하여 설계

ㅇ 전시장 내 관람 동선이 원활하고, 체험물 간에 상호 유기적인 체계가 이루어질 수 있으며, 기존 상설전시 및 교육 공간과 관람 동선이 유기적으로 연결될 수 있도록 설계

ㅇ 전시실의 천장, 벽, 바닥, 홀 등의 마감 재료는 주위시설 및 조명에 조화되고 체험에 적합한 품목을 선정하여 계획

ㅇ 전시구조물의 전체조명 및 집중조명에 적합한 조명배치와 조명기구를 계획(조명은 전시장에 배정된 기본 장비를 제외하고, 업체에서 준비)

ㅇ 시설 자재는 어린이에게 무해한 재료 및 친환경 제품 사용하고, 유지 관리가 용이한 재료로 변질되지 않아야 하며, 수시로 채색을 필요로 하는 재료는 지양

나. 체험 시설

ㅇ 어린이 연령(6~9세)에 맞게 제작하되, 장애 어린이(시·청각·지적·지체 등)들에게도 불편함이 없도록 안전, 관리의 편리성 등을 최우선으로 고려하여 설계

ㅇ 놀이와 교육의 다용도 기능이 가능하며 이동, 조립이 용이할 수 있도록 모듈식 설계 지향

ㅇ 어린이들과 상호작용이 가능한 시설로 직접 만져본다는 특성을 감안하여 유지·보수가 용이하도록 디자인

ㅇ 참여자의 상호작용과 협업 활동이 가능한 창의적 체험방식으로 최소 4인 이상 동시 활동이 가능하게 설계

다. 미디어 제작 및 기기(영상, 체험) 설치

ㅇ 전시 분위기 및 전시 목적의 이해를 돕고 관심을 집중할 수 있는 미디어 제작

ㅇ 미디어는 전시장 내에 원활히 설치, 작동될 수 있도록 설비를 구축하고, 실시간 원격 보수가 가능한 방향으로 설계

※ 공간적 분위기가 연출된 미디어아트가 결합된 연출 제안

※ 관람객 맞춤형 체험 서비스 확대를 위한 인터랙션 연출 제안

ㅇ 미디어 제작은 상영에 필요한 영상케이블, 전원공급, 거치대, 영상기기 세팅 등 일체를 포괄하며 영상기기는 전시장에 배정된 기본 장비를 제외하고, 업체에서 준비

ㅇ 어린이 특성에 맞는 전문 일러스트 제작 및 활용

ㅇ 체험물 기자재는 전시 영역별 주제 및 구성에 따라 품목과 수량, 규격에 변동 가능

ㅇ 미디어 및 일러스트 제작은 지명도 있는 전문가(기성 작가)와의 협업을 통해 진행하며, 협업 계획을 제안에 포함하여야 함.

※ 협업 작가의 최종 선정은 계약 후 발주처와 협의 후 선정, 작업 수행

ㅇ 전시실 구성 기간 및 완료 후, 동영상으로 촬영하여 온라인 콘텐츠로 서비스가 가능하도록 제작

라. 그래픽

ㅇ 발주처가 사전 공고한 주제와 내용을 참고하여 제안하고, 전시설계, 구획설정, 내용전달 등에 따라 실크스크린·스카시·시트커팅·일반인쇄 등으로 하며 제작 중 수정·변경 가능

ㅇ 전시실 내ㆍ외부 사인물의 내용은 발주기관의 승인을 받은 후 제작하여야 하며 외국어 자문은 해당 언어를 모국어로 사용하는 자에게 받아야 함

마. 제작 및 설치

ㅇ 사업자는 과업수행에 있어서 안전관련 법규에 따라 철저한 안전관리를 시행하고 사고 및 재해방지에 노력하여야 하며, 과업 수행 중 발생하는 화재, 도난, 유실, 손상과 사업자 및 하수급자의 안전사고에 대한 모든 책임을 져야함

ㅇ 구조변경이 필요한 경우, 구조기술사에 의한 구조진단 실시 후 제작에 착수하여야 하며 구조진단 비용은 사업자가 부담

ㅇ 어린이박물관 전시개편 전 과정에서 발생하는 폐기물은 사업자가 전적으로 책임지고 반출하여야 하며 준공 시에는 개관행사 및 일반 공개 가능한 수준의 준공청소 실시

ㅇ 사업자는 계약 결과물의 하자와 관련 검토 및 보수를 하자담보기간 내에 처리하여야 하며, 그 비용은 사업자가 부담

바. 마감 청소 및 시범운영

ㅇ 시공 완료 후 마감 청소 및 5일간 시범운영 실시

ㅇ 시범운영 기간 동안 제안사는 관리 및 운영인력을 배치

ㅇ 시범운영 기간 중 발생한 제반 문제점은 즉시 수정․보완하여야 하며 추가비용은 제안사측 부담

3. 제안서 작성 요령  ※ 제안서 용지규격/페이지/제본/인쇄 등 형식적인 사항은 권고사항임.

가. 제안서의 작성지침

ㅇ 제안서에는 제안요청서에서 요구한 모든 사항에 대한 해결방안이 제시되어야 함

ㅇ 제출된 제안서의 내용은 조달청에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결시의 계약조건의 일부로 간주 함

ㅇ 발주처는 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

ㅇ 응모서류는 한글 및 아라비아숫자 표기, 미터법으로 작성

4. 유의사항

가. 제안서 제출방법은 공고문 참조(나라장터)

나. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 입찰참가자의 부담으로 함

다. 응모자는 제출된 제안서류에 대한 사실여부 등의 책임을 짐

라. 본 사업과 관련된 이의 및 이견이 있을 경우 응모자는 발주처의 해석에 따라야 함

마. 본 사업은 발주처의 내부 사정에 따라 변동될 수 있으며, 이 경우에 제안자는 발주처의 지시에 따라야 함

바. 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출

사. 제안서 내용은 명확한 용어를 사용하며, ‘~를 제공할 수도 있다’, ‘~이 가능하다’, ‘~를 고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 제안서 평가시 불가능한 것으로 평가함

아. 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 이의 경우 입찰참가자는 이에 응하여야 함

자. 용역결과에 따른 산출물의 소유권은 국립중앙박물관에 있음

5. 착수 및 완료(결과보고)

가. 전시설계 및 제작은 계약일로부터 10일 이내에 착수해야한다.

나. 설계보완은 박물관의 최종승인을 받아야 한다.

다. 박물관의 지시에 따라 검토를 마친 뒤 제작·인쇄하고 세부지침서에 따른 결과물을 제출해야 한다.

라. 결과물은 계약 만료일까지 박물관에 제출하여 소정의 검수절차를 거쳐야 한다.

마. 박물관이 결과물에 대해 수정․보완해야 할 사항을 요구할 경우 완료 후라도 제작자 부담으로 성실히 수정․보완하여 제출해야 한다.

바. 준공도서 상세내용

ㅇ 설계도서 1부

ㅇ 설명패널, 그래픽 원본 파일 / 홍보물 디자인 원본 파일

ㅇ 내역서 2부

ㅇ 전체 내용 및 기타 본 전시물 제작 관련 내용을 담은 저장매체 3식

6. 제안서 세부내용

구 분	내 용	매 수	비고
기술 제안서	전시컨셉 2. 전시평면 3. 실별 세부연출 4. 전시연출 상세(유물연출, 마감재, 색채, 조명계획 등) 5. 설계에 따른 공정 및 운영관리	총 10~20매 (지정크기A3)	흑백 ․ 칼라

3		제안서 평가 및 협상

1. 제안서의 평가

가. 평가위원회 구성

ㅇ 제안서의 공정한 기술능력평가를 위해 박물관 내․외부의 전문가로 평가위원회를 구성한다.

ㅇ 평가위원회 위원은 국립중앙박물관에서 5인 이내의 관련분야 전문가로 선정한다.

ㅇ 평가위원회는 제출된 제안서를 심사하여 종합평가순위를 결정한다.

ㅇ 평가위원의 명단은 공정한 심사를 위해 공개하지 아니한다.(평가공정성 확보 및 평가위원 개인정보 보호 차원)

나. 평가방법

ㅇ 기한 내에 유효한 제안서를 제출한 업체를 대상으로 평가한다.

ㅇ 평가위원은 평가 시 본 지침의 평가기준을 적용한다.

ㅇ 평가총점은 100점을 만점으로 하며, 업체에 대한 심사위원 점수의 최고점, 최저점을 제외한 5인의 총계점수를 산술 평균한다.

ㅇ 산술평균의 값은 소수점 3자리이하에서 사사오입한다.

ㅇ 동점자의 처리는 기술능력평가 점수가 높은 업체를 우선으로 하며, 기술능력평가도 동일한 경우, 제안서 평가의 항목 중 배점이 큰 항목에서 점수가 높은 업체를 선순위자로 한다.

다. 평가결과 발표

ㅇ 평가위원회는 심사내용을 기록한 보고서를 작성하여 평가위원 모두가 서명하고, 발주처에서는 그 결과를 조달청에 제출하여야 한다.

ㅇ 조달청은 제안서 평가점수와 업체평가 점수 및 입찰가격을 종합평가 하여 협상적격자를 선정한 후 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)에 개찰현황을 공고한다.

라. 기타

ㅇ 제안서 심사결과 및 세부내용에 대한 질의에는 응답하지 않으며, 응모자는 평가위원 구성, 평가기준, 방법, 결과에 대해 이의를 제기할 수 없다.

ㅇ 당선작품 발표 후 5일 내에 반출치 아니한 제안도서는 주최자가 임의 파기한다.

2. 평가항목 및 평가기준

가. 제안서의 평가

ㅇ 제안서의 평가는 총점 100점 만점을 기준으로 하되 기술능력평가 90점(제안서평가 80점, 사업수행능력평가 10점), 입찰가격 10점으로 배점하여 평가하고, 종합평가 순위에 따라 최우수작으로 선정된 업체를 우선협상대상자로 한다.

나. 기술능력평가(안)

1) 기술제안서 평가 : 80점

구 분		평 가 항 목	배점
제안서 평가	전시연출 및 공간구성 계획	전시연출 컨셉 및 디자인의 창의성과 적정성	20
		섹션별 공간구성 및 연출의 적정성	15
	세부연출 계획	체험(놀이)요소의 창의성 및 적정성	30
		전시연출 매체와 기법의 기술성 및 구현 가능성
		마감재, 조명, 색채 구성의 적정성(공간 및 전시물)
	관리 및 운영계획	사업수행 공정 및 수행방법의 타당성	15
		사후관리 및 운영의 용이성 및 경제성
합 계			80

※ 기술능력평가는 별도 PT발표 없이 제안서 평가만 함

2) 사업수행능력평가 : 10점

ㅇ 전문인력 보유현황(2점)

평가항목	평가요소	배점	평가방법
참여기술자	등급 및 인원	2	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
			0.5	0.45	0.4	0.35
			○ 평점 = 인원 × 기술자별 점수 ※ 최저 1.6점에서 최고 배점 2점을 초과할 수 없음

※ 기술자에 대한 등급은 과학기술부 공고 “엔지니어링사업대가의 기준”의 <별표 4>의 기술자 등급 및 자격기준에 의함

※ 공고일 기준 2개월 이상 해당업체에 근무하고 있는 기술자만 해당

※ 재직증명서, 공인기관자격증(해당자), 최종학교졸업증명서, 국민연금관리공단 확인서첨부]

ㅇ 수행실적(5점)

평 가 요 소	배점	평 가 방 법		비 고
		기 준	평점
1억원 (부가세포함) 이상 유사용역 및 시공실적	5	A. 100%이상 B. 70%이상~100%미만 C. 40%이상~70%미만 D. 40%미만	10.0 9.0 8.0 7.0	○ 유사 공사 - 박물관, 미술관, 전시관 등 ○ 공고일기준 3년 이내 실적 합산 -단일 4천만원 이상 사업에 한함

※ 박물관 전시연출용역 특성상 유사 실적 확인 필요

ㅇ 경영상태(3점)

- 기업신용평가등급(회사채에 대한 신용평가등급에 준함)에 의한 평가

구 분	BBB+ 이상	BBBO,BBB-	BB+,BBO,BB-	B+ 이하	비 고
점 수	3점	2.7점	2.4점	2.1점	B+이하에는 미제출자 포함

※ 기업신용평가등급 : 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 발행하는「신용평가 등급 확인서」 다만, 「조달청 신용평가등급 조회 시스템」 또는 「중소기업제품 공공구매정보망」에 의하여 신용평가등급 조회가 가능한 경우에는 동 시스템 조회결과에 의해 평가할 수 있다.

※ 신용도(상한점수 2점): 제출 마감일 기준 최근 3년간 관계법령에 따라 입찰참가 제한 또는 영업 정지를 받은 건에 관하여 횟수에 따라 감점

구 분	1건	2건	3건 이상	비 고
감점	0.2	0.4	0.6

다. 입찰가격 평가(조달청 평가) : 10점

구분	주요 평가기준	배점	비고
입찰가격	“법령 기준에 따름”	10

3. 협상과정

가. 협상적격자 및 협상순위결정

ㅇ 기술능력평가점수가 배점한도의 85%이상인 자를 협상적격자로 선정

ㅇ 기술능력평가+입찰가격평가점수 결과 고득점 순으로 협상대상자 선정 및 순차적 협상 실시

나. 협상내용과 범위

ㅇ 협상대상자가 제안한 과업내용, 추진일정 등 제안서의  내용은 일부 조정을 거쳐 발전시켜 나아갈 계획이므로 최종안과 일치하지 않을 수도 있음.

다. 협상절차

ㅇ 협상대상자가 협상내용에 대하여 합의할 경우, 차 순위 협상대상자와의 협상은 생략함.

ㅇ 협상대상자와의 협상이 결렬되면 동일한 기준과 절차에 따라 차 순위 협상대상자와 협상을 실시하고, 이 경우에도 협상이 결렬될 경우 순차적으로 차 순위 협상대상자와 협상 실시

4. 저작권 및 사용권

가. 협상대상작

ㅇ 협상대상작에 대하여 타인의 지적 재산권 침해 등으로 분쟁이 발생 할 경우  당선자에게 책임이 있음

ㅇ 발주처는 협상 대상작의 수정‧보완 및 변경에 대한 일체의 우선적 권한을 가짐

ㅇ 본 용역수행의 결과로 발생하는 모든 성과물의 지식재산권은 일반용역계약특수조건 및 용역계약일반조건(계약예규)에 의함

ㅇ 본 용역수행과 관련한 국가 간, 기관 간의 협약에 의해, 성과물의 사용 및 배포에 제한이 있을 수 있음

나. 협상 비대상작

ㅇ 제안자가 제안도서의 반환을 요청 시 설명 도판 및 작품모형에 한하며 심사에 이용된 제안 설명서는 제외

ㅇ 반환 청구는 접수증을 지참하여 청구하여야 하며, 반환기간은 협상대상작 발표 후 5일 이내로 함

ㅇ 반환청구 기간 내 반환 청구가 없을 시에는 발주처에서 임의로 처분

ㅇ 반환에 따른 제반 비용은 제안자의 부담으로 함

ㅇ 제안도서의 보관상의 파손 등에 대하여 반환 시 이의를 제기 할 수 없음

5. 응모자의 실격

가. 응모신청서에 허위사실을 기재한 경우

나. 응모업체가 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 때

다. 익명성 유지의 원칙 위배 등 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때

라. 접수된 작품을 보완․변경 등 수정할 경우

마. 제출된 서류 등에 중대한 허위사실이 발견되었을 경우

바. 그 밖에 심사위원회에서 응모작품이 실격이라고 의결한 경우

6. 기 타

가.	상기 기술한 내용 외에 평가관련 사항은 공개하지 아니 함

나. 주최자는 평가결과에 대한 질의에 응답하지 않으며, 응모작 제출자는 평가위원 구성, 평가기준, 평가결과에 대하여 일체 이의를 제기할 수 없음

다. 실적증명은 첨부 양식을 원칙으로 하되 기 발행 받은 것은 1년 이내 시 유효함

라. 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출해야 함

마. 협상 방법 등 명시되지 않은 사항은 협상에 의한 계약 체결기준을 적용

[별지 1호]

2022년 어린이박물관 특별전 <제100회 어린이날> 전시연출용역 제안서 응모 신청서
접 수 번 호		2022 -
접 수 일 자		2022년 월 일
제 출 자 (대 표 사)	업 체 명
	대 표 자
	주 소
	연 락 처	TEL : FAX : E-Mail :
국립중앙박물관에서 시행하는 「2022년 어린이박물관 특별전 “제100회 어린이날”」 제안 관련 서류를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 1. 실내건축공사업면허증, 산업디자인전문회사신고필증 사본 각 1부. (해당업체에 한함) 2. 엔지니어링 활동주체 신고증(수첩) 및 기술사 자격증 사본 각 1부. (해당업체에 한함) 3. 실적증명원(원본) 1부. 4. 제안사의 일반현황(서식2) 1부 5. 실적증명서(서식3) 1부 6. 사업수행실적 집계표(서식4) 1부 7. 기술인력 보유현황(서식5) 1부. 8. 신용평가 등급 확인서(서식6) 1부 9. 행정처분내용(서식7) 1부 10. 서약서(서식8) 1부 국립중앙박물관장 귀하

[서식 2호]

제안사의 일반현황

1. 기본사항

업 체 명		대표자
주 소		관할세무서
전화번호		팩스번호
사업자번호		업 종
면허/허가/ 등록증보유현황
총종업원수		매출액 (최근년도)
부채비율(%) (타인자본/자기자본X100)
유동비율(%) (유동자산/유동부채X100)
자 본 금

2. 회사연혁

연월일	내 용	비 고

주) 1. 자격보유회사는 면허증, 허가증, 등록증 사본 첨부

2. 제작공장 보유시에는 공장등록증 사본 첨부

3. 특허보유현황은 관련 특허 개수를 면허증, 허가증, 등록증 보유현황에 표시하고 특허증 사본 첨부

[서식 3호]

실 적 증 명 서

신 청 인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처		국립중앙박물관
	증명서용도		2022년 어린이박물관 특별전 "제100회 어린이날" 전시연출용역 실적증명용
	사 업 규 모
사업수행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦				100%
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적		비 고
					비율(%)	실적(원)
			～
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2022년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급부서 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함.

[서식 4호]

사업수행 실적 집계표

구 분	공 사 명		공 사 기 간	준공금액	발 주 처	실적확인이 가능한 발주 기관의 전화	비 고
①최대실적 (1건)
	소 계
②기타실적
	소 계
합 계 (①+②)

주) 최근 3년간(공고일 기준) 홍보관, 전시관, 과학관, 체험관 등의 전시물을 제작․설치한 실적

[서식 5호]

기술인력 보유현황

구분	일련 번호	등 급	기 술 분 야	자 격 종 목	성 명	등록일 (취득일)	경 력 기 간	등록번호	비 고
실내건축 기 술 자
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
기타

주) 1. 기술자의 구분은 엔지니어링기술진흥법 제10조 규정에 의한 엔지니어링사업 대가의 기준에 따름

*공고일 기준 2개월 이상 입사한 자로 본사업에 참여할 기술자만 명기

2. 분야별 기술자 기재순서는 평가 시 참고할 수 있도록 순위별로 기재

3. 자격증, 최종학력증명서, 경력증명서 및 4대 보험 확인서 첨부

[서식 6호]

신용평가 등급 확인서

발행번호 :

업 체 명		기업 신용 등급
대 표 자
법인등기부등본 (주민등록번호)
사업자 등록번호
주 소
재무결산기준
등급 평가일
등급 유효기간

귀 사의 의뢰에 따라 작성한 기업신용등급인증용 기업신용등급을 아래와 같이 통보합니다

교부일  2022.   .   .

신용평가기관 :                           인

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함.

[서식 7호]

행정처분내용

구 분		처분 사유 (관련법령)	처분 일시	처분기간	비 고
영업정지 또는 입찰참가제한

※ 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기

※ 최근 3년간 회사(수급자)가 관계법령에 의해 입찰참가 제한처분 또는 영업정지 처분된 사실기재

[서식 8호]

서     약     서

국립중앙박물관에서 추진 중인 「2022년 어린이박물관 특별전

“100회 어린이날”전시연출용역」 입찰에 참여한 당사는 국립중앙박물관의 제안요청서를 성실히 준수하고 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 불이익을 감수 할 것이며, 응모와 관련한 응모 작품 제출, 심사, 낙찰, 계약 결과 등에 대하여 어떠한 이의 없이 귀 관의 결정에 따를 것을 확약하고 이 서약서를 제출합니다.

2022 년     월      일

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

국립중앙박물관장 귀하

[서식 9호]

서   면   질   의   서

발송일시	년 월 일
제 안 서 접수번호		연락처	전화 : fax :
업 체 명	(대표: )
제안서 쪽수	질의내용

※ 제안지침서를 다시 한번 숙지하시어 질문하여 주시기 바랍니다.

※ 명료하게 작성요망바랍니다.

[서식 10호]

기술능력 제안서표지양식 (참고용)

실크로드

1. 표지크기 : A3

2. 단위는 ㎜

3. 문자는 굴림체, 흑색사용

4. 글자크기 : 제목 30, 72호, 날짜. 22호, 식별번호 22호

2022년 어린이박물관 특별전 “제100회 어린이날” 전시연출용역 제안서

5. 좌우간격은 중앙 정렬함

6. 제안서 심사에 제출하는 모든 문서의 여백, 앞뒤, 표지 등 어느 곳이든 작성 또는 공모업체 등을 인지할 수 있는 어떠한 표기도 하지 않아야 하며, 인지할 수 있다고 객관적으로 판단되는 특정표기가 발견될 시 공정한 심사를 위해 임의로 삭제할 수 있음.