2011. 2.25(금). 14:00

국립민속박물관 볕들재

2011년 대한민국역사박물관

건립사업 대국민 업무보고

2011. 2. 25.

대한민국역사박물관건립추진단

	목 차

Ⅰ. 대한민국역사박물관 건립개요	1

ㅇ 건립배경 및 추진경과

ㅇ 건립개요

ㅇ 핵심기능

ㅇ 전시방향

ㅇ 주요일정

Ⅱ. 대한민국역사박물관 비전과 목표	3

ㅇ 비전 / 목표

Ⅲ. 주요업무 추진계획	4

1. 건축설계 및 건립공사 추진

2. 전시설계 및 전시공사 추진

3. 전시자료 확보 및 조사연구

4. 건립사업 범국민 참여 추진

<참 고>

1. 대한민국역사박물관 조감도	10

2. 전시체계 및 구성안	11

3. 대한민국역사박물관 건립 추진일정(안)	12

Ⅰ. 대한민국역사박물관 건립개요

건립배경 및 추진경과

	배 경
《제63주년 광복절 및 건국 60년 기념 8․15 대통령 경축사》: 2008. 8. 15. “고난과 역경 속에서 발전한 자랑스러운 기적의 역사를 기록하고 후세에 전승하며, 국민의 자긍심 고양 및 국민통합으로 국가 미래발전의 원동력을 확보하기 위하여 ‘현대사박물관’ 건립”

‘국립대한민국관건립위원회 규정’ 제정(‘09. 2. 11.)

‘국립대한민국관건립위원회’ 출범(‘09. 4. 16.)

‘국립대한민국관건립추진단’ 발족(‘09. 5. 4.)

‘대한민국역사박물관’으로 명칭 변경(‘09. 10. 19.)

건립기본계획 수립 및 발표(‘10. 3. 12.)

전시주제 설정(‘10. 5./4개 대주제, 13개 중주제, 43개 키워드)

건축설계 및 공사계약, 사업착수(‘10. 10. 29., 대림산업 컨소시엄)

건립공사 착공식 개최(‘10. 11. 25., 옛 문화부청사 부지)

전시물 설계 및 공사계약, 사업착수(‘10. 12. 1., 시공테크 컨소시엄)

건립개요

◈ 건립기간: 2010년 ～ 2012년( * ‘13년 2월 개관목표)

◈ 건립규모: 부지면적 6,446㎡(1,950평), 건축연면적 9,500㎡(2,873평)

◈ 건립형태: 문화부 청사 본관 리모델링 + 별관부지 일부 증축

◈ 주요시설: 전시․수장․교육․연구․사무․부대시설 등

◈ 총사업비: 484억원(‘10년 97억, ’11년 256억, ‘12년 131억)

핵심기능

자랑스러운 대한민국 발전사의 보고(寶庫) ‘대한민국’ 종합박물관

- 대한민국의 발전자료를 수집․보존․연구 및 전시하는 교육공간

국민의 올바른 역사인식 제고를 위한 ‘대한민국’ 역사문화관

- 국민의 자긍심과 국가 미래발전의 원동력을 확보하는 정신문화공간

대한민국 수도 서울의 국가상징거리 내 ‘대한민국’ 핵심상징관

- 대한민국의 발전상과 저력을 국내외에 알리는 문화홍보공간

전시방향: ‘대한민국 발전의 역사를 균형적 시각에서 객관적으로 조명’

전시구성: 대한민국의 발전사를 시대별 구성을 통해 종합적이고 체계적으로 전시

전시대상: 대한민국의 발전 관련, 정치․경제․사회․문화 등 분야별 자료 망라

전시기법: 실물전시 및 디지털 기술 이용, 대한민국 발전사의 다양한 장면 소개(IT․CT․첨단영상․스토리텔링 등)

주요일정

2009년 <건립 준비단계>		2010년 <건립 착수단계>		2011～2012년 <본격 실행단계>
• 건립기본계획 수립 • 추진체계 구성		• 건축 및 전시 설계 • 철거 및 공사착공 • 자료조사 및 수집		• 본격 공사 추진 및 준공 • 운영프로그램 개발 • 전시품 설치 및 개관준비 * 개관: 2013년 2월(예정)

Ⅱ. 대한민국역사박물관 비전과 목표

비 전

대한민국의 새로운 도약을 위한 역사박물관

(위대한 국민 ! 더 큰 대한민국 !)

<과거와 현재를 통해 미래와 세계를 여는 박물관>

목 표

◈ 대한민국의 자랑스러운 역사를 기록하고 국가적 정체성을 찾는 공간

◈ 대한민국의 발전여정을 통해 국민소통과 화합의 계기가 되는 공간

◈ 대한민국의 역사와 현재를 후손에게 이어가게 하는 공간

◈ 대한민국 정신문화의 원형이 세계로 뻗어 나가는 공간

Ⅲ. 주요업무 추진계획

1		건축설계 및 건립공사 추진

	공사개요
◈ 공사기간: ‘10. 11. 1. ～ ’12. 5. 23. / 위치: 옛 문화부 청사(리모델링) ◈ 시설규모: 부지 6,446㎡(1,950평), 연면적 9,500㎡(2,873평, 지상 7층) ◈ 총사업비: 326억 원(건축 310억 원, 책임감리용역 16억) ◈ 시공사: 대림산업 컨소시엄(대림산업 + 한화건설 + 정림건축)

추진경과

시설물 안전진단(‘09. 9.) 및 석면조사 실시(‘09. 11.)

- 건축안전도 ‘C등급’으로 리모델링 가능, 석면 제거 필요

건립기본계획 수립 및 대국민 발표(’10. 3. 12.)

창의적 설계를 위한 건축개념 설계안(아이디어) 공모(‘10. 2. ~ 4.)

- 총 41개 작품 접수, 정림건축 등 5개 우수작 선정

건립공사(설계․시공 일괄입찰) 계약체결 및 착수(‘10. 10. 29.)

- 대림산업 컨소시엄 / 공사기간: ‘10. 11. 1. ～ ’12. 5. 23.

- 실시설계, 철거․구조보강, 리모델링(보수․보강), 건축설비 등

책임감리용역(건설․전시공사)계약 및 전면 책임감리 착수(‘10. 10. 29.)

- (주)건원엔지니어링 / 용역기간: ‘10. 11. 3. ～ ’12. 7. 24.

문화부청사 이전(‘10. 10. 31., 서울과학관) 및 건물 인수(’10. 11.)

건립공사 착공식 개최(‘10. 11. 25., 옛 문화부청사 부지)

추진현황 및 향후계획

건축협의(허가) 완료(‘11. 1. 18.)

석면제거 완료 및 별관(1,528㎡) 철거(‘11. 1. 20.)

우선공사(철거, 구조보강): ‘10. 11. 1. ～ ’11. 3. 30.

건축공사(본관 리모델링, 별관 신축): ‘11. 4. ～ ’12. 5.

건립공사 준공: ‘12. 5.

시운전 및 개관준비: ‘12. 6. ～ ’13. 1.

개 관: ‘13. 2.(예정)

※ 연도별 공정계획

기준연도	공정율(누적)	주요내용	소요예산
2010. 12.	5%( 5%)	ㅇ 시공사 및 책임감리용역 선정, 가설 및 철거공사	16억 원
2011. 12.	63%( 68%)	ㅇ 본관 보수․보강(리모델링) 및 별관 증축 등	206억 원
2012. 5.	32%(100%)	ㅇ 마감 및 설비공사, 시운전	104억 원

2		전시설계 및 전시공사 추진

	공사개요
◈ 사업기간: ‘10. 12. 1. ～ ’13. 1. 19. * 전시설계 완료(‘11. 5.) ◈ 사업규모: 상설 전시 3,000㎡(908평) / 총 사업비: 9,550백만 원 ◈ 시공사: 시공테크 컨소시엄(시공테크 + 비엠비 + 삼덕공사)

추진경과

대한민국 발전의 역사가 총합된 전시주제 설정(‘10. 5.)

- 건립위원회의 심도있는 논의과정을 거쳐 4개 대주제 13개 중주제 선정(‘10. 1.) 및 전시체계 ’키워드(예시)‘ 43개로 정리

* 전시구상소위원회(7회, ‘09. 9. ～ 10. 1.), 전시연출소위원회(7회, ’10. 2. ～ 5.)

창의적 전시설계를 위한 전시프로그램 구성(안) 마련

- 전시 주제별 중심 스토리, 주요 전시내용, 전시대상 등 확정

* 건립위 실무위원회(3회, ’10. 4. ～ 5.) 및 워크숍 개최(3회, 5월․8월․9월)

전시(전시물 설계 및 제작․설치) 사업자 선정(‘10. 12. 1.)

- 사업자: (주)시공테크, (주)비엠비, (주)삼덕공사 컨소시엄

- 계약금액: 9,550백만 원 / 사업기간: ‘10. 12. 1. ～ ’13. 1. 19.

추진현황 및 향후계획

건축․전시 협의회(TF) 구성․운영(‘11. 1.～)

- 건축업체, 전시업체, 감리단, 추진단 등 8명 / 주 1회(매주 수)

전시 기본 및 실시설계: ‘10. 12. ～ ’11. 5.

전시인테리어 및 전시물 제작: ‘11. 6. ～ ’12. 5.

사인 및 전시물 현장 설치: ‘12. 6. ～ 12.

종합 시운전 및 개관(’13. 2.)

3		전시자료 확보 및 조사연구

추진방향

기관․단체 등이 소장한 현대사 관련 주요자료 수집

국가원로 및 다양한 계층의 현대사 주요인사 대상 기증 유도

여러 경로를 통한 자료수집 방법 다양화

국민과 함께 만들어가는 박물관 실현, 범국민 기증캠페인 전개

추진경과

자료수집․관리 체계 구축

- ｢자료수집 및 관리에 관한 규정｣ 제정(훈령 제125호, ‘10. 4. 23.)

- 임시 수장공간 확보(국립중앙도서관내 581㎡/‘10. 4.)

- 자료수집심의위원회 구성(10명-건립위원 5, 전문위원 2, 외부 3)

자료수집(기증) 홍보 추진

- 홍보물 제작(5만 부) 및 유관기관․다중 이용시설 등 배포(’10. 7.)

- 국정홍보 간행물 ｢위클리 공감｣ 기증 광고 게재(’10. 8.)

- 교통방송과 연계, 기증참여 라디오 캠페인(‘10. 12. 6. ～ 31.)

- 도심 옥외 전광판 스팟 광고 및 지하철 광고(‘10. 12. 10. ～ 31.)

추진현황 및 향후계획

자료수집 현황(‘10년 12월 말)

- 구입: 7,095점(8.5억 원, 정전협정 지도, 순종칙유 등)

- 기증: 2,367점(교육자료, 올림픽, 월드컵, 성적표, 기념담배 등)

정부기관 및 유관기관 소장자료 확보 추진

- 정부 각 부처 소장 전시 관련 자료(행정문서, 정책입안 자료원본, 주요 사건 관련 자료, 각종 메모, 사진, 기념물, 모형 등)

< 예 시>

기획재정부: 초기 경제개발계획 자료 등

교육과학기술부: 의무교육완성 6개년 계획, KIST․KAIST 설계도 등

외교통상부: OECD 가입협약서 등

국토해양부: 고속도로․국가산업단지(마산, 구미 등) 건설 관련 자료 등

보건복지부: 시대별 의료보험증 실물 자료 등

통일부: 서울-평양 직통전화 설치 문서, 사진 및 실물 자료(전화기 등) 등

국가원로 및 현대사 주요인사 소장자료 기증 협의 추진

- 국가원로, 현대사 주요인사 등 면담 및 구술기록자료 확보 병행

자료수집 방법 다양화

- 전시자료 수시 구입 및 국내외 자료 경매 참여

범국민 기증캠페인 운동 전개

- 기증사이트(donation.museumrok.go.kr) 연계 온라인 이벤트(3월 ～ 4월) 및 주요 기증품을 모은 전시회 및 수기 공모전 개최(8월)

- 기증사례 등 소개, 무가지 기획기사 연재 추진(연중)

- 8.15 등 역사적 기념일 계기 다양한 매체를 통한 언론홍보

* ‘고향가는길’ 홍보물(30만 부) 지면 활용 기증참여 광고 게재(설 계기)

조사 연구용역 추진

- 대한민국 근대화 과정 기초자료 수집 및 DB 구축(11. 1. ~ 10.)

- 디지털아카이브 구축 및 유비쿼터스 기반 서비스 계획(11. 1. ~ 6.)

- 해외 소재 한국현대사 관련 자료 연구(11. 2. ～ 11.)

- 대한민국역사박물관 교육 및 운영프로그램 연구(11. 2. ~ 11.)

4		건립사업 범국민 참여 추진

단계별 홍보방향

홍보기반 구축 단계 (1단계)			공감대 확산 단계 (2단계)			개관 홍보 단계 (3단계)
ㅇ 홍보기반 구축 - 홍보콘텐츠 제작 - 기증캠페인 추진 ㅇ 가치와 비전 홍보 - 언론홍보 등			ㅇ 착공식 개최 이슈화 - 본격 확산 계기 ㅇ 국민참여 공고화 - 관련전시회 개최 등 ㅇ 전시콘텐츠 홍보			ㅇ 개관 국내외 홍보 ㅇ 운영프로그램 홍보 ㅇ 개관 스팟 홍보
공사준비 (～‘10. 10.)			건립공사 (‘10. 11. ～ ‘12. 5.)			완공․개관 (‘12. 6. ～ ‘13. 2.)

2011년 추진계획

매체 활용 홍보 추진

- 건립위원, 방송․신문매체 건립사업 소개 컬럼 등 기고(연중)

- KTV, 위클리공감 등 문화부 매체 활용, 건립사업 홍보(계기시)

전국 주요 전광판 활용, 건축3D 영상 스팟 광고(8월, 광복절 계기)

건립위원회 홈페이지 리뉴얼을 통한 쌍방향 홍보 추진(연중)

대한민국역사박물관 건립사업에 대한 설문조사(10월)

박물관 브랜드 이미지(MI) 개발 및 활용

- 박물관 통합 디자인(MI) 및 브랜드마케팅 전략 개발(1월 ～ 5월)

- MI 및 건축 3D 반영, 홍보 인쇄물ㆍ영상물 제작 및 배포(4월 ～ 7월)

<참 고 1>

대한민국역사박물관 조감도

<참 고 2>

전시체계 및 구성안

대주제(4)	중주제(13)	키워드(예시)(43)
대한민국의 태동	자주적 근대국가의 꿈과 좌절	개항과 근대화의 모색
		대한제국의 선포와 독립협회
		국권상실의 충격
	대한민국 임시정부와 독립운동	조선총독부의 탄압통치와 경제적 수탈
		3․1운동과 국내 민족운동
		임시정부의 활동과 해외 독립운동
	1945년 8․15광복	광복의 기쁨과 열망
		38선의 설정과 민족분단
		미군정기 한국사회의 변화
대한민국의 기초확립	대한민국 정부 수립	냉전과 남북한간 대치
		5․10선거와 헌법제정
		대한민국 정부 수립
	6․25전쟁과 전후 복구	6․25전쟁과 공산군 점령하의 수난
		전쟁과 사회, 그 속의 사람들
		전후 복구와 원조경제, 법제도 정비
	근대국가 토대 구축	농지개혁, 경제개발계획, 과학기술의 토대 구축
		의무교육의 실현과 사회문화의 변천
		민주주의의 시련, 부정선거와 4․19혁명
대한민국의 성장과 발전	경제개발과 산업화	내각책임제 정치의 실험과 5․16군사정변
		경제개발계획의 본격 추진
		국가안보와 자주국방을 향한 노력
		과학기술의 발달과 보급
		산업역군의 해외진출
		한국경제의 눈부신 성장
	변모하는 도시와 농촌	교육의 확대와 문화의 다양화, 대중화
		도시화의 진전
		새마을운동과 국토개발
		성장의 그늘: 열악한 노동환경과 도시빈민
	시민사회의 성장과 민주의식	1972년 10월 유신과 민주화운동
		1980년대 민주화 운동과 민주주의 확산
		시민사회의 형성
대한민국의 선진화, 세계로의 도약	민주화시대의 개막	민주적 제도의 정착
		권위주의 청산과 국민통합
	세계로 나가는 대한민국	북방정책과 외교관계 다변화
		88올림픽과 2002월드컵․스포츠 코리아
		세계 속의 한류, 한국문화
		나라 밖의 한국 사람들
	경제선진국을 향하여	국민 삶의 질 향상
		첨단기술의 발전
		세계 경제 강국으로의 성장
	대한민국의 미래	환경․복지 대한민국
		한반도 평화와 남북관계
		세계 속에 우뚝 선 대한민국

<참 고 3>

대한민국역사박물관 건립 추진일정(안)

단계					계획단계																								설계단계																									공사단계																																						개관준비단계
구분				2009																								2010																									2011																															2012																			2013
				1				2	3	4	5		6	7			8		9		10		11		12			1			2			3		4		5				6		7	8	9	10		11		12		1		2	3			4	5	6				7		8					9				10		11					12	1	2	3	4	5			6		7	8	9	10			11		12		1		2
건립기본계획 (건축, 전시)
																	건립기본계획 수립
건축		기본 및 실시설계
																															Idea 공모							입찰안내서 작성						턴키 공고
																																													기본설계 (2개월)		기본설계심의
																																												설계․시공자선정▲						실시설계 (4개월)						실시설계심의
		건립공사																																													▼ 착공																																								완공 ▼
																																															청사 이전		본관 리모델링 (구조보강)																		건 축 공 사 (10개월)
																																																	별관 철거 / 별관 (기초 및 골조)
																																																																																						시운전 및 개관준비
		인․허가 업무
																																																	디자인심의 및 건축협의
																																																																																											준공통보
전시		전시설계																																															▼ 사업자 선정
																																													입찰				제안서평가		기본설계 (3개월)						실시설계 (3개월)
		전시공사																																																																								▼ 현장 착수																					완공 ▼
																																																													전시공사 및 전시물 설치(20개월)
																																																													전시인테리어 및 전시물 제작																													사인 및 전시물 현장 설치								시운전
		자료수집 ․기타																																		▼ 임시수장고 운영																	▶공개구입 및 기획구입 1차						2차						3차							4차
																																				전시 및 아카이브 자료 수집, 정리, 등록																																																		수장고 시운전					자료 이전․격납
																																																					통합디자인(MI) 구축																															관람프로그램 개발 및 도록 제작