대한민국역사박물관 건립기본계획

2010. 3.

대한민국역사박물관건립추진단

	목 차

Ⅰ. 건립목적 및 추진경과	1

Ⅱ. 건립 비전과 목표	2

Ⅲ. 핵심기능 및 추진전략	3

Ⅳ. 건립 추진계획	4

Ⅴ. 전시 추진계획	6

Ⅵ. 전시콘텐츠 수집 및 아카이브 구축	8

Ⅶ. 추진일정 및 소요예산	9

Ⅷ. 중장기 확대발전 방안	10

※ 붙임 : 대한민국역사박물관 건립 추진일정

Ⅰ		건립목적 및 추진경과

□ 건립목적

□ 고난과 역경 속에서 발전한 자랑스러운 기적의 역사를 기록하고 후세에 전승

□ 국민의 자긍심 고양 및 국민통합으로 국가 미래발전의 원동력을 확보하고 국가브랜드 제고

□ 추진경과

□ 대통령, 8․15경축사에서 건립 공표('08. 8. 15)

□ 건립위원회 규정 제정(‘09. 2. 11)

□ 건립위원회 출범(‘09. 4. 16)

□ 건립추진단 발족(‘09. 5. 4)

□ ‘대한민국역사박물관’으로 명칭 확정(‘09. 10. 19)

□ 건립기본계획 수립연구(‘09. 9～’10. 1월)

Ⅱ		건립 비전과 목표

□ 비 전

대한민국의 새로운 도약을 위한 역사박물관

(위대한 국민 ! 더 큰 대한민국 !)

<과거와 현재를 통해 미래와 세계를 여는 박물관>

□ 목 표

◈ 대한민국의 자랑스러운 역사를 기록하고 국가적 정체성을 찾는 공간

◈ 대한민국의 발전 여정을 통해 국민소통과 화합의 계기가 되는 공간

◈ 대한민국의 역사와 현재를 후손에게 이어가게 하는 공간

◈ 대한민국 정신문화의 원형이 세계로 뻗어 나가는 공간

Ⅲ		핵심기능 및 추진전략

□ 핵심기능

◈ 자랑스러운 대한민국 발전사의 보고(寶庫) ‘대한민국’ 종합박물관

- 대한민국의 발전 관련 자료를 수집·보존·연구 및 전시하는 교육문화공간

◈ 국민의 올바른 역사인식 제고를 위한 ‘대한민국’ 역사문화관

- 국민의 자긍심 고양과 국가 미래발전의 원동력을 확보하는 정신문화공간

◈ 대한민국 수도 서울의 국가상징거리 내 ‘대한민국’ 핵심상징관

- 대한민국의 발전상과 저력을 국내외에 알리는 문화홍보공간

□ 추진전략 : 21세기 신개념 박물관 모델 정립⇒국제적 랜드마크화

□ 디지로그 전략 : 디지털의 범용성․효율성과 아날로그의 감수성이 동시에 있는 박물관

□ 네트워크 허브전략 : 타 전시․문화시설과 연계되고 시공간의 제약이 없는 박물관

□ 창의적 진화전략 : 국민의 참여와 소통으로 지속적인 발전을 도모하는 박물관

<건립 실행원리>

창조적 실용의 원리

(창조적 발전)

역   사

도전과 창조

녹색성장의 원리

(개방과 소통)

소통과 화합

환   경

전파․확산의 원리

(지속적 성장)

국    가

상생과 공존

Ⅳ		건립 추진계획

□ 건립개요

◈ 건립기간 : 2010년 ~ 2012년( * ‘13. 2월 개관목표)

◈ 건립규모 : 부지면적 6,446㎡(1,950평), 건축연면적 9,500㎡(2,873평)

◈ 건립형태 : 문화부 청사 본관 리모델링 + 별관부지 일부 증축

◈ 주요시설 : 전시․수장․교육․연구․부대시설 등

◈ 총사업비 : 451억원(설계비 29, 공사비 401, 감리비 20, 시설부대비 1)

□ 건축개념 : 「개방과 소통의 녹색문화시설」

□ 울타리와 문턱없이 누구에게나 열린 공간으로 광화문광장과 연계하여 ‘문화적 쉼’과 ‘역사와의 대화’가 가능한 공간

□ 리모델링 건축, 친환경 에너지 절감기술 적용 등으로 국내 대표적인 녹색문화시설의 모델 제시

□ 광화문 주변 문화시설로 접근을 용이하게 하는 동선의 중심으로 문화관광 허브기능 수행

(광화문 문화관광 허브 기능)	(리모델링 1 : 동아일보사→일민미술관)
	(리모델링 2 : 화물보관고→파리문화센터

□ 공간 구성

□ 전시공간

구분	규모	주제 및 주요 전시품	목표 및 기능	비고
옥내	3,000㎡ (태동 680, 기초 680, 발전 960, 도약 680)	시대별 대표자료 (실물, 모형, 영상 등)	역사적 성취와 위대한 국민상의 상시적 전시	사실과 이해
옥외	1,800㎡	예술조형물 등	문화 휴게기능 및 박물관의 장소적 상징성 부여	휴식과 감상

□ 공간프로그램(Space Program)

- 시설규모(9,500㎡)

․기존 건물 활용 : 7,600㎡(본관 7,000㎡, 기계실 600㎡)

․공간 확장(증축규모) : 1,900㎡

- 영역별 시설면적

Ⅴ		전시 추진계획

□ 전시개념 : 통사의 ‘축’ + 스토리텔링의 ‘옷’ + 디지로그의 ‘패션’

□ ‘축’ : 국가발전의 역사를 통사적 기준에서 종합적이고 객관적으로 정리

□ ‘옷’ : 역사의 의미를 자연스럽게 소화하는 스토리텔링 적용

□ ‘패션’ : 체험과 감동, 몰입과 흥미 등 주제전달력의 극대화를 위한 디지로그 전시

<통사적 구성>

ㅇ 대한민국 발전의 역사의

종합적․체계적 정리

ㅇ 4대 대주제/13대 중주제

<통사적 구성>

ㅇ 대한민국 발전의 역사의

종합적․체계적 정리

ㅇ 4대 대주제/13대 중주제

아날로그→감성

(실물전시)

디지털→흥미

(가상체험)

체험 ․ 감동

□ 전시방향 : 국립박물관으로서의 ‘품격’과 전시주제 표현의 ‘울림’

□ 전시목표 달성을 위한 명확한 주제설정 및 최적의 전시연출

□ 기록․지식의 전달만이 아닌, 경험․지혜의 공유를 목적으로 한 전시

□ 주제 전달력을 극대화하고 동선의 효율성을 제고하는 전시

<전시연출 유형>

ㆍ 실물형 : 역사박물관의 핵심전시로 역사성, 객관성이 높은 분야에 적용

ㆍ 디지로그형 : 객관적 정보제공과 전시효과를 높이기 위한 분야에 적용

ㆍ 스토리텔링형 : 실물의 의미와 감동을 높이기 위한 분야에 적용

ㆍ 영상관형 : 짧은 시간에 많은 정보를 일시에 제공해야 하는 분야에 적용

ㆍ 상징물형 : 추상성, 기념성, 상징성이 높은 분야에 적용

·

□ 대한민국 역사가 총합된 전시주제

대주제	중주제	비 고
대한민국의 태동	자주적 근대국가의 꿈과 좌절
	대한민국 임시정부와 독립운동
	1945년 8·15 광복
대한민국의 기초 확립	대한민국 정부 수립
	6.25전쟁과 전후 복구
	근대국가 토대 구축
대한민국의 성장과 발전	경제개발과 산업화
	변모하는 도시와 농촌
	시민사회의 성장과 민주의식
대한민국의 선진화, 세계로의 도약	민주화시대의 개막
	세계로 나가는 대한민국
	경제선진국을 향하여
	대한민국의 미래

Ⅵ		전시콘텐츠 수집 및 아카이브 구축

□ 전시콘텐츠 수집 및 범국민 기증캠페인 추진

□ 국가발전의 역사성과 상징성을 대표하는 전시콘텐츠의 확보

* 개관 이전(`10～`12년) 연간 3,000점 내외 수집(총 1만점 수집 목표)

□ 역사발전의 주인공인 국민과 함께 만드는 박물관 실현을 위해 범국민 기증캠페인 전개와 함께 건립사업에 대한 국민적 공감대 확산

* 다양한 기획홍보사업과 연계 및 온라인 기증시스템 구축

□ 대한민국 현대사아카이브 구축

□ ‘전시와 교육’에서 나아가 ‘지식과 정보’를 제공하는 박물관의 역할을 위해 대한민국 발전사 관련  자료의 실증적․객관적 수집 및 체계화

◇ 대한민국 역사발전 비교 아카이브 구축

* 대한민국 국가발전의 성과를 국가군, 시대, 분야별 비교 지표화

◇ 현대사 관련 기록․사진․영상자료 수집

* 근현대사 관련 기록․사진․영상자료를 종합적으로 수집․체계화

◇ 대한민국 발전 관련 구술자료 수집

* 대한민국 발전과정에 참여한 인사들의 생생한 체험을 구술과 영상으로 채록

□ 축적된 아카이브를 활용, 시․공간의 제약 없이 전시 및 정보 제공이 가능하도록 온라인 사이버박물관을 구축, 국내외에 전파 홍보

아카이브화

(디지털화․DB화)

현대사 자료

사이버대한민국역사박물관

(대한민국의창(窓))

＋

* 사이버대한민국역사박물관을 통해 8천만 한민족을 하나되게 하고, 외국인 대상 대한민국의 저력과 IT․CT 기술력를 홍보하며 국가브랜드 향상

Ⅶ		추진일정 및 소요예산

□ 추진일정

단계	추진내용	일정
1단계(2008. 10월～ ) <계획단계>	ㅇ 건립기본구상 연구	‘08. 10～12월
	ㅇ 건립위원회 및 추진단 발촉	‘09. 4～5월
	ㅇ 문화부청사 정밀안전진단 실시	‘09. 7～9월
	ㅇ 건립기본계획 수립 연구	‘09. 9～’10. 1월
2단계(2010. 2월～ ) <설계단계>	ㅇ 건축설계 아이디어 공모	‘10. 2～4월
	ㅇ 전시설계	‘10. 3～’11. 5월
	ㅇ 건축설계(설계시공 일괄입찰)	‘10. 5～’11. 2월
	ㅇ 전시분야 조사․수집	‘10. 4～’11. 7월
3단계(2010. 10월～ ) <공사단계>	ㅇ 착공	‘10. 10월
	ㅇ 건축공사	‘10. 10～’12. 5월
	ㅇ 전시공사	‘11. 6～’12. 5월
4단계(2012. 6월～ ) <개관 준비단계>	ㅇ 전시물 설치	‘12. 6～’13. 2월
	ㅇ 운영프로그램 시험운영	‘12. 6～’13. 2월
	ㅇ 개관 홍보	‘12. 9～’13. 2월
	ㅇ 개관	‘13. 2월

□ 건립공사비 : 451억(총사업비 관리 대상)

(단위 : 백만원)

세부내용	소 계	‘10	‘11	‘12
건축설계보상비	618	618	-	-
전시설계비	505	505	-	-
건축설계비	1,797	1,797	-	-
공사비(건축/전시)	40,042	6,505	23,037	10,500
책임감리	2,024	260	1,113	651
시설부대비	92	15	50	27
합 계	45,078	9,700	24,200	11,178

Ⅷ		중장기 확대발전 방안

□ 필요성

□ 광화문의 문화적 환경 변화와 유동인구 증가에 따라 국민의 다양한 수요와 욕구가 확대될 것으로 예상되어 이를 충족할 시설 필요

□ 국가적 위상에 걸맞는 국립역사박물관으로서의 기능과 역할 강화를 위해 최적의 건립규모 확충이 필요

□ 기본방향

□ 1단계 : 국가상징거리 조성사업과 광화문의 문화적 수요를 연계하여 박물관의 필수적인 문화적 기능(전시+정보+교육)을 문화부 청사부지 내 우선 조기 건립

□ 2단계 : 복합문화기관으로서의 박물관은 미대사관 이전시기의 불확정성을 감안, 중장기 발전방안(미대사관 부지 포함)으로 단계별 건립 추진

1단계 ('09~'12)	박물관(전시․정보․교육)	→	2단계 (미대사관 이전후)	박물관 + 복합문화기관
	국가상징거리 조성사업의 핵심기능 및 광화문 문화허브 공간 역할			박물관으로서의 기능 확충 (전시 및 수장, 학예연구, 자료축적 등)

<붙 임>

대한민국역사박물관 건립 추진일정

단계					계획단계																								설계단계																											공사단계																						개관준비단계
구분				2009																								2010																										2011																	2012																	2013
				1				2	3	4	5		6	7			8		9		10		11		12			1				2			3			4		5			6			7	8	9	10	11	12			1				2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11		12		1	2
건립기본계획 (건축, 전시)
																	건립기본계획 수립
건축		기본 및 실시설계																										▼ 입찰방법 심의(국토해양부)
																												심의				▼ 공고								▼ 입찰안내서 심의
																																Idea 공모								입찰안내서 작성			턴키 공고					기본설계 ▼ 적격심의
																																공고			Design			심사
																												설계안 선정(다수) ▲																		기본설계 (3개월)												실시설계 ▼ 적격심의
																																														설계자 선정▲			실시설계 (5개월)
		건립공사																																															▼ 착공																									완공 ▼
																																															청사 이전		본관 리모델링 (구조보강)															건 축 공 사 (10개월)
																																																	별관 철거					별관 (기초 및 골조)
																																																																									시운전 및 개관준비
		인․허가 업무
																																																건축 협의			디자인 심의
																																																																													준공 통보
전시		기본 및 실시설계																																				▼ 설계자 선정
																																				입찰				전시 기본 ․ 실시설계 (13개월)
		전시공사																																																													▼ 시공자 선정											완공 ▼
																																																														입찰		전 시 공 사 (10개월)													전시물 설치
		자료조사 ․수집																																				▼ 임시수장고 운영
																																						전시자료 및 아카이브 조사 수집																										자료 등록․정리									수장고 시운전				자료 이전․격납
																																																																통합디자인(MI) 구축							관람프로그램 개발 및 도록 제작