남양주종합촬영소 관람체험시설 관련  폐기물 및 조형·전시물 처리 용역 시방서

Ⅰ. 폐기물 처리 개요

1.  용 역 명

남양주종합촬영소 관람체험시설 관련  폐기물 및 조형·전시물 처리 용역 시방서

2. 목   적

본 공사는 경기도 남양주시 조안면 북한강로855번길 138 남양주종합촬영소 관람체험시설물  철거 공사 중에 발생되는 폐기물 운반 및 처리와 조형 및 전시물을 포장 이동 보관하는데 그 목적이 있음.

3. 공사 위치

경기도 남양주시 조안면 북한강로855번길 138 남양주종합촬영소

4. 공사 범위

1) 영상관 내 폐기물 및 전시장비의 포장 및 이동 보관

2) 영화문화관  전시장비의 포장 및 이동 보관

3) 영상지원관 내 폐기물의 처리 및 전시장비의 포장 및 이동 보관

4) 춘사 나운규 동상의 해체, 포장 및 이동 보관

5) 스튜디오 내 폐기물 처리 및 문서 자료 및 영화관련 물품 포장 및 이동 보관

5. 공사기간

본 공사에 소요되는 공사기간은 20일로 하고 다음의 경우에 한하여 시행청의 승인을 얻어

기간을 연장할 수 있다.

1) 공사기간 중 강수로 인하여 작업이 지연되었을 때

2) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

3) 시행청의 지시에 의하여 공사가 중단되었을 때

4) 기타 불가피한 상황이 발생되었을 때

6. 용역개요

가. 철거 및 폐기물 처리

1) 폐목재류(버팀목, 목형틀)

2) 폐합성수지류(합성수지자재, 스치로폼)

3) 금속류(철강, 강관류, 금속자재 등)

4) 폐종이류(포장재, 벽지 등)

5) 폐유리류(유리창, 거울, 유리제품 등)

6) 폐섬유류

7) 기타 철거공사와 관련하여 배출되는 것.

나. 전시·조형물의 해체, 포장, 이동

1) 전시물의 해체 및 포장, 이동

2) 전시장비의 포장 및 이동

3) 동상의 해체, 포장 및 이동

Ⅱ. 폐기물의 처리

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 건설공사 중 발생되는 건설폐기물의 처리에 대한 사항에 대하여 적용한다.

1.2 주요내용 : 폐기물 수집, 운반 및 보관, 처리

1.3 관련 법규

1)폐기물 관리법

2)건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률(건폐법)

3)건설폐기물 처리기준 및 방법 등에 관한 업무처리지침

4)폐기물 전자정보처리 프로그램 운영 및 사용 등에 관한 고시(환경부)

1.4 유의사항

1) 본과업과 관련하여 관련법령, 및 규정이 제정 또는 개정되는 경우 이에 따라야 한다.

2) 도급자는 상기의 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고 있어야하        고 준수해야하며 이를 위반함으로서 야기되는 민원등 책임소재의 문제가 발생될 경우         이에 대한 모든 책임은 “도급자”에게 있다.

3) 본 과업에 명시되지 않은 사항은“감독관”과 협의 후 시행한다.

2. 용어의 정의

1)「폐기물」이란 쓰레기, 연소재, 폐유, 폐산, 동물의 사체등으로서 사람의 생활이나,사         업 활동에 필요하지 않게 된 물질을 말한다.

2)「생활폐기물」은 사업장폐기물 외의 폐기물을 말한다.

3)「사업장폐기물」은 대기환경보전법, 수질환경보전법 또는 소음, 진동규제법의 규정에         의하여 배출시설을 설치 운영하는 사업장, 기타 대통령령이 정하는 사업장에서 발생되는       폐기물을 말한다.

4)「지정폐기물」은 사업장폐기물 중 폐유, 폐산 등 주변환경을 오염시킬수 있는 유해한         것으로서 대통령령이 정하는 폐기물을 말한다.

5)「건설폐기물」은 철거 등 일반 건설공사(해체, 신축, 증축, 개축, 재건축, 재개발, 도로      신설, 굴착, 개보수, 상수도 관로공사 등)에서 발생된 부산물을 말한다.

6)「혼합폐기물」은 건축물 철거과정에서 발생된 폐콘크리트, 폐블록, 폐타일 등을 제외하       고 내․외 수장재가 제거된 가연성 및 불가연성이 혼합된 상태 또는 건설폐기물중 폐콘크       리트, 폐아스콘, 폐토사 등의 건설폐재, 폐플라스틱류, 금속류, 유리조각, 섬유조각, 폐       목재, 폐합성 수지류, 종이, 모르터 등 현장에서 여건상 분리배출이 어려워 혼합되어 배       출된 것을 말한다.

7)「처리」는 폐기물의 소각, 중화, 파쇄, 고형화 등에 의한 중간처리와 매립, 해역배출 등       에 의한 최종처리를 말한다.

8) 「재생골재」는 최대직경 크기가 100mm이하, 이 물질 함유량 1%이하를 말한다.

9) 「폐기물처리시설」은 폐기물 중간처리시설과 최종처리시설로서 대통령령이 정하는 시설       을 말한다.

2.1 배출자

"배출자"라 함은 발주자 또는 발주자로부터 최초로 건설공사의 전부를 도급받은 자를 말한      다. 다만, 건폐법 제15조의 규정에 의한 분리발주를 함에 있어서는 발주자를 말한다.

2.2 수탁자

"수탁자"라 함은 발주자로부터 위탁받아 건설폐기물을 수집‧운반‧보관‧처리하는 자를 말한다.

2.3 중간처리

“중간처리”라 함은 건설폐기물을 분리·선별, 파쇄하는 것을 말한다.

2.4 분리배출

"분리배출"이라 함은 건설폐기물을 성상별·종류별로 분리하여 배출하는 행위를 말한다.

3.  폐기물 인수 인계

폐기물처리의 인수인계는 폐기물관리법에서 정하는 폐기물의 전자 인계서 시스템(올바로

시스템)에 접속하여 인계 인수사항을 입력하여야 한다.

4. 안전관리

4.1 철거 작업 시 발판 설치 후 작업 중 추락, 낙상 등의 위험요소로 부터 보호를 받을 수 있      도록 작업 준비 철저.

1) 감전 재해 예방

- 전기 기기는 무자격 무경험자 사용금지.

- 전기기계 기구 접지 철저

- 누전 차단기 부착 사용

- 정격 용량의 전원 사용

- 전원 인출, 기계 기구 점검 보수시 전원 차단

- 전선 가공 시, 전기 기계 기구 절연 상태 유지

- 물기 등의 습윤 상태에서 전기 사용 금지

2) 작업별 안전장구 착용

- 작업중 상시 착용 보호구 : 안전모, 안전화, 안전대

- 작업중 필요시 착용 보호구 : 보안경, 안전장갑

- 위급시 임시 착용 보호구 : 방독, 방진, 산소 마스크

3) 현장대리인의 역할

- 현장대리인은 작업장의 안전관리를 담당하는 실무적인 책임자로서 사고 예방을 위한 적극적인 업무활동을 하여야 한다.

- 작업장의 시설 등을 숙지하고 작업과정의 안전유지 철저.

- 안전관리 규정의 시행

- 사고의 통보 (당해 작업장의 사고 발생시)

- 작업장내 작업자에 대한 안전관리를 위하여 필요한 지휘, 감독

- 그 밖의 위해 방지 조치

4.2 화재 예방

- 화재는 본인은 물론 타인, 건축물 등의 시설물에 막대한 손상을 끼치게 되므로 현장대리인은 작업 전 작업자들의 안전교육을 철저히 한다.

- 화재 발화 원인인 가연물을 사전에 제거하여 작업에 임하며 불씨 등을 항상 조심한다.

- 용접 및 그라인더등 절단작업은 작업자가 2인 1조를 이루어 작업을 하며, 작업전 작업 장소에 소화기를 비치하고 소화전등 소방설비 위치을 파악한 후 작업한다(소화기, 소화전, 비상통로등)

- 특히 전기용접, 철물절단 용접등 불똥이 튀는 용접은 불똥이 확산되지 않도록 방염 석면포로 안전하게 보양하고 작업 전 감독자의 승인을 득한 후 작업을 실시한다.

4.3 현장 관리

1) 작업자 주지 사항

- 현장내 흡연 제한 (지정된 장소에서의 흡연)

- 현장내 청결 유지

- 쓰레기, 잡자재 등의 무단 투기 금지 (지정된 장소에 모아서 반출)

2) 현장대리인 주지 사항

- 현장대리인은 안전관리자로써 작업장 내에 상주하면서 안전작업 및 화재예방에 대하여 작업 전 안전조치하고 작업진행

- 작업 전 작업 사항을 숙지 세부 공정표를 세워 감독과 협의하여 작업

- 일일 작업 보고 철저

- 작업장 내 현장정리 철저

- 지정된 장소 내에 잔재 적재 후 즉시 원외 반출

- 원내 무단 쓰레기 투기 금지

4.4 용접가스 안전관리유지에 관한 사항

- 용접용 가스 이동시 안전카에 안전 고리 잠금장치 후 이동한다.

- 용기를 승하차시 용기에 충격이 가해지지 않도록 주의하며, 용기를 이동시

에는 용기를 눕혀서 굴리거나 용기가 넘어지지 않도록 주의한다.

- 용기 취급시 충격으로 인한 전기 스파크나 화기 등을 엄금한다.

- 검사시설장비 및 공구류는 일일점검을 철저히 한다.

- 소화설비의 정위치를 확인하고 사용법을 숙지한다.

- 가스설비에는 휴대용 손전등 외 등화를 휴대하지 아니한다.

- 용기의 온도는 40℃ 이하로 유지한다.

- 용접장소 등에는 가연성물질을 두지 않는다.

- 용접장소에는 “○○용접작업중” 팻말을 누구나 식별이 가능하도록 설치한다.

Ⅲ. 조형·전시물의 해체, 포장 이동

1. 영화인 명예의 전당 내 조형‧전시물의 해체, 포장 이동

1.1. 영화인 명예의 전당 내 전시물품은 향후 타지역으로 이동이 용이하도록 각 전시물품 하부에 팔레트로 고정하여야 한다.

1.2. 전시물품이 흔들리지 않도록 유리관 내부를 채우거나 꺼내어 별도 포장하여야 하며, 향후 전시에 용이하도록 포장용기 외부에 최초 전시된 형태의 사진을 부착한다.

1.3. 외부는 유리 등이 파손되지 않도록 포장하여 남양주종합촬영소가 지정한 위치에 이동한다.

1.4. 이동시 차량은 무진동 차량을 이용하여야 한다.

2. 전시장비의 포장 및 이동(위원회가 지정하는 장소에 위치한 장비를 의미함)

2.1. 전시장비는 필요시 해체 후 포장 이동이 가능하나 이전장소 도착시에는 조립하여야 한다.

2.2. 전시장비의 해체 및 이동시 장비에 스크래치가 발생하거나 파소노되어서는 안되며, 이러한 상황 발생시 동일한 제품으로 교체 또는 이에 상응하는 가치로 보상하여야 한다.

2.3. 이동시 차량은 무진동 차량을 이용하여야 한다.

Ⅳ. 특기사항

1. 모든 전시관 내의 포스터 등 인쇄물은 별도로 보관한다.

2. 전시관 내 소방설비는 원상복구되어야 한다.

3. 공사과정에서 물품이 손상된 경우 그 책임은 공사업체에게 있으며 현물 또는 그에 상응하는 금액으로 배상하여야 한다.