제 안 요 청 서

사업명	국립체육박물관 소장유물 가등록을 위한 기초명세서 작성(3차)
주관기관	국민체육진흥공단

2021. 3.

사업담당	박물관준비팀(TF) 이 종 석	02-410-1838
계약담당	총무팀 박 영 미	02-410-1216

목   차

Ⅰ. 과업 목적 및 개요	1

Ⅱ. 과업 수행 내용	2

Ⅲ. 수행 시 유의사항	6

Ⅳ. 사업자 선정	8

Ⅴ. 제안서 작성	12

Ⅵ. 추진일정	14

[별첨]

1. 소장유물목록 전수조사 및 기초명세서 작성 대상	16

2. 제출서류 양식	17

Ⅰ	과업 목적 및 개요

1. 과업목적

□ 문화유산표준관리시스템 가등록을 위한 자료 조사로 관리체계 마련

□ 해당 기간의 국립체육박물관 소장유물 조사를 통한 누락 유물 확인

2. 과업개요

□ 과 업 명 : 국립체육박물관 소장유물 가등록을 위한 전수조사 및    기초명세서 작성(3차)

□ 과업대상 : 총 7,818점

※ 대상 수량은 현황파악 및 기초명세서 작성 과정에서 변동이 있을 수 있음

□ 과업기간 : 계약체결일로부터 6개월

□ 과업금액 : 60,000천원(부가세 포함)

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

□ 과업범위

ㅇ 과업대상 소장유물 기초명세서 작성 및 검수

ㅇ 기초명세서 작성을 완료한 유물에 대해 유물번호 표기

ㅇ 문화유산표준관리시스템 가등록, 정보확인 및 오류 정정

□ 과업 수행방법

ㅇ 과업 총괄 책임자 지정

ㅇ 박물관준비팀(TF) 유물담당자와 함께 국립체육박물관 수장고에서 과업 진행

ㅇ 착수/중간/최종 보고 및 필요 시 추진상황 수시보고

Ⅱ	과업 수행 내용

1. 과업 진행 순서

연번	과업 단계	과업 내용
1	전수조사	작업과정에 대한 기존의 기초매뉴얼 숙지 및 보완 - 국립체육박물관이 보유한 소장유물 목록에 기재된 정보와 실제 유물의 현황을 비교·확인함
2	기초명세서 작성 및 검수	- 가등록에 필요한 유물의 정보를 담은 기초명세서 작성 - 전수조사와 동시에 진행 유물의 사진촬영이 필요한 경우 본 단계에서 진행 - 기초명세서 작성 후 검수 진행
3	유물번호 부여	- 박물관준비팀(TF) 유물담당자 진행 - 기초명세서 작성 및 검수를 완료한 유물에 대하여 정식 유물번호를 부여함
4	유물번호 표기	- 부여한 유물번호를 유물에 표기함 - 연필, 매니큐어와 수성물감, 꼬리표 등 사용
5	가 등 록	- 기초명세서에 기록한 정보를 문화유산표준관리시스템에 업로드 하여 전산화 - 유물번호가 표기된 유물을 대상으로 진행 업로드 후 박물관준비팀(TF) 유물담당자 확인
6	가등록 내역 확인	- 기초명세서와 문화유산표준관리시스템에 가등록한 정보 비교·확인 - 오류가 있을 경우 수정 진행

※ 상기 과업 중 ‘3.유물번호 부여’ 및 ‘5.가등록 업로드 확인’은 박물관준비팀(TF) 유물담당자가 진행함

2. 과업 세부내용

① 전수조사

- 안전하고 체계적인 과업수행을 위해 작업자들의 기초매뉴얼(공단 제공)

숙지 및 보완

- 현재 국립체육박물관 소장유물목록을 기반으로 과업대상 수집유물의 명칭·수량·재질·크기·격납처·유물사진·입수정보 등 확인

※ 세부내역은 (붙임 1) 참고

② 기초명세서 작성 및 검수

- 전수조사를 진행하며 진행함

- 현 소장유물 목록과 상이한 항목 확인 및 미입력 항목 입력

- 기 보유 유물 확인, 촬영이 필요한 경우 본 과정에서 촬영 진행

· 촬영장비 : 박물관준비팀 보유장비 활용(카메라, 조명 등)

· 촬영사유 : 미촬영, 낮은 해상도, 수량변동으로 인한 이미지 변경 및 앨범, 스크랩북, 도서류 유물 중 전체 면의 추가 촬영이 필요한 경우 등

· 촬영방법 : 전체, 위ㆍ아래, 좌ㆍ우, 문양ㆍ명문 등 특징을 알 수 있도록 5컷 이상 촬영(일부만 촬영이 필요시 담당자와 상의하여 진행)

- 기초명세서 작성 완료와 유물 재확인을 통한 검수를 진행하며 체육유물 분류체계 적용 및 입력(주제분류, 용도기능분류 입력)

③ 유물번호 부여

- 상기 ①과 ②의 검수 진행 후 박물관준비팀(TF) 유물담당자가 유물번호 부여

④ 유물번호 표기

- 유물번호 부여가 완료된 유물에 번호 표기

- 표기 방법 : 유물의 재질 및 특성에 맞춰 마킹, 잉킹, 꼬리표 부착 등

※ 유물번호 표기 완료 후 격납처에 유물번호 표기

- 표기한 유물번호를 기준으로 해당 유물의 이미지 명칭 수정

⑤ 가등록

- 상기 과정을 완료한 유물은 문화유산표준관리시스템에 가등록 진행

- 가등록 이미지는 썸네일과 원본을 함께 업로드하며 썸네일을 대표이미지로 설정함

- 입수처 단위로 가등록을 진행하며, 완료 후 유물대장을 PDF로 출력하여 박물관준비팀(TF) 유물담당자에게 제출

⑥ 가등록 내역 확인

- 박물관준비팀(TF) 유물담당자는 가등록한 정보와 유물대장, 기초명세서를 비교·대조하며 확인 후 오류가 있을 경우 수정 진행

3. 수행방법

□ 과업책임자를 지정하여 공단에 통보 후 과업 수행

ㅇ 과업책임자는 유물정리경험 6개월 이상의 경력자를 2인 이상 포함하여 4인 이상으로 과업수행자를 구성해야 함

ㅇ 과업수행자는 박물관준비팀(TF) 유물담당자와 함께 국립체육박물관 수장고에서 과업을 진행하여야 함

ㅇ 과업책임자와 과업수행자는 기초매뉴얼 숙지 후 과업을 진행하며, 과업을 수행하는 과정에서 매뉴얼을 보완해야 함

ㅇ 과업수행자는 2인 1조 또는 3인 1조로 구성되며 조장을 지정함

ㅇ 각 조의 조장은 과업의 일일진행상황을 박물관준비팀(TF) 유물담당자와 과업책임자에게 보고하고, 과업책임자는 일일보고를 취합하여 박물관준비팀(TF) 유물담당자에게 주간보고를 진행함

ㅇ 발주처는 과업수행 중 과업책임자의 고용인이 과업수행에 적합하지 않다고 인정되는 경우 교체를 명할 수 있으며 과업책임자는 즉시 이에 따라야 함

ㅇ 과업책임자의 부득이한 사정으로 참여인을 교체할 경우에는 신·구 참여인의 인적사항 및 교체사유를 서면으로 공단에 통보하고 승인을 얻어야 함

□ 박물관준비팀(TF)은 과업책임자와 일차적으로 협의하고, 필요시 과업수행자와 협의하며 과업 지원

□ 계약체결 후 과업 수행계획서를 제출하고 박물관준비팀(TF)과 협의·확정하여 과업 착수·진행

ㅇ 과업 수행계획서 목차

- 과업 이해, 과업수행 전략, 과업 세부수행방안, 과업 관리방안

ㅇ 수행계획서는 계약체결일로부터 10일 이내 착수계와 함께 제출

□ 제반규정과 이 과업지시서 상에 명시되지 않은 사항이나 문구· 용어의 해석에 대한 의견이 다르거나 또는 과업수행 상에 문제점 및 중요한 사항은 발주처와 협의하여 조정함

4. 성과보고

□ 본 과업 추진 중에 생산된 산출물, 각종 보고서는 과업 일정에 맞추어 제출 또는 보고

□ 정기보고를 통해 과업 수행상황을 보고하여야 함

ㅇ 착수보고 : 계약체결 후 10일 이내(서면제출)

ㅇ 주간보고 : 매주 수행상황 보고(서면제출)

ㅇ 중간보고 : 가등록 수량 50% 완료 후 14일 이내(대면보고)

※ 일정변경이 필요한 경우 박물관준비팀(TF)과 협의하여 변경 가능

ㅇ 최종보고 : 과업 종료 전 14일 이내(대면보고)

※ 일정변경이 필요한 경우 박물관준비팀(TF)과 협의하여 변경 가능

5. 성과품 납품

□ 성과품으로는 최종보고서, 요약보고서 및 관련 결과물로 함

ㅇ 최종보고서 : 책자인쇄 및 디지털파일

- 2018년(기증/구입) 가등록유물대장 5부 출력 및 제본

- PDF 등 디지털파일은 별도제출을 포함하여 전자문서로 제출

ㅇ 요약보고서 : 파일(PDF 및 한글)을 전자문서로 제출하며 아래의 내용이 반드시 수록되어야 함

- 유물 전수조사 결과표 : 수량변동내역, 명칭변경내역, 유물촬영내역

※ 수량변동내역 : 입수처/입수방법/입수연도/전체 내역

- 유물별 수량 산정 기준

- 유물 유형·재질별 유물번호 표기 방법

ㅇ 등록 매뉴얼 : 파일(PDF 및 한글)을 전자문서로 제출하며 아래의 내용이 반드시 수록되어야 함

- 유물 취급 수칙

- 기초명세서 입력항목 작성 기준

- 유물번호표기

- 사진 파일 관리

ㅇ 이동식 저장매체 : 외장하드 및 USB

- 외장하드 1 : 과업의 모든 성과품

- 외장하드 2 : 유물 목록과 이미지

- USB : 유물 이미지를 제외한 모든 성과품

□ 성과품 등은 과업기간 종료일 전에 납품하되, 박물관준비팀(TF)과 협의하여 확정

Ⅲ	수행 시 유의사항

1. 일반사항

□ 본 과업의 대상유물인 국립체육박물관 소장유물은 발주처의 중요자산으로서 반출을 금지하며 발주처가 정하는 소장유물 안전에 관한 제반 규정을 준수해야 함

□ 대상유물은 국립체육박물관 수장고에 격납되어 있으며 유물 기초명세서 작성을 위한 철저한 조사가 이루어져야 함

□ 발주처는 과업수행 중 과업수행자의 과실로 인한 유물의 훼손이나 기타 사고가 발생할 경우 가치하락분과 보존처리비 등 제비용을 청구할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 함

□ 대상유물 중 개인정보를 포함하는 자료가 있으므로 개인정보보호법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한), 제28조(개인정보취급자에 대한 감독), 제29조(안전조치의무)에 의거, 개인정보가 분실·도난·누출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 모든 조치를 강구하여야 함

2. 보안사항

□ 과업수행자는 과업수행과정에서 취득한 내용에 대해 보안을 유지하여야 하며, 보안관리 방안을 제시하여야 함

□ 본 과업을 위해 발주처에서 과업수행자에게 제공하는 모든 자료와 과업수행과정에서 산출되는 모든 성과물은 과업수행 및 완료 후에도 과업수행자가 임의로 복사 또는 외부로 유출시킬 수 없으며 또한 다른 목적으로 일부 또는 전부를 사용 할 수 없음. 만약 이를 위반하여 문제가 발생하였을 경우 민·형사상 모든 책임은 과업수행자가 지는 것을 원칙으로 함

□ 과업수행과정에서 발생하는 원지, 폐지 등의 자료는 과업책임자의 책임 하에 완전 회수·폐기하여야 함

□ 결과물 작성 중 발생하는 서식 및 인쇄물·사진파일 등은 최종산출물 제출과 함께 파기하여야 함

3. 하자보수

□ 최종산출물은 납품 전에 공단에 보고해야 하며, 보고 후에도 수정을 요구할 경우 과업수행자는 이에 응하여야 함

□ 보고 점검에 의해 수정·보완해야 할 사항이 발견되는 경우에는 발주처의 지시에 따라 성실히 조치하여야 함

□ 하자보수 책임기간은 최종 준공검사 완료 후 1년이며 필요시 공단에 상주하여 처리하도록 함

Ⅳ	사업자 선정방법

1. 계약방법 및 입찰참가자격

□ 입찰방식 : 제한경쟁입찰

□ 낙찰자 선정방법 : 협상에 의한 계약(긴급공고)

ㅇ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조

- 긴급공고 사유 : 사업일정의 시급성

□ 입찰참가자격 : 국가계약법에 의한 유자격자

ㅇ「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제12조의 규정에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 업체

ㅇ「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제76조(부정당업자의 입찰 참가 자격제한)에 해당되지 아니한 업체

ㅇ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의2 1항에 의거, 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인

2. 낙찰자 선정

□ 선정 절차

입찰공고	⇨	제안서 접수	⇨	제안서 심사	⇨	협상적격자 선정‧협상	⇨	계약체결

□ 낙찰자 선정방법 : 협상에 의한 계약

ㅇ 선정방법 : 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제43조(협상에 의한 계약체결)에 의거, 제안서 평가를 통해 낙찰자 선정

ㅇ 평가방법 : 기술능력 평가(80%), 입찰가격 평가(20%, 전자입찰) 결과 합산

- 평가점수는 입찰자별로 평가위원 점수 중 최저와 최고 점수를 제외(최저 또는 최고 점수가 2개 이상일 때는 이중 하나만 제외)한 후 나머지 점수를 산술평균하여 평가점수를 부여한다.

- 평가점수를 계산한 결과, 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림 한다.

ㅇ 협상대상 선정 : 기술능력 평가 결과 배점한도(80점)의 85%(68점)  이상인 업체 중에서 기술‧가격평가 종합점수가 가장 높은 업체를 우선 협상대상자로 선정

- 합산 점수가 동점인 경우 기술능력 평가 우위업체로, 기술능력 평가 점수도 동점인 경우 배점이 큰 항목에서의 우위업체로 선정하며, 우선협상 대상자와 협상이 성립된 경우, 차순위자와 협상은 진행하지 않음

※ 이외 사항 기재부 계약예규 ｢협상에 의한 계약 체결기준｣ 준용

ㅇ 협상진행 : 협상대상자의 제안내용을 토대로 협상을 실시하되, 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있음

- 협상대상자와 협상이 성립되지 않는 경우, 동일한 절차에 따라 순차적으로 차순위자와 협상을 실시하고 모든 협상대상자와 협상이 결렬된 경우, 재공고 입찰에 부칠 수 있음

□ 기술능력 평가

ㅇ 평가방법 : 제안서 평가위원회(내외부 인원 5인 내외)구성 및 평가

ㅇ 운영방법 : 제안서 PT 평가

- 발표시간 10분 이내, 질의응답 5분 내외 ※제안서(요약본) 활용 PT

- 평가 일정 및 장소는 추후 안내

- 발표는 과업수행 총괄을 맡는 과업 책임자가 직접 수행

※ 단, 불가피한 사유로 총괄 책임자가 발표하지 못할 경우 공단과 사전 협의를 거쳐 본 용역 투입인력 중 과업에 주도적으로 참여하는 1인으로 교체 가능하나, 계약체결 후 PT 발표자가 아닌 자를 과업 수행 인력으로 투입할 경우 계약해지 가능

□ 제안서 평가배점표

ㅇ 기술능력평가 80점 : 정량평가 5점과 정성평가 75점의 합계

ㅇ 정량평가(주1)

정 량 평 가 항 목	배점	배점기준	점수
기관의 경영상태	5	기업신용평가 등급에 따른 평점(표 참조)
합계	5

ㅇ 정성평가(주2)

정 성 평 가 항 목		배점	배점기준				점수
			A	B	C	D
과업의 이해	- 과업에 대한 이해도 - 과업의 목적 및 필요성에 대한 이해	15	15	13.5	12	10.5
과업수행 계획	- 사업계획 및 세부수행절차 등의 구체성 - 과업추진방법의 합리성 및 추진일정의 체계성	20	20	18	16	14
과업수행 방식	- 과업참여자의 해당분야 전문성 - 과업수행과정 중 전문인력 활용 방안 - 자료수집, 분석, 해석방법과 도구의 구체적 기술	25	22.5	20	17.5	16
산출물 활용 및 사후관리	- 산출물의 기대성 및 활용방안 - 산출물에 대한 사후관리 가능성	15	15	13.5	12	10.5
합계		75

주1) 객관적 지표 세부기준(평가항목별 5등급으로 구분하여 평가) : 기관의 경영상태

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가 등급	평 점(점)
			배점한도별
			5점
AAA	-	AAA (회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급)	5.0
AA+, AA0, AA-	A1	AA+, AA0, AA- (회사채에 대한 신용평가등급 AA＋, AA0, AA-에 준하는 등급)	4.9
A+	A2+	A+ (회사채에 대한 신용평가등급 A＋에 준하는 등급)	4.8
A0	A20	A0 (회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급)	4.7
A-	A2-	A- (회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급)	4.6
BBB+	A3+	BBB+ (회사채에 대한 신용평가등급 BBB＋에 준하는 등급)	4.5
BBB0	A30	BBB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급)	4.4
BBB-	A3-	BBB- (회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급)	4.3
BB+, BB0	B+	BB+, BB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BB＋, BB0에 준하는 등급)	4.0
BB-	B0	BB- (회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급)	3.7
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가등급 B＋, B0, B-에 준하는 등급)	3.5
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가등급 CCC＋에 준하는 등급)	2.0

① 신용평가등급은 ｢신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률｣ 제4조제4항제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 평가한 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급평가일 및 등급유효기간 등을 명시하여 작성한 ‘신용평가등급 확인서’(이하 ‘등급 확인서’라 함))을 기준으로 평가한다.

② 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급은 입찰공고일 전일 이전에 평가한 것으로서 유효기간 내에 있는 것이어야 한다(유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우도 인정).

③ 이행능력심사대상자의 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가하며, ‘등급 확인서’를 제출하지 않은 경우에는 최저등급으로 평가한다.

④ 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병 대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

주2) 주관적 평가 세부기준

① 제안서를 평가항목별로 4등급으로 구분하여 평가를 실시하고 배점계수를 합하여 채점

등급		A	B	C	D
배점계수	25	25	22.5	20	17.5
	20	20	18	16	14
	15	15	13.5	12	10.5

Ⅴ	제안서 작성

1. 제안서 작성 방법

□ 기술제안서

ㅇ 작성형태 : □글 또는 파워포인트, A4크기

ㅇ 작성분량 : 제안서 30페이지 이내(본문 기준, 표지 및 붙임서류 별도)

ㅇ 제출부수 : 제안서 8부(1부 기명, 7부 무기명), 동 내용이 담긴 이동식 저장매체 1개

□ 가격제안서

ㅇ 제안업체는 총 투찰금액(부가가치세 포함)만 제출하고 상세내역(산출내역서)은 낙찰업체에 한하여 제출함

※ 제안사가 면세사업자인 경우 부가세를 포함하여 투찰하여야 함

2. 제안서 작성 시 유의사항

□ 제안서는 반드시 국문으로 작성하여야 하며, 사용된 영문약어는 그 내용을 기술하여야 함

□ 제안서 내용 중 용역수행사항은“∼를 한다”,“∼를 하겠다.”등의 명확한 용어로 표현하여야 하며, 기재항목의 누락 또는 모호한 표현(∼할 수 있다. ∼가능하다, ∼권고한다 등)으로 제안된 경우 제안조건을 미수용하거나 수행 불가능한 것으로 간주함

□ 제안업체는 제안내용의 전부 또는 일부에 대하여 허위 또는 예상으로 작성하여서는 안 되며, 제안내용의 확인 및 검수가 필요한 사항은 입증자료를 제안서에 첨부하여야 함

□ 제안서의 내용은 제안사가 사업자로 선정된 후 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐

※ 단, 계약서와 상이한 경우에는 계약서가 우선함

□ 각종 실적증명 등 사실 확인을 요하는 사항에 대하여는 해당 증명서 또는 계약서 사본(대표자의 원본대조필 날인필)을 첨부한 것에 한하여 인정함

□ 발주처는 필요시 추가로 제안이나 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 것은 제안서와 동일한 효력을 가짐

□ 제안서에는 반드시 제안업체의 대표자가 서명 날인을 하여야 함

□ 본 사업과 관련하여 제출한 제안서 및 관련 자료는 제출기한 내에 일괄 제출하여야 하며, 제출된 서류는 일체 반환하지 않음

□ 제안서에 제시한 투입인력이 본 용역에 투입되지 않거나 제안서 내용을 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 계약을 해지할 수 있음

□ 본 제안을 위하여 소요되는 일체의 비용은 제안사의 부담으로 함

□ 제안사는 제안 또는 계약과정에서 입수한 공단의 각종 정보에 대하여 기밀을 유지하여야 함

3. 제안서 제출

□ 제출기한 : 입찰공고문 참조

□ 제출장소 : 국민체육진흥공단 경영혁신본부 총무팀 계약담당관

□ 제출방법 : 제출기한 내 제안자 또는 대리인의 방문을 통한 직접 접수

※ 직접접수 외 택배, 퀵서비스, 우편 등의 다른 방법을 통한 접수는 불인정

□ 제출서류

- 제안서 8부, 동 내용이 담긴 이동식 저장매체 1개

※ 기술제안서 포함 서류 양식은 별첨 2 참조

□ 문의처

ㅇ 제안관련 : 박물관준비팀(TF) 이종석 학예사(02-410-1838)

ㅇ 계약관련 : 총무팀 계약담당자관 박영미 과장(02-410-1216)

※  문의는 방문 및 전화 질의에 한하며, 응답 내용은 법적 효력을 갖지 못함

Ⅵ	추진일정

1. 입찰 추진일정

□ 입찰공고상의 일정에 의해 변경 가능

내 용	기 간	비 고
입찰공고	12일간	공단 홈페이지, 공공기관 알리오, G2B
과업설명회	없음	과업의 세부내용으로 갈음함
제안서 제출	3월 중	경영혁신본부(국민체육진흥공단 본부 2층) 총무팀 계약담당자
기술‧가격제안서 평가 협상 우선순위 선정	입찰공고 일정에 의함	기술평가 일시/장소는 개별 통보
협상 진행 및 업체 선정		협상대상자 개별통보
용역계약 체결		계약체결(총무팀)

2. 과업 추진일정

□ 착수보고

ㅇ 계약 후 10일 이내 착수계와 과업수행계획서를 작성하여 제출

- 착수보고서, 산출내역서, 과업수행계획서(방향 및 방법, 내용 및 세부수행

계획표 포함), 참여인력(이력서 등) 및 조직편성표, 연구일정표 등이 포함    □ 중간/최종보고

ㅇ 중간보고 : 가등록 수량 50% 완료 후 14일 이내(대면보고)

ㅇ 최종보고 : 과업 종료 14일 이내로 과업수행결과 보고(대면보고)

※ 일정변경이 필요한 경우 박물관준비팀(TF)과 협의하여 변경 가능

※  상기 일정은 공단 여건에 따라 조정될 수 있음, 보고(착수‧중간‧최종보고 등) 일정 별도 협의

□ 과업 시행일정

구 분	‘21년
	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
▪ 기본계획 수립
▪ 용역기관 선정 (공고‧심사‧협상‧계약 등)
▪ 용역 시행
▪ 가등록 매뉴얼 숙지
▪ 전수조사 및 기초명세서 작성
▪ 유물번호 부여 및 표기
▪ 문화유산표준관리시스템 가등록
▪ 가등록 유물의 정보 확인 및 오류정정·검수
▪ 중간/결과보고회
▪ 최종결과물 제작 및 검수

※ 상기 일정은 계약체결일에 따라 변경될 수 있음

붙임 1. 소장유물목록 전수조사 및 기초명세서 작성 대상

2. 제출서류양식 각 1부.  끝.

【 붙임 1】소장유물목록 전수조사 및 기초명세서 작성 대상

< 소장유물목록 전수조사 및 기초명세서 작성 대상 >

입 력 값	입력내용
명 칭	유물의 명칭(이명칭 및 외국어 명칭 포함), 체육유물 분류체계에 따름
유물번호	입수 시 부여한 유물임시번호 확인
주 수 량	유물의 구성요소 중 독립적인 기능을 가진 유물의 수량
부 수 량	유물의 구성요소 중 독립적인 기능은 갖지 못하나 관리상 필요한 수량
국 적	유물의 국적과 국적별 시대
시대(상세)	유물의 제작시기
크 기	유물 실측값
재 질	유물의 재질
특 징	유물의 기본정보, 유물에 표기된 정보 및 유물의 상태(파손·결손·박락 등)
면 수	앨범, 스크랩, 도서, 문서류 등의 총 페이지 수(필름은 컷 수)
격 납 처	유물의 격납위치
유물사진	유물의 이미지 유무 확인(이미지가 없을 경우 유물 촬영)
입수정보	기증·구입 등 입수정보
종 목	유물의 종목(축구, 야구 등)
주제분류	체육유물 분류체계에 따름
형태분류
출처분류
시대분류

【 붙임 2】제출서류양식 각 1부

[양식 1] 제안서 표지

『국립체육박물관 소장유물 가등록을 위한 전수조사 및 기초명세서 작성(3차)」용역』

제     안     서

(입찰공고번호 : 제    호)

2021.   .

제 안 회 사 명

[양식 2]

제안서 목차

Ⅰ. 제안배경

Ⅱ. 제안단체 일반현황

1. 일반현황

2. 조직 및 인원

3. 주요 사업내용 및 실적

Ⅲ. 사업제안 내용

1. 사업계획(사업의 목적, 진행방향 및 방법 등 기술)

2. 사업 추진전략 및 추진체계(목표 달성을 위한 추진전략, 추진방          법 및 추진체계 등 기술)

3. 기대효과 및 활용방안

4. 참여인력 현황(실무진 구성 및 원칙, 실무진별 연구계획, 작업          분담 별 등 기술)

5. 추진일정

6. 개인정보 제공 및 활용 동의서 양식

Ⅰ. 제안 배경

※ 제안단체의 사업목적, 진행방향 및 계획 등을 파악할 수 있도록 작성

Ⅱ. 제안단체 일반 현황

1. 일반현황

1.	기관명		2.	대표자
3.	기술용역 등록분야
4.	주소
5.	연락처	전화번호 : 팩스번호 :
6.	회사설립년도	년 월
7.	해당부문 사업기간	년 월 ～ 년 월
8.	주요연혁	(요약)

2. 조직 및 인원

※ 제안단체에 근무하는 인력의 경력을 중심으로 작성하되, 정규직, 계약직은 반드시 구분하여 작성하고, 수행팀에 편성된 인력의 경력은 ‘Ⅲ. 사업제안 내용’ 안에서 작성

3. 주요 사업내용 및 실적

순번	사업명	사업기간	계약금액 (단위 : 백만원)		발주처			구체적 업 무 수행내용	타사 공동 프로젝트 수행여부	비고
			총금액	사업수행 비 용	상 호 명, 관공서명	주 소	전화 번호
1
2
3
4

※ 1. 사업명 : 연도순으로 본 사업과 유관한 것만 기재(현재 수행중인 사업 포함)

2. 계약금액 : 타사와 공동으로 업무를 수행한 경우 총액을 기재하되 자사의 비용만을 괄호 안에 기재(공고일로부터 5년 내 사업만 기재)

3. 구체적인 업무수행 내용 : 수행 작업 내용을 단계별(현황분석 및 진단, 기본계획 및 실행계획 수립 등)로 작성

4. 공동 프로젝트 수행여부 : 타사와 공동으로 프로젝트를 수행한 경우 타사의 상호명을 기재

5. 비고란에는 투입인력, 연구책임자 등 기재

⇒ 위 사항들을 증명할 수 있는 실적증명원(원본대조필) 사본 1부. 단, 수행(수주포함)중인 사업에 한하여 계약서 사본 1부

Ⅲ. 사업제안 내용

1. 사업계획

2. 사업 추진전략 및 추진체계

※ 제안요청서 상의 사업개요를 기초로 추진전략 및 추진체계 등을 자유롭게 기술

3. 기대효과 및 활용방안

가. 기대효과

나. 활용방안

4. 참여인력 현황

가. 참여인력 편성표

				과업 책임자
조 장 :			조 장 :					조 장 :				조 장 :
조 원 :			조 원 :					조 원 :				조 원 :

* 부문별 수행자를 명시 또는 명시할 수 있다.

나. 참여인력 이력사항

1) 과업 책임자 인적사항

소 속				직 위
성 명		(한자)
생 년 월 일			전 화		사무실 :
					휴대폰 :
학력	기 간		학 교		전 공		학 위	비 고
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
경력	기 간		기 관				직 위	비 고
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월

2) 조장 인적사항

소 속				직 위
성 명		(한자)
생 년 월 일			전 화		사무실 : (교)
					휴대폰 :
학력	기 간		학 교		전 공		학 위	비 고
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
경력	기 간		기 관				직 위	비 고
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월

* 2인 이상일 경우에는 복사하여 추가로 기재

3) 조원 인적사항

소 속				직 위
성 명		(한자)
생 년 월 일			전 화		사무실 : (교)
					휴대폰 :
학력	기 간		학 교		전 공		학 위	비 고
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
경력	기 간		기 관				직 위	비 고
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월

* 2인 이상일 경우에는 복사하여 추가로 기재

※ 1. 최근 수행한 관련사업 순으로 기재한다.

2. 연령 및 근무경력은 공고일을 기준으로 기재한다.

다. 기간별 인원 투입계획

단계별	수행업무	연인원 (M/M)	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	…	…	…	비고
계

5. 추진일정

과 업 내 용	월별 추진 일정								비 고
추 진 률(%)

6. 개인정보 제공 및 활용동의서

개인정보제공 및 활용동의서

본인은 국민체육진흥공단에 제출하는 제안서 및 보고서에 대한 심사·평가에 있어 본인의 학력, 경력, 연구업적 등에 관한 정보를 활용할 필요가 있다는 것을 이해하고 있으며, 이를 위해「개인정보 보호법」등에 의해 보호되고 있는 본인에 관한 각종 정보자료를 동법 제18조의 규정 등에 따라 국민체육진흥공단에 제공하는데 동의합니다.

< 개인정보 제공 및 활용 관련 주요 고지 사항 >

○ 개인정보 수집·이용의 목적 : 심사·평가 및 성과 추적

○ 수집하려는 개인정보의 항목 : 인적사항, 학력, 경력 등

○ 개인정보의 보유 및 이용 기간 : 제안서 접수 시점부터 사업 완료 시점까지

○ 과업수행자는 개인정보 제공 및 활용에 대한 동의서의 제출을 거부할 권리가 있지만, 동의서를 제출하지 않을 경우에는 박물관 용역사업에 신청할 수 없다는 점을 유념하기 바람

또한, 본인 (과업 책임자, 수행원 포함)이 서명 날인한 동의서의 복사본은 심사·평가에 필요한 다양한 자료 수집의 편의를 위해서 원본과 동일하게 유효하다는 것을 인정합니다.

2021년    월     일

□ 본 인 (과업 책임자)

성    명                  (서명)	생년월일

자택전화	휴대전화

e-mail

직    장	직    위

직장전화	연락가능팩스

□ 조장 및 조원

구 분	성 명	생 년 월 일	서 명
조 장
조 장
조 장
조 원
조 원
조 원
조 원

국민체육진흥공단 이사장 귀하

[양식 3]

용역수행실적 총괄표

시행기간			용역명	용역개요	발주처	계약금액 (백만원)	참여인력 (명)	비고
시작	끝	일수
합계
작성자 : (업체명) (직위) (성명) (인)

※ 작성요령

ㅇ 최근 5년 이내에 용역수행 완료한 실적을 최근 연도부터 기재

ㅇ  “용역수행 실적증명원” 제출(용역수행실적증명원 제출이 곤란한 경우 용역계약서 사본 및 수행완료를 증빙할 수 있는 세금계산서 사본 등 제출)

[양식 4]

용역수행 실적증명원

[공고일로부터 5년 이내]
신청인	업 체 명 (상 호)		대 표 자
	영업 소재지		연 락 처
	사업자 번호		제 출 처	국민체육진흥공단
	증명서 용도
용역수행실적내용	용 역 명		구 분
	용역개요
	계약번호	계약기간	계약금액	수행실적
				비율	실적
증명서발급기관	위 사실을 증명함.
			2021년 월 일
	기 관 명	(인)
	주 소
	발급부서		연 락 처
	담 당 자		팩스번호
※ 각 항목요건을 갖출 경우 발행기관별 양식도 가능함 ※ 수행실적 비율은 공동도급 등 자사 실적이 100%가 아닌 경우 작성

[양식 5]

용역 책임자 이력서

성명			소속						직책							연령	세
학력	학교 전공								해당분야근무경력							년 개월
	대학원 전공								자 격 증
본 사업 참여임무				사업참여기 간						참여율				%		투 입 Man/Day
경 력
사 업 명					참 여 기 간 (년월 ~ 년월)						담당업무				발주처				비고

※ 공고일로부터 5년 이내 용역 수행 실적 기재

※ 발주처 담당자 성명 및 연락처 필히 기재(계약부서가 아닌 실제 발주부서 기준으로 작성)

[양식 6]

용역 수행인력의 경력(요약)

순번	성명	최종학력	담당업무	해당분야 근무경력	사업참여 경력건수	본 용역 참여율
				년 개월		%

작성자 : (업체명)                (직위)         (성명)            (인)

※ 본 프로젝트 투입인력을 대상으로 작성

[양식 7]

정보 비공개  동의서

본인은 국민체육진흥공단 시설운영본부의 『국립체육박물관 소장유물 가등록을 위한 전수조사 및 기초명세서 작성(3차) 용역』과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 일체 누설하지 않겠으며 귀 공단이 정한 보안사항을 철저히 준수할 것을 동의합니다.

2021.   .   .

상 호(법인명)  :

주         소 :

대    표    자 :                          (인)

사업자등록번호 :

국민체육진흥공단 이사장 귀하

[양식 8]

서   약   서

회 사 명 :	사업자등록번호 :

주    소 :	연 락 처 :

당사는 국민체육진흥공단 시설운영본부가 추진하는 『국립체육박물관 소장유물 가등록을 위한 전수조사 및 기초명세서 작성(3차) 용역』 입찰과 관련하여 아래와 같이 제반사항을 준수할 것을 서약 합니다.

- 아    래 -

가. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항 등이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

나. 제안서 평가를 위해 구성된 평가위원회의 평가방법 및 평가기준, 평가결과에 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다.

2021.   .   .

서  약  자  :  대 표               (인)

국민체육진흥공단 이사장 귀하