과업지시서

[ 국립중앙박물관 노후 전기시설 보수 전기공사 감리용역 ]

2021.  8.

Ⅰ. 일 반 사 항

1. 과업용역

국립중앙박물관 노후 전기시설 보수 감리용역

2. 목    적

본 용역은 국립중앙박물관 노후 전기시설 보수 감리용역』에 대해 전기 관련 법령에 따라 전기감리 용역으로서 설계도서 및 품질관리, 시공관리, 안전관리에 대한 지도 등 발주자의 권한을 대행하여 공사기간 내 완벽한 시공을 위하여 계약상대자가 수행하여야 할 공사 감리업무의 세부 사항을 정함.

3. 용어 및 적용범위

가. 본 과업지시서는 발주기관 국립중앙박물관(이하 "박물관"이라 한다)과 계약상대자(이하 "계약자"라 한다)간 용역 계약에 따른 과업 수행을 의미한다.

나. 감리업무 수행 시 요청 및 절차, 시공 점검 및 확인사항 등 공사에 공통으로 적용되는 감리업무 전반에 대한 수행 지침이며, 특별한 사항은 “박물관”과 별도로 정한 사항을 적용하되 명시되지 않은 사항은 관계법령 및 규정 등을 따라야 한다.

4. 감리대상 사업개요

가. 사 업 명 : 국립중앙박물관 노후 전기시설 보수 감리용역

나. 위    치 : 서울시 용산구 서빙고로 137 국립중앙박물관

다. 주요내용

⑴ 공사내용(차단기 및 파일런 교체)

구 분	종 류	교체대수(대)	비 고
차단기	고압진공(VCB)	20	-사무동 부변전실: 9대 -전시동 부변전실: 8대 -옥외A동 부변전실: 3대
	저압진공(ACB)	31	-사무동 부변전실: 18대 -전시동 부변전실: 10대 -옥외A동 부변전실: 3대
파일런	MH13(60W)	18	기존 광원부 철거 및 LED광원부 설치 (폴리카보네이트 제작 설치 포함)
	MH15(80, 120, 160W)	109
	MH33(160W)	6
	MH33A(160W)	2
	MH45(100W)	16
	MH46(160W)	2

⑵ 감리내용

ㅇ 감리기간 : 계약일로부터 110일(현장감리 일수 60일)

ㅇ 감리의 종류 : 전기공사 감리

ㅇ 감리원 배치기준 : 책임감리원(중급감리원 1인), 비상주감리원(고급감리원 1인)

라. 감리기간

본 감리 용역의 수행기간은 계약일로부터 공사 준공검사까지이며, 준공 후 준공처리 등 사후관리를 포함하여 110일로 정한다.

ㅇ전체 상주근무일수 60일

- 파일런 교체(주간): 45일

- 차단기 교체(야간): 15일

5. 과업범위

가. 공사계획의 검토

나. 공정표의 검토

다. 시공설계도서의 검토․확인

라. 전력시설물의 규격에 관한 검토․확인

마. 전력시설물의 자재류에 대한 시험성과에 대한 검토․확인

바. 재해예방대책 및 안전관리의 확인

사. 설계변경에 관한 사항의 검토․확인

아. 공사 진행 부분에 대한 조사 및 검사

자. 준공도서의 검토 및 준공검사

차. 설계도서와 시공도면 내용이 현장 조건에 적합 여부 및 시공가능성 사전검토

카. 공사일보 작성

타. 감리완료보고서 작성 등

6. 감리원의 지위

가. 감리업무를 수행함에 있어 감리원은 박물관의 감독 업무를 대행하여야 한다.

나. “박물관”과 "계약자"간에 체결된 감리용역의 계약내용에 따라 감리원은 당해 공사가 설계도서 및 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지 여부를 확인하고 품질관리, 시공관리 및 안전관리 등에 대한 기술 지도를 하며, “박물관”의 위탁에 의하여 관계법령에 따라 “박물관”의 감독권한을 대행하여야 한다.

7. 감리원의 권한

가. 감리원은 공사업자가 공사의 설계도서, 지침서 기타 관계서류의 내용과 적합하지 아니하게 당해 공사를 시공하는 경우에는 재시공, 공사 중지 명령 등 기타 필요한 조치를 하여야 한다.

나. 공사업자가 감리원의 재시공, 공사 중지 명령 기타 필요한 조치를 이행하지 아니한 때에는 관계규정에 의한 조치를 취하도록 “박물관”에게 보고하여야 한다.

다. 감리원이 공사업자에게 재시공, 공사중지 명령 등 기타 필요한 조치를 취한 때는 지체 없이 이에 관한 사항을 “박물관”에게 보고하여야 한다.

라. 감리원은 위 “가” 항에 의한 재시공, 공사 중지 명령을 하였을 경우 “박물관”과 공사 중지 사유가 해소되었다고 판단되어, 공사 재개를 지시할 때는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

8. 감리원의 품위유지

가. 감리원은 법률과 이에 따른 명령, 공공 복리에 어긋나는 어떠한 행위도 해서는 아니되며, 신의와 성실로서 업무를 다하여야 한다.

나. 감리원은 품위를 손상시키는 행위를 하여서는 아니된다.

다. 감리원은 담당 업무와 관련하여 제3자로부터 일체의 금품, 이권 또는 향응을 받아서는 안된다.

라. 감리원은 공사 감리를 수행함에 있어서 성실, 친절, 공정, 청렴 결백하게 업무를 수행하여야 한다.

마. 감리원은 전기공사의 품질향상을 위하여 기술개발 및 보급에 전력을 다하여야 한다.

9. 용역보고서 작성 및 용역의 종료

가. 감리원은 공사 진행 사항에 대한 공사일보를 작성하여 매주 “박물관”에 제출하여야 한다.

나. 감리원은 감리를 종료하였을 때에는 종료보고서를, 분리 가능한 공사의 일부가 완료되어 그에 대한 감리를 종료하였을 때에는 일부 종료보고서를 각각 작성하여 이를 지체 없이 “박물관”에게 제출하여야 한다.

10. 기타사항

가. 감리비 기성대금 지급

⑴ 필요시 감리기간 중 월별 감리 기성대금을 “박물관”에 청구할 수 있다.

나. 본 공사의 공정은 주·야간으로 나누어져 있으므로, 감리원은 공사 착공 전 공정예정표를 근거로 관계부서와 일정을 조율하여야 한다.

다. 본 과업지시서에 언급되지 않거나 누락된 사항은 산업통상자원부「전력시설물 공사감리업무 수행지침」을 준용하여야 한다.

Ⅱ. 착수 단계 과업

1. 용역의 착수

가. "계약자"는 감리용역계약 즉시 상주 및 비상주감리원의 투입 등 감리업무 수행 준비에 대하여 “박물관”과 협의하여야 하며, 계약일로부터 10일 이내에 다음 각 호의 서류를 제출하여 “박물관”의 승인을 받아야 한다.

(1) 착수신고서, 감리업무 수행계획서

(2) 감리비 산출내역서

(3) 상주, 비상주 감리원 배치계획서와 감리원의 경력확인서

(4) 감리원 조직 구성 내용과 감리원별 투입기간 및 담당업무

(5) 기타 “박물관”에서 필요한 서류

나. "계약자"는 해당 공사와 현장 조건을 감안한 “검사업무지침”을 작성‧수립하여 “박물관”의 승인을 받은 후 이를 근거로 검사업무를 수행하여야 한다.

2. 설계도서 등의 검토

가. 감리원은 설계도면, 지침서 등의 검토결과 불합리한 부분, 착오, 불명확하거나 의문사항이 있을 시에는 그 내용과 검토의견을 “박물관”에게 보고하여야 한다. 또한, 공사업자에게도 설계도서 등을 검토하도록 하고, 그 내용과 검토의견을 보고 받아야 한다.

3. 설계도서 등의 관리

"계약자"는 공사용 설계도서 및 자료, 공사계약서 등을 “박물관”으로부터 인수하여 관리번호를 부여하고 관리대장을 작성하여야 하며, 공사관계자 외 유출을 방지하는 등 관리를 철저히 하고 외부유출 시는 “박물관”의 승인을 받아야 한다.

4. 각종 인허가

"계약자"는 공사 추진 시 관계법령에서 요구하는 모든 인허가 사항을 포함한 법규 등을 준수토록 공사업자를 관리ㆍ감독하여야 하고, 관련서류의 작성 시 필요한 경우 “박물관”에게 협조를 요청할 수 있다.

Ⅲ. 시공단계의 과업

1. 감리업무 기록관리

가. 감리비치 서류

"계약자"는 감리업무수행에 필요한 서류 및 “박물관”에게서 필요하다고 인정되는 서류를 비치하고 기록하여야 하며, 준공 후 “박물관”에게 인계하여야 한다.

나. 공사업자 제출 서류의 검토

"계약상대자"는 공사업자가 제출하는 서류는 반드시 접수하여야 하며 접수된 서류에 하자가 있을 경우에는 공사업자에게 문서로 보완 지시하여야 한다.

2. 감리 보고

"계약자"는 공사업자의 공사 계약에 포함된 모든 공사 항목들에 대하여 면밀히 감독하여야 하며 공정 및 공사비에 영향을 주는 문제점은 정기보고서에 명기하여야 하며, 현장에서 발생하는 긴급사항은 건전하고 공정한 판단에 의하여 즉각적인 조치를 취하고 그 내용을 “박물관”에게 지체 없이 보고하여야 한다.

가. 수시보고(필요시)

나. 감리완료보고

감리원은 공사를 착공하여 준공할 때까지의 모든 공사 과정의 사항을 포함한 감리완료보고서를 감리기간 종료 후 14일 이내에 "계약자"의 명의로 “박물관”에게 제출 하여야 한다.

3. 민원 사항

가. 감리원은 필요시 유관기관 관련자 합동회의 및 현지여건조사, 설계도서의 공법검토 등을 통하여 시공사의 민원 발생이 예상되는 사항을 사전에 도출하여 원인제거 또는 최소화를 위해 노력하여야 한다.

나. 감리원은 “가”의 노력에도 불구하고 민원이 발생될 경우에는 “박물관”은 민원 해결을 위해 감리원 및 공사업자와 공동으로 필요한 조치를 취하거나 감리원에게 자료조사 및 관련 서류를 작성하게 할 수 있으며, “박물관”의 요청을 받은 "계약자"는 특별한 사유가 없는 한 이에 성실하게 협조하여야 한다.

다. 감리원은 “박물관”의 지시사항에 대하여 그 이행 상태를 수시 점검하고 공사업자로 부터 이행 결과를 보고 받아 기록 관리하며, “박물관”에 그 결과를 보고하여야 한다.

4. 제3자 손해의 보상에 대한 사항

가. 감리원은 공사 현장 인근 상황을 공사업자에게 충분히 조사토록 하여 자재반입 등 공사 시공과 관련하여 제3자에게 손해를 주지 않도록 대책을 강구하여야 한다.

나. 감리원은 당해 공사 시공으로 인한 민원이 발생되지 않도록 노력하여야 한다.

다. 제3자에게 피해 보상 문제가 제기 되었을 경우 감리원과 "계약자"는 객관적이고 공정한 판단에 근거하여 의견을 제시하여야 한다.

5. 사진촬영 및 보관

가. 감리원은 공사업자로 하여금 공사 사진을 공정별로 착공 전부터 준공 시까지 공사과정, 공법, 특기사항을 촬영하고 공사내용(공사일자, 위치, 공종, 작업내용 등) 설명서를 제출하도록 하여 향후 참고자료로 활용하여야 한다.

나. 공사기록 사진은 공종별, 공사추진 단계에 따라 촬영 정리하여야 한다.

다. 감리원은 사진첩 2부를 제출 받아 수시 검토 확인할 수 있도록 보관하고, 준공 후 “박물관”에 제출하여야 한다.

6. 시공상세도 검토 및 승인

가. "계약자"는 공사업자로 하여금 공사 착공 전에 시공상세도를 제출토록 하여 검토‧확인하여 승인한 후, 그 결과를 “박물관”에 보고하여야 한다.

나. 시공상세도는 설계도서 및 지침서 등에서 불명확한 부분을 명확하게 함으로서 시공사의 착오방지 및 공사의 안전을 확보하기 위한 수단으로 지침서에 명시한 사항과 시공사, 감리원 및 “박물관”에서 필요하다고 판단하는 공종을 대상으로 한다.

7. 예정공정표 검토ㆍ확인

감리원은 공사업자로부터 전기공사 예정공정표를 제출 받아 검토ㆍ확인하여야 한다.

가. 예정공정표는 현장 조직표, 공사세부공정표, 주요공정의 시공절차 및 방법, 시공일정, 주요장비 동원계획, 주요자재 및 인력투입계획, 주요설비, 안전대책 및 환경대책 등을 포함하여야 한다.

나. 예정공정표는 주요공정에 대하여 실제 공사 착공 전에 제출되어야 하며, 공사 중 공사계획서에 중요한 내용 변경이 발생할 경우에는 공사업자로부터 변경 예정공정표를 제출받아 검토ㆍ확인한 후 박물관에 보고하여야 한다.

8. 단전작업 및 공정관리

가. 박물관 운영에 지장을 최소화하기 위해 차단기 교체 일정을 시공업체와 긴밀히 협의하여 주‧야간작업 및 계통별로 구분하여 교체 작업을 실시하여야 하며, 안전한 전기공사가 되도록 하여야 한다.

ㅇ 사무동, 전시동, 옥외부속A동 부전기실 전력공급 중단 일정

ㅇ 사무동, 전시동, 옥외부속A동 부전기실 소방설비 분야 전력공급 중단 일정

ㅇ 사무동, 전시동, 옥외부속A동 부전기실 비상계통 전력공급 중단 일정

ㅇ 사무동, 전시동, 옥외부속A동 부전기실 일반계통 전력공급 중단 일정

ㅇ 사무동, 전시동, 옥외부속A동 부전기실 동력계통 전력공급 중단 일정

ㅇ 사무동, 전시동, 옥외부속A동 부전기실 항온항습기 장비전력공급 중단 일정 등

나. “계약자”는 “박물관”의 필요에 따라 공정회의나 기타회의 주관 시 참석하여 업무에 대한 의견을 개진하고 필요한 정보와 자료를 제공하여야 한다. 또한, "계약자"는 공정에 관한 회의를 소집하도록 “박물관”에게 요청할 수 있다.

다. 감리원은 예정공정표에 의한 진도 및 공정을 관리하여야 하며, 필요한 경우에 공사업자로부터 진도 및 공정관리에 관한 세부적인 자료를 제출받아 감리하여야 한다.

9. 시공 확인

감리원은 공사가 설계도서 및 지침서 등에 일치되게 시공되는가를 현장에서 확인하는 것이 감리원의 업무 중에서 가장 중요한 기본적인 책무인 점을 명심하고 모든 업무에 우선하여 현장시공 확인 업무를 수행하여야 한다.

10. 기술검토 의견서

"계약자"는 시공 중에 발생되는 기술적 문제점, 설계변경사항, 공사계획 및 공법변경 사항, 설계도서간의 차이, 모순 등의 문제점, 기타 공사업자가 시공 중 당면 과제에 대하여 현지실정을 충분히 조사, 검토, 분석하여 공사업자가 공사를 원활히 수행할 수 있는 해결방안을 제시하여야 한다. 기술검토는 반드시 서면으로 작성 제출되어야 하며 중요한 사항에 대하여는 반드시 전문 기술자의 검토를 받아야 한다.

11. 부실 및 부진공사 방지대책 수립

가. 부실공사 방지 대책

감리원은 공사업자와 협의하여 매월 추진하여야할 공사에서 발생할 수 있는 부실공사 원인을 사전에 도출하고, 이를 방지할 수 있는 대책을 수립하여 집중 관리하여야 한다.

나. 파일런 LED 조명기구 배광 특성과 디자인을 고려하여 제작하여야 하며, 샘플 실증 시공 시, 감리자는 방수기능 및 폴리카보네이트 설치 후 조도 측정을 실시하여 부실 시공을 방지하여야 한다.

다. 공사 지연 등에 대한 조치

감리원은 다음 각 호의 사항이 발생한 경우에는 지체 없이 “박물관”에 보고하여야 하며, 감리원의 보고 내용에 대해 검토 한 후 “박물관”의 내부사정인 경우는 관련 부서 간 협의 조치하고, 공사업자의 책임에 속하는 경우에는 이행의 촉구 등 필요한 대책을 강구하여야 한다.

12. 기자재 관리

가. 기자재수급계획 검토

"계약자"는 공사업자로 하여금 기자재 수급계획을 수립하여 기자재가 적기에 현장에 반입되도록 하고, 수급 차질에 의한 공정지연이 발생되지 않도록 하여야 하며, 기자재 수급계획이 공정계획과 부합되는지 확인하고 미비점이 있으면 공사업자에게 계획을 수정하도록 하여야 한다.

나. 기자재 검수

"계약자"는 공사 목적물을 구성하는 주요기계, 제조품, 자재 등의 주요 기자재에 대해 현장 반입 후 공사업자로부터 송장 사본을 접수함과 동시에 반입된 기자재를 검수하고 그 결과를 검수부에 기록 비치하여야 한다.

13. 품질관리

가. 감리원은 품질관리 관계법령, 제반규정 및 지침을 숙지하고 이에 따라 공사업자가 제출한 품질관리 계획을 검토하여야 한다.

나. 감리원은 공사에 사용될 주요자재에 대하여 공사업자로부터 자재사용 승인신청을 제출 받아 공사 계약문서 및 한국 산업 규격 등 제반기준에 의한 품질 및 규격이 적합한 지의 여부를 검토하여야 한다.

14. 안전 관리

"계약자"는 생산성의 향상과 손실을 최소화시키기 위하여 비능률적인 요소인 사고가 발생하지 않는 상태를 유지하기 위한 활동과 재해로부터 인간의 생명과 재산을 보호하기 위해 계획적이고 체계적인 제반 활동을 통해 안전관리를 수행하여야 한다.

15. 설계변경

감리원은 공사 시행과정에서 구조물의 구조, 공법변경 없이 현지여건에 따라 위치변경ㆍ연장 증감ㆍ단순 구조물의 추가시공 등 경미한 설계변경 사항이 발생한 경우에는 우선 변경‧시공토록 지시하고 사후에 박물관에게 서면으로 보고하여야 하며, 구조적 기능상 중요 변경사항이 발생할 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 박물관에게 서면‧보고 후 승인을 득한 후 시공하도록 조치하여야 한다.

16. 준공검사

가. 감리원은 공사업자로부터 준공검사원을 접수하였을 때는 계약서, 지침서, 설계도면, 기타 관계 서류의 내용대로 시공이 완료되었는지 여부를 확인하고 준공검사원의 내용이 정산 설계서와의 일치 여부 등을 검토ㆍ확인하여야 한다.

나. 검사자는 당해공사의 공사업자 또는 그 대리인등을 입회하게 하여 계약서, 지침서, 설계도면, 기타 관계서류에 따라 현장의 이행 사항을 검사하여야 합니다.

다. 검사자는 검사에 합격하지 아니한 부분이 있을 때에는 즉시 공사업자로 하여금 보완시공 또는 재시공케 하고 "계약자"는 당해 공사의 검사자로 하여금 재검사를 수행토록 하여야 한다.

라. 검사자는 임명통지를 받은 날로부터 8일 이내에 당해 공사의 검사를 완료하고 준공검사조서를 작성하여 검사완료일로부터 3일 이내에 검사결과를 "계약자"의 대표자에게 보고하여야 한다.

⑸ "계약자"의 대표자는 준공검사조서 등의 검사 결과를 접수하면 이를 신속히 검토 후, “박물관”에게 지체 없이 통보하여야 한다.

17. 하자보수

가. 하자보수에 대한 의견 제시

⑴ "계약자"의 대표자 및 감리원은 공사 준공 후 “박물관”과 공사업자 간 시설물의 하자 보수처리에 대한 분쟁 또는 이견이 있을 경우, 검토의견을 제시하여야 한다.

⑵ "계약자"의 대표자 및 감리원은 공사 준공 후 “박물관”이 필요하다고 인정하여 하자보수 대책수립을 요청할 경우 이에 협조하여야 한다.