국립한국문학관 건립

소규모 지하안전평가용역 과업지시서

2022. 09.

	목 차
1. 과업개요 1 2. 일반사항 3 3. 세부 과업내용 13 4. 현장조사 과업내용 24 5. 기타(각종 서식) 33

1. 과업개요

1. 과업개요

가. 과업의 명칭 : 국립한국문학관 건립 소규모 지하안전평가용역

나. 과업의 목적

「지하안전관리에 관한 특별법」에 따라 사업이 지하안전에 미치는 영향을 조사․ 예측․평가하여 지반침하를 예방하거나 감소시킬 수 있는 방안 마련

다. 과업의 범위

1) 과업 개요

가) 대지위치 : 서울특별시 은평구 진관동 175(은평구 기자촌 3-13블럭)

나) 대지면적 : 13,248㎡

다) 건물규모 : 지하 2층/지상 3층, 연면적 14,930.27㎡ (예정)

라) 굴착깊이 : 10~15m

2) 과업의 내용

가) ‘지하안전관리 업무지침’에 따른 소규모 지하안전평가서 작성

나) 사업계획 승인 등에 필요한 일체의 관계기관 협의 업무(심의, 인증, 영향평가, 현지조사, 자문회의 등)

다) 소규모 지하안전평가서에 대한 협의 및 최종 승인

라) 설계자와의 업무협조 및 지원

라. 과업수행기간 : 착수일로부터 6개월(180일) 이내

2. 일반사항

2. 일반사항

가. 적용범위

본 과업내용서는「국립한국문학관 건립」의 소규모 지하안전평가 용역을 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 이 과업내용서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계 법령 및 규정을 검토한 후 감독관과 협의하여 수행하여야 한다.

나. 법령 우선준수

계약상대자는 이 과업내용서에 규정한 사항을 준수하여야 하며, 별도로 명시되어 있지 않은 사항에 대해서는 관련 법령의 규정을 우선 준수하여야 한다.

다. 용어해석의 우선순위

1) 이 과업내용서에 사용된 용어의 해석은 다음 각호의 순서로 그에 명시된 용어정의 또는 사용된 의미에 준하여 해석한다.

가) 계약문서(이 과업내용서를 포함한다.)

나)「지하안전관리에 관한 특별법」및 관련 규정, 지침 등

다)「건설기술 진흥법」 및 같은 법 시행령, 시행규칙

라) 기타 건설 관련 법령

2) 과업내용서 상에 용어해석의 차이가 있을 경우에는 감독관와 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

라. 용역감독의 권한

감독관은 이 과업을 수행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 계약 관련 업무내용 및 기술인력 투입현황 등을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

마. 계약상대자의 책임

1) 책임한계

가) 감독관의 승인을 받은 용역성과품이라 할지라도, 계약상대자의 잘못으로 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역 준공 후에도 이러한 사항에 대해 발주자의 수정․보완요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

나) 계약상대자는 본 과업과 관련하여 용역 목적물 또는 제3자에게 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상 등 모든 책임을 져야 한다.

다) 계약상대자가 감독관에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

라) 용역 중 또는 용역 완료 후라도 외부감사 또는 유관기관 요청 및 기타 사유 등으로 인해 본 과업에 대한 자료의 제출 및 설명이 필요할 경우 계약상대자는 감독관의 사전 승인 후 이에 따라야 한다.

2) 지시의 이행

감독관이 용역업무의 수행에 관하여 계약상대자에게 지시한 경우 계약상대자는 지시된 사항의 이행계획서 및 검토보고서를 작성하여 제출하여야 한다.

3) 관계기관 협의

가) 과업수행을 위해 요구되는 각종 인·허가 및 협의 등을 위하여 감독관이 요구할 시 계약상대자는 직접 관계기관과 업무협의를 하여야 한다.

나) 계약상대자는 관계기관과 업무협의를 하기 전에 협의할 내용 및 자료 등에 대하여는 감독관의 승인을 받아야 한다.

다) 계약상대자는 협의 완료 후 협의 결과를 감독관에게 즉시 보고하여야 하며, 용역 준공시에 회의록 등 회의자료를 정리하여 제출하여야 한다.

라) 계약상대자는 감독자가 관계기관 협의를 위한 자료제출 및 회의의 참석 등을 요구할 때에는 이에 응하여야 한다.

4) 공정관리

1) 과업수행 시 과업량과 과업기간을 상시 점검․관리하여야 한다.

2) 예정공정표의 작성, 각종 보고회의 및 제출물 등 용역 진행과 관한 사항은 감독관과 사전협의 하여야 한다.

3) 월간진도 보고시 부문별 세부 잔여 과업량 및 소요일수 등을 작성하여 감독관에게 보고하여야 한다.

5) 문서의 기록비치

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 감독관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 감독관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

6) 재조사

계약상대자가 본 과업을 수행함에 있어 감독관이 조사과정 및 성과가 부실하여 재조사를 요구할 경우 계약상대자는 지시에 따라야 하며, 이에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

7) 안전관리의 의무

계약상대자는 본 과업을 수행하기 위하여 행하는 제반작업 수행 시 관련 법령에 의한 안전관리에 최선을 다하여야 하며 작업도중 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

8) 법령준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관련 법령에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해상황에 대하여 책임을 져야 한다.

바. 주요 업무의 사전승인 등

계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 감독관의 승인을 받고 과업을 수행하여야 한다.

1) 착수신고서의 내용변경

2) 주요 과업내용의 변경

3) 자문 및 관계기관과의 협의사항

4) 지반조사 및 각종 시험 계획

5) 기타 감독자의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 상황

사. 용역수행자의 교체

1) 본 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 「지하안전관리에 관한 특별법」 시행령 제15조에 의한 교육과정을 수료하여야 한다. 책임기술자 또는 용역에 참여하고 있는 건설기술자가 과업의 수행에 불성실하거나 부적당하다고 감독관이 인정하는 경우 계약상대자에게 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

2) 본 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 감독관의 승인을 받아 그와 동등 이상의 자격을 갖춘 건설기술자로 즉시 교체하여야 한다.

아. 적격심사 관련사항 준수

계약상대자는 『용역계약 일반조건』 제38조제1호에 따라 계약상대자가 제출한 적격심사 관련사항을 준수하여야 한다. 다만, 불가피한 사유로 인하여 변경하고자 할 경우에는 감독관과 사전협의 후 내용변경 승인을 받아야 한다.

아. 제출물

1) 계약상대자는 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여 제출하여야 한다.

2) 감독관은 원활한 용역수행 등을 위하여 제출부수의 추가, 제출시기의 변경 또는 본 과업내용서에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록유지를 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다.

3) 계약상대자는 모든 제출물에 대하여 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우에는 지체없이 재작성하여 제출하여야 한다.

4) 계약상대자는 과업수행과 관련하여 국토교통부 서울지방국토관리청, 지자체 또는 관계기관과 협의한 사항에 대하여는 회의록 및 관련 자료를 작성 제출하여야 한다.

5) 계약상대자가 제출한 제출서류가 계약에 위배되는 경우 계약상대자는 감독관이 검토․승인한 자료를 근거로 책임을 회피할 수 없다.

자. 착수 신고서 제출

계약상대자는 과업을 착수한 즉시 다음의 서류를 제출하여야 한다.

1) 착수계

2) 책임기술자 선임계

3) 책임기술자 사용인감계

4) 책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본

5) 분야별 책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본

6) 예정공정표

7) 인력 및 장비투입계획서

8) 보안각서 및 보안대책

9) 기타 발주자가 요구하는 사항

차. 과업수행 보고

1) 착수보고

가) 계약상대자는 용역 착수 후 7일 이내에 다음 사항이 포함된 과업수행 계획서를 작성·제출하여 감독관과 일정 협의를 거쳐 착수보고회를 하여야 한다.

- 사업의 개요

- 사업의 목적

- 사업 추진경위

- 사업대상지 현황

- 분야별 업무계획 및 업무수행자

- 분야별 과업수행일정(예정공정표)

나) 착수보고는 사업책임기술자가 직접 세부 과업수행계획을 보고하여야 하며, 분야별 용역감독자 및 관련담당자, 용역업체 책임기술자 및 참여기술자가 모두 참석하여야 한다.

2) 월간 진도 보고

계약상대자는 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 월간 진도보고를 매월 말일을 기준으로 다음 달 5일까지 용역감독관을 경유하여 서면으로 보고하여야 한다.

가) 과업추진내용 및 공정현황

나) 각종 문서수발 현황

다) 과업수행상 중요 문제점 및 대책

라) 참여기술자 현황

마) 다음 달 과업수행계획

3) 중간보고

다음 각각의 경우에는 관련 자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 한다.

가) 주요 단계별 과업 종료 시

나) 주요계획 및 방침의 설정과 변경 시

다) 감독관이 용역 수행상 필요하여 요구 시

4) 평가서 종합보고

계약상대자는 평가서 작성 후 용역수행 결과를 종합하여 보고를 해야 하며, 사업책임기술자가 직접 보고하여야 한다. 협의의견에 따른 보완서를 작성한 경우에도 보완·수정내용을 종합하여 보고를 해야 한다.

카. 협의와 조정

1) 본 과업을 수행하면서 계약상대자는 별도로 수행되는 타 부문 용역수행기관과 협조체제를 구축하여 계획 및 설계, 제 영향평가, 토질조사 결과 등이 과업에 서로 유기적으로 반영될 수 있도록 하여야 한다.

2) 계약상대자는 의견 조정이 필요한 경우 감독관과 협의하여 결정하여야 하고, 회의 및 협의 시 도출된 문제점 및 처리계획 등이 포함된 회의록을 작성하여 참석자들의 날인을 받은 후 감독관에게 제출하여야 한다.

3) 계약상대자는 별도로 시행되는 타 부문 용역의 수행에 필요한 현황 및 기초자료와 용역성과를 타 부문 용역 수행업체에 제공하여야 하며, 특히 조사설계용역 수행기관과 상호보완적으로 의견을 제시하여 궁극적으로 최적의 계획과 설계가 이루어질 수 있도록 협조하여야 하며, 계획 및 설계내용의 변경에 필요한 각종 평가 관련 검토내용을 즉각적으로 제공하여 주어야 한다.

타. 전문가 자문

1) 감독관은 과업수행 중 중요한 사항의 결정을 위해 당해 전문가에게 자문을 받도록 계약상대자에게 요구할 수 있으며 계약상대자는 효율적인 자문이 될 수 있도록 감독자가 요구하는 시기에 자문을 위한 자료를 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 전문가 자문결과 제시된 의견에 대해서는 감독자와 협의한 후 과업에 반영하여야 하며 자문결과를 보고서에 기술하여야 한다.

파. 통계자료의 사용

통계자료는 그 근거가 명확하고 객관적으로 인정되는 자료를 적용하여야 하며, 다음 각호의 순서로 활용하고 자료의 출처를 명확히 하여야 한다.

1) 국토교통부 등 정부기관 통계자료

2) 과업대상 사업지구 관할 지자체 통계자료

3) 기타 공공기관, 협회, 관련기관 등의 통계자료

4) 현지 조사결과

하. 과업의 추가(변경) 및 설계변경

1) 발주자는 다음과 같이 과업의 추가 및 변경 사유가 발생하는 경우 설계변경을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다.

가) 상위계획 또는 발주자의 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

나) 지자체 또는 관계기관과의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경시

다) 계약상대자의 귀책사유가 아닌 용역의 중지 등에 따른 과업기간의 연장

라) 관계기관 협의결과 등 사업추진에 영향을 미치는 사유(사업추진방식 및 사업규모 변경 등) 발생시의 정산설계변경

2) 상기 과업의 추가 및 변경에 따른 설계변경 시 용역대가 산정은 관련 규정에 따른다.

3) 자문비등 경비성 비용에 대해서는 실집행비용(증빙서 제출)으로 정산한다. 다만, 자문비 등 관련 기준이 있을 경우 기준을 초과할 수 없다.

거. 용역중지

계약상대자의 귀책사유가 아닌 인․허가 지연, 민원발생, 관계기관 협의지연 및 각종 심의신청 기간 소요 등으로 인하여 용역의 계속 추진이 불가하다고 판단될 경우 감독관은 용역중지를 명할 수 있다.

너. 보안 및 비밀유지

1) 보안 관계 법령의 준수

계약상대자는 정부 또는 발주자에게 필요한 보안 관계법령 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야 한다.

2) 계약상대자는 보안대책을 수립하여야 하며 용역착수계와 함께 계약상대자 보안각서와 용역참여자에 대한 보안각서를 제출하되 반드시 자필로 서명하여야 하며, 용역 참여자가 교체될 시에도 또한 같다.

3) 용역참여자가 교체될 시에는 인계, 인수를 철저히 하고 감독관의 승인을 받아야 하며 과업수행에 차질이 없어야 한다.

4) 계약상대자는 본 용역의 작업장소를 통제구역 또는 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

5) 자료보관함은 별도 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정․부책임자를 지정하여 관리하여야 한다.

6) 용역의 정․부책임자는 공정의 진도를 감안하여 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 성과물이 작성되었다고 판단될 때에는 업무일지를 비치하여 작업내용을 기록유지 하여야 한다.

7) 과업성과품 발간 시 유의사항

계약상대자는 필요 시 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 감독관과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간 시는 감독관과 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서 발간하여야 한다.

8) 보안 관리의 책임

계약상대자는 관계법령에 의한 보안 관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

9) 계약상대자는 본 과업을 수행함으로써 산출된 자료 및 내용 등을 발주청의 사전승인 없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부단체 및 개인에게 제공 또는 공개해서는 안 된다.

10) 작업장에서 발생되는 원지, 파지, 잉여분 등 과업폐기물은 반드시 소각 또는 분쇄처리 하여야 한다.

11) 매월 용역수행자에게 사업책임기술자가 직접 보안교육을 실시하여야 한다.

12) 기타 용역 수행과정의 보안사항 이행은 발주청의 보안업무 제규정에 따른다.

더. 성과품의 제출

1) 계약상대자는 성과품 작성기준에 따라 필요부수를 작성․제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 감독자가 요청한 성과품 납품 예정일 또는 용역준공일 7일 이전에 성과품에 대한 사전검사를 받아야 하며, 지적사항을 보완하여 최종성과품을 납품하여야 한다.

3) 모든 성과품은 전산파일로 제출하여야 한다.

배포용 : 이동식 디스크 등 저장매체

4) 지하안전평가서 등 관련 자료는 관련 규정에 따라 지하안전정보시스템(http://www.jis.go.kr)에 등재하여야 한다.

3. 세부 과업내용

3. 세부 과업내용서

가. 일반사항

1) 소규모 지하안전평가서는 「지하안전관리에 관한 특별법」 및 「지하안전관리 업무지침(국토교통부 고시)」등 관련규정에 따라 소규모 지하안전평가 후 평가서를 작성하여야 한다.

2) 본 과업과 관련하여 관계기관과의 협의 시 필요한 자료는 과업 중이거나 완료 후라도 필요한 자료를 제공하여야 한다.

3) 현황조사 상황 및 기타 관련사항은 사진촬영을 하여야 하며, 촬영된 사진은 사진첩과 전산저장장치(매체종류는 발주청과 협의)에 저장하여 제출한다.

4) 본 과업내용서 상 명시되지 않은 사항이나 용어의 해석에 대한 차이는 발주청과 협의하여 시행한다.

5) 계약상대자는 감독관의 요구가 있을 경우 관련 자료를 제출하고 담당 분야 별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며, 감독관의 지시 사항(구두 및 서면 지시 포함)에 대하여는 성실히 수행하고 조치 결과를 서면으로 제출하여야 한다.

6) 발주청은 과업의 품질 확인 및 용역 업무 수행에 대한 정기 또는 수시 점검을 실시할 수 있으며 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 감독관과 협의하여 지적 사항을 보완하여야 한다.

7) 평가서 작성시 설계자등과 협의하여, 설계 원안이 반영될 수 있도록 평가서를 작성토록 한다.

8) 본 과업내용서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 계약상대자가 임의로 해석할 수 없으며, 발주청과 협의하여 정한다.

9) 계약상대자는 주어진 과업의 효율적인 달성을 위해 해당용역에 대한 전문적 기술능력과 경험을 가진 인력의 배치와 과업의 목적, 범위, 공정 등 사업계획을 세워 용역을 수행하여야 한다.

10) 계약상대자는 발주청의 승인 없이 과업의 범위, 내용 등을 변경할 수 없다.

11) 동 용역은 관련법규와 계약조건, 발주청과 협의사항 등을 만족하여야 한다. 만약, 용역의 시행과정에서 변경요인이 발생했을 경우 계약상대자는 발주청에 그 내용과 해결방안을 문서로 보고한다.

나. 과업수행 세부지침

1) 지하안전평가

가) 지하안전평가는「지하안전관리에 관한 특별법」,「지하안전관리 업무지침」에 의하여 지하안전평가서를 작성 제출하여야 하며, 과업기간 내에 대상사업에 대한 지하안전평가 협의에 필요한 조치를 하여야 한다.

나) 지하안전평가 협의시 보완 조정이 필요한 경우 지하안전평가서를 보완 작성 제출하여야 하며, 발주청의 지시에 따라 지하안전평가 협의 완료시까지 성실히 용역을 수행하여야 한다.

다) 지하안전영향성 분석시 수치해석은 3D 해석으로 한다.(필요시)

라) 영향성 분석시 종/횡 방향의 수직/수평 변위 분석을 포함한다.

마) 발파 및 공사시 발생하는 진동에 따른 주변지역과 주변시설물의 안전성 분석을 포함한다.

2) 소규모 지하안전평가서 작성

가) 소규모 지하안전평가서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

(1) 요약문

(2) 소규모 지하안전평가 대상사업의 개요

(3) 소규모 지하안전평가 대상지역의 설정

(4) 지반 및 지질 현황

(5) 지하수 변화에 의한 영향 검토

(6) 지반안전성 검토

(7) 지하안전확보방안 수립

(8) 종합 평가 및 결론

(9) 부록

- 참여한 사람의 인적 사항

- 지반조사자료

- 용어 해설

- 수치해석 검토자료

- 참고문헌

- 계약서

- 설계도서

나) 요약문

(1) 사업계획을 쉽게 알 수 있도록 간략히 작성한다.

(2) 기존자료 조사, 현장조사 등(시추조사, 투수시험, 지하물리탐사 등) 지하안전평가를 통해 파악한 지반 및 지질 현황을 간략하게 요약하여 기술한다.

(3) 관측망을 통한 지하수 조사, 광역 지하수 흐름 분석 등 지하수 변화에 의한 영향을 간략하게 기술한다.

(4) 굴착공사에 따른 지반안전성 영향분석, 주변 시설물의 안전성 분석, 지하안전확보방안에 대하여 요약하여 기술한다.

(5) 지하안전확보방안 제시는 사업시행으로 인한 영향권을 중심으로 논리적으로 일관성 있게 제시하여야 한다.

(6) 지하안전평가에 대한 분석 및 평가 결과를 간략하게 기술하여야 한다.

다) 지하안전평가 대상사업의 개요

(1) 사업계획, 사업의 배경과 목적, 필요성 및 추진경위를 알아보기 쉽게 간략히 작성한다.

(2) 대상사업의 종류·범위·협의요청시기의 적정성 여부를 포함하여 소규모 지하안전평가 실시 근거 및 실시기간을 기재한다. 지반조사가 별도로 시행된 경우 지반조사 시행기간 및 방법, 조사자 등을 검토하여 작성한다.

(3) 설계사항을 검토하여 최대굴착깊이를 산정하고 그 근거를 제시하여야 한다.

라) 지하안전평가 대상지역의 설정

(1) 사업대상지 주변 현황을 분석하여 제시하여야 한다.

(2) 사업시행으로 인해 지하안전에 영향을 미칠 것으로 예상되는 지역을 설정하고 그 내용을 평가서에 제시하여야 한다.

(3) 사업시행으로 인해 지하수위의 변화 및 지반침하가 발생하는 영향범위를 이론적 방법과 경험적 방법을 통해 비교·검토하여 제시하여야 한다.

(4) 수치해석 프로그램을 통해 영향범위를 검토하여 제시하여야 한다.

(5) 영향범위내 건축물, 구조물, 맨홀 및 지하매설물 등을 조사하여 도면 및 표로 제시하여야 한다.

(6) 건축물 및 구조물은 사업대상지와 이격거리, 층수, 구조형태, 준공시기, 기초 형태 등을 조사하여 기재하고, 사업시행으로 인한 영향을 검토하여야 한다.

(7) 지하매설물은 사업대상지와 이격거리, 심도, 규격, 재질, 매설시기, 관리주체 등을 기재하고, 사업시행으로 인한 영향을 검토하여야 한다.

(8) 영향범위내 건축물 및 구조물, 도로 등에 대하여 노후도 및 균열 상태를 조사하고 사업시행으로 인한 영향을 검토하여야 한다.

(9) 영향범위내 공사현장이 있을 경우 공사계획, 규모, 구조형태, 기초 형태, 지하층 시공현황 등을 조사하여 평가에 반영하여야 한다.

(10) 하수관로 등에 대한 최근 CCTV 자료를 수집하여 토사퇴적, 관파손 여부 등을 조사·검토하여야 한다. 필요시 감독원과 협의하여 CCTV 조사를 수행하여야 한다.

(11) 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 의한 제1종, 제2종 및 제3종 시설물 및 안전등급을 조사하여야 한다. C등급 이하의 시설물이 위치 할 경우에는 별도 안전성 검토 및 안전성 확보방안을 수립하여야 한다.

마) 지반 및 지질현황

(1) 기존 자료 조사는 지하정보통합체계, 「국가공간정보 기본법」 제9조 및 제28조에 따른 국가공간정보체계(국토지반정보 포털시스템), 지반 및 지질조사보고서, 기본 및 실시설계자료 등을 활용하며, 가장 최근의 자료를 근거로 그 출처를 표기하여야 한다.

(2) 과거 및 현재의 지형도 및 위성사진 등을 비교 분석하여 대상지 및 인접 구역의 토지이용현황을 조사하여야 한다.

(3) 지질도를 통해 사업대상지 주변 및 인근 지역의 지질 특성을 파악하고 사업영향을 검토하여야 한다.

(4) 국토지반정보 포털시스템 등을 통한 사업대상지 주변 지역의 시추조사 결과와 사업대상지 현장조사 결과를 비교·분석하여야 한다.

(5) 공학적인 특성을 고려하여 지층을 구분하고, 근거 및 사유를 제시하여야 한다.

(6) 현장조사 항목은 대상사업의 종류, 규모 및 지역(지반) 특성 등을 고려하여 지하안전에 미치는 영향을 파악할 수 있도록 선정하고, 각각의 목적에 맞는 방법을 선정하여 감독원에게 보고하여야 한다.

(7) 지하수위는 72시간 이상 관측하고, 관측시기 및 지형적 특징을 고려하여 검토하여야 한다.

(8) 지층별 토질 특성을 고려하여 합리적인 대표 N값을 산정하고 그 사유를 제시하여야 한다.

(9) 문헌자료, 경험식, 인근 설계자료 및 조사·실험 결과를 비교하여 지층별 토질정수를 산정하고 그 사유를 제시하여야 한다.

(10) 기존 자료 조사와 현장조사 결과는 항목별로 정리하여 기술하고, 사업 대상지의 지질 및 지반 현황에 대한 공학적인 검토의견을 포함하여 작성하여야 한다.

바) 지하수 변화에 의한 영향 검토

(1) 지하수 변화에 의한 영향은 기존 자료 조사와 지하수조사시험을 바탕으로 사업지 주변 지하수 흐름 분석을 수행하여 검토하여야 한다.

(2) 기존 자료 조사는 법 제43조에 따른 지하정보통합체계, 「국가공간정보 기본법」 제9조 및 제28조에 따른 국가공간정보체계(국토지반정보 포털시스템), 「지하수법」 제5조의2에 따른 지하수정보체계(국가지하수정보센터), 「하천법」 제22조에 따른 수자원 정보체계(국가수자원관리종합정보시스템), 「농어촌정비법」 제15조에 따른 농촌지하수관리조사(농어촌지하수넷),  등의 기존 관측망 자료 등을 활용하며, 가장 최근의 자료를 근거로 그 출처를 표기하여야 한다.

(3) 국가지하수관측망 및 보조지하수관측망의 자료를 분석하여야 하며 사업대상지와 이격거리 및 관련성 등을 검토하여야 한다.

(4) 기존 자료 분석을 통해 사업대상지 인근 지역의 지하수 분포 현황 및 흐름 경향, 특징을 분석하고 도면, 지도 및 표를 이용하여 제시하여야 한다.

(5) 기존 지하수위 조사결과 활용시 관측 시기 및 위치 등을 고려하여 검토하여야 한다.

(6) 기존자료 및 인근 설계적용 사례, 현장조사 결과 등을 종합 분석하여 수리특성을 분석하고 근거 및 사유를 제시하여야 한다.

(7) 기존 자료 및 문헌자료, 인근 설계자료 조사·실험 결과 등을 비교하여 각종 수리정수(투수계수, 비저류계수, 함양율, 함양량 등)을 산정하고 사유를 제시하여야 한다.

(8) 사업 및 지형·지질적 특성, 지하수위 현황 등을 고려하여 해석단면을 선정하고, 사유를 제시하여야 한다.

(9) 수치해석시 굴착 단계별 적정 공사기간을 적용해야 하며, 공사기간 산정 근거를 제시하여야 한다.

(10) 사업 전 후의 지하수위 분포현황을 분석하여야 한다.

(11) 굴착 단계별 지하수위 변화량 및 유출량을 분석하여 검토하여야 한다.

(12) 사업대상지 전체 면적을 고려한 유출량을 단계별로 구분하여 분석하고 유출수 처리방안을 수립하여야 한다.

(13) 강우에 의한 지하수위 변화량을 검토 분석하여야 한다.

(14) 기존자료 및 인근 설계현황, 강우에 의한 영향 등을 종합하여 적정 초기지하수위를 선정하여 수치해석 등에 적용하고 그 사유를 제시하여야 한다.

(15) 침투해석을 통해 사업으로 인한 지하수 영향범위를 검토해야 한다.

(16) 수치해석에 필요한 각종 조건 및 적용 수치를 도면 및 표를 이용하여 알기 쉽게 기재하여야 한다.

(17) 수치해석 결과는 Contour, 그래프, 표 등을 이용하여 정리하여 기재하고 적정성 등에 대한 공학적인 검토의견을 제시하여야 한다.

(18) 지하수위 저하에 따른 침하량을 이론적 방법과 경험적 방법으로 분석하여 비교·검토하여야 한다.

(19) 영향범위내 공사가 진행중이거나 착공 예정인 현장이 있을 경우 공사계획, 내용 및 시공 현황·계획 등을 조사하여 지하수 변화에 의한 영향 검토시 반영하여야 한다.

사) 지반안전성 검토

(1) 지반안전성 검토는 지하안전평가 대상사업으로 인한 공사 및 운영 중 지반안전성 영향분석과 주변 시설물의 안전성 분석으로 나누어 작성한다.

(2) 현재의 기술적 상황을 고려하여 정량화가 가능한 경우에는 정량적 방법으로, 정량화가 곤란한 경우에는 객관적·정성적 방법으로 분석하여야 한다.

(3) 수치해석 및 경험적·이론적 방법을 통해 사업으로 인한 지반 안전성을 분석·비교하고 공학적인 평가의견을 제시하여야 한다.

(4) 수평 변위량 및 침하량 등에 대한 안전성 평가기준을 선정하고 그 근거 및 사유를 제시하여야 한다.

(5) 지반조건, 굴착깊이, 굴착형상, 인접 구조물 및 지하매설물 현황 등을 고려하여 검토단면을 선정하고 선정사유를 제시하여야 한다.

(6) 수치해석에 필요한 각종 조건 및 적용 수치를 도면 및 표를 이용하여 알기 쉽게 기재하여야 한다.

(7) 수치해석시 사업영향범위내 구조물 및 건축물, 지하매설물을 모두 포함하여 영향범위 이상 구역에 대하여 모델링하여야 한다. 아울러, 도로 및 건축물에 대하여 적정 하중을 적용하고 그 근거를 제시하여야 한다.

(8) 가시설 설계사항을 검토하여 적정성 여부 등을 포함한 검토결과를 감독원에게 보고하여야 한다. 필요시 지반 안전성 확보를 위하여 보강방안 및 대안을 검토하여 제시하여야 한다.

(9) 탄소성 해석을 통해 응력, 전단력, 모멘트, 변위량 등을 검토하여야 한다.

(10) 유한요소 해석을 통해 응력, 변위량, 소성영역 및 지반거동 경향 등을 검토하여야 한다.

(11) 탄소성 해석 및 유한요소 해석결과를 비교·검토하여야 한다.

(12) 지하수위 저하에 따른 경험적·이론적방법의 침하량과 수치해석 결과를 비교·검토하여야 한다.

(13) 수치해석 결과는 굴착 단계별·거리별 침하량을 표와 그래프로 검토하고 지반 거동경향 및 해석의 적정성 등에 대하여 검토하여야 한다.

(14) 가시설 벽체의 깊이별·굴착단계별 변위량 및 응력, 모멘트를 검토하여야 한다.

(15) 영향범위내 건축물 및 구조물, 지하매설물, 도로 등에 대하여 굴착 단계별 변위량 및 안전성을 분석하고, 각변위량, 수평변형률 등을 검토하여 손상도 평가를 수행하여야 한다.

(16) 흙막이 변곡구간 및 우각부 등이 있을 경우 이에 대한 안전성을 검토하여야 한다.

(17) 편토압 발생가능 구간을 분석하여 지반안전성을 검토하여야 한다.

(18) 단계별 굴착심도 및 가시설 설치계획의 적정성을 검토하여야 한다.

(19) 히빙 및 파이핑 등 굴착 저면의 안전성을 검토하여야 한다.

(20) 흙막이 가시설 근입깊이의 안전성을 검토하여야 한다.

(21) 본 사업으로 인해 비탈면이 생성되거나 영향범위내 비탈면이 있을 경우 비탈면 안전성을 검토하여야 한다.

(22) 영향범위내 공사가 진행중이거나 착공 예정인 현장이 있을 경우 공사계획, 내용 및 시공 현황·계획 등을 조사하여 지반 안전성 검토시 반영하여야 한다.

(23) 평가 결과에 따라 허용기준을 만족하지 못할 경우, 적절한 대책(보강, 차수 등)을 수립하여 제시하여야 한다.

아) 지하안전확보방안 수립

(1) 지하안전확보방안은 소규모 지하안전평가 결과를 토대로 기본 및 실시설계 시 계측계획, 차수 및 지반보강 공법 등이 합리적이고 구체적으로 수립되었는지 확인하여야 하며, 미수립 되었을 경우 그 대안을 제시하여야 한다.

(2) 사업 및 공사계획, 지반특성, 주변현황 등을 고려하여 공사 중과 운영 중에 지하안전 확보에 문제가 없도록 구체적인 계측계획을 수립하여야 한다.

(3) 계측항목, 계측수량, 계측빈도, 계측관리기준 등을 항목별로 서술하고 표, 그림, 도면 등을 통하여 정리하여야 한다.

(4) 계측기별 설치시기 및 계측빈도를 설정하고 근거 및 사유를 제시하여야 한다.

(5) 계측기별·단계별 관리기준치를 설정하고 근거 및 사유를 제시하여야 한다.

(6) 지하수위 관리수위 및 최대자연변동량을 산정하여 제시하여야 한다.

(7) 계측시 유의사항 및 중점 관리사항을 제시하여야 한다.

(8) 관리기준 초과시 단계별·주체별(계측업체, 시공업체, 감리업체, 사업시행자 등) 대응방안 및 조치요령을 구체적으로 수립하여 제시하여야 한다.

(9) 지하수 및 토립자 유출 가능성을 평가하고 관리방안을 수립하여야 한다.

(10) 차수공법을 비교·검토하여 공사내용 및 지반여건에 적합한 공법을 제시하여야 한다.

(11) 지반조건을 고려하여 차수그라우팅의 세부사항(주입범위 및 폭, 적정 주입압력, Gel-time 등)을 검토하여 제시하고, 시험그라우팅 계획을 수립하여야 한다.

(12) 지반안전성을 확보할 수 있도록 굴착공법을 비교·검토하여 본 사업에 적합한 공법을 제시하여야 한다.

(13) 암반 굴착시 발파 등에 의한 진동영향을 검토하여야 한다.

(14) 사업의 규모, 공사내용, 지반조건, 지하수 조건 등과 지반침하가 예상되는 구간의 특성 등을 고려하여 취약구간을 선정하고 그 사유를 제시하여야 한다.

(15) 취약구간의 보강 및 차수방안, 관리방안 등을 수립하여 제시하여야 한다.

(16) 인접 구조물 및 공사 조건에 부합한 보강 및 차수공법을 선정하고 적성성 여부 등 공학적인 검토의견을 제시하여야 한다.

(17) 취약·위험공종(요인)을 검토하여 공사중 유의사항 및 이행사항을 제시하여야 한다.

(18) 가능한 둘 이상의 대안을 비교하여 장·단점을 객관적으로 기술하여야 하며, 그 선정사유 및 근거를 명시하여야 한다.

(19) 사업계획 또는 사업 시행으로 인하여 발생될 것으로 예상되는 영향을 구체적으로 제시하고 저감방안을 수립하여야 한다.

(20) 현실적으로 지하안전확보가 곤란한 내용에 대해서는 평가 항목별로 구분하여 분석·기재하여야 한다.

자) 종합평가 및 결론

(1) 각각의 지하안전평가의 평가항목에 대한 개별적인 평가를 실시하고 영향정도가 종합적으로 어느 정도인가를 정량적·정성적 방법으로 분석하여 제시하여야 한다.

(2) 평가결과를 근거로 본 사업 특성을 고려하여 결론을 도출하여 명기하여야 한다.

차) 부록

(1) 지하안전평가를 대행한 전문기관을 기재한다.

(2) 평가에 참여한 자의 인적사항(소속, 직책, 성명, 참여분야 등)을 평가항목별 및 참여내용별로 세분하여 구체적으로 기재한다.

(3) 시추주상도, 투수시험, 지하물리탐사, 지하수 조사 시험 등 현장 조사 결과에 대한 자료를 수록하고 이동식 디스크로 제출한다.

(4) 일반인이 이해하기 어려운 용어에 대하여 알기 쉽게 해설을 붙인다.

(5) 터널 또는 터파기 구간의 지하수 영향 및 지반안전성 수치해석 결과를 정리하여 수록한다.

(6) 인용하였거나 참고한 문헌을 기재한다.

(7) 본문의 내용을 상세히 설명하기 위한 평가, 검토 과정의 자료 등을 수록한다.

다. 관계기관 협의 및 인․허가

본 과업과 관련하여 인․허가 및 업무협의에 필요한 자료는 계약상대자가 작성하여 제출하여야 하며, 협의 등 추진 공정에 차질이 없도록 미리 준비하여 제출하되 지연이나 잘못된 자료로 인하여 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

라. 성과품 작성 및 납품

1) 성과품 작성

가) 일반사항

(1) 용역 성과품은 발주청 검토 후 제출하여야 한다.

(2) 자문내용, 각종 업무협의 사항에 대한 조치결과는 부록에 수록한다.

(3) 용역의 실명화를 위해 참여한 기술자 등의 인적사항과 참여 범위를 기록한다.

2) 성과품 납품

가) 성과품의 납품

성과품은 성과품 작성기준에 따라 작성하고. 용역완료 검사원을 작성하여 발주청에 다음 성과품과 함께 제출한다.

나) 성과품의 종류와 납품부수

구 분		규 격	부 수	비 고
1	소규모 지하안전평가서	A4	10부
2	소규모 지하안전평가 요약보고서	A4	5부
3	현황조사 사진첩	A4	1식
4	기타 필요한 도서 및 서류	A4	1식
5	성과물을 수록한 이동식 디스크	-	5SET

※ 보완서 작성시 평가서에 준하여 납품한다.

※ 납품성과품 제작방법 및 규격 등은 발주청과 협의하여 작성한다.

※ 필요부수는 발주자 및 발주청의 필요에 따라 증가될 수 있다.

4. 현장조사 과업내용

5. 현장조사 과업내용

가. 현장조사 범위

1) 시추조사

가) 조사 수량 : NX 2공

나) 조사 예정심도 : 공당 20m 기준

총 예정심도 (m)	지층별 조사 예정 심도(m)
	표토 및 점토층	모래층	자갈층	호박돌층	풍화암층	연암층	보통암층	경암층
45	-	26	-	-	10	4	5	-

※ 시추조사 위치는 작업 착수 전 감독관과 협의 후 조사하여야 함.

2) 현장조사시험 : 1식

3) 기타사항

※ 조사와 관련한 실적수량에 따라 계약단가를 기준으로 정산한다. 아울러, 계약단가의 과소 이유로 현장조사시험, 토질 및 암석 실내시험 항목을 누락할 수 없으며 현장 여건 등 부득이 시험을 할 수 없을 경우에는 발주청의 승인을 득한 후 정산한다.

나. 현장조사 일반사항

1) 시추조사는 시설평면 가배치 계획 후, 도로계획서 및 주요 구조물 위치에 따라 실시하며 토층여건과 토층변화에 따라 담당자의 승인을 득하여 위치 및 수량을 변경할 수 있다.

2) 모든 조사의 심도는 연암층 H=3.0m 까지 보링을 원칙으로 하고(단, 내진설계를 위한 하향식 탄성파시험 1공은 보통암(전단파속도 [eqn: V _{S}] = 760m/s 이상) 이상의 지반이 30m 이내에 위치할 경우 즉시 시추를 종료 하여야 한다.) 토층 여건에 따라 담당자의 승인을 득하여 가감할 수 있으며, 연암층이 20m 이내에 없을 시에는 담당자와 협의하여 조사 시추공의 심도를 결정하도록 한다.

3) 조사 위치는 평면도에 좌표로 표시를 하여, 측량에 사용한 원점(BM)은 검측에 편리하도록 영구적으로 표시하여야 하며 이를 본 보고서에 수록한다.

4) 케이싱은 담당자의 지시가 있을 때까지 빼어서는 안 되며 지하수위 측정은 24, 48 및 72시간 경과 후마다 측정하되 다음의 사항을 고려하여야 한다.

가) 굴착시 지하수위와 공내 지하수위

나) 동절기 ․ 하절기, 건기․ 우기 등 측정 시기를 고려한 지하수위

5) 토질이나 암석층을 불문하고 시료가 채취되지 않은 경우에는 특별한 경우를 제외하고는 그 작업을 인정하지 아니한다. 또한, 토질 및 암의 분류는 시험결과에 따라 분류하며 육안판정에 따른 결과 및 현장관찰기록 등은 보조판별 자료로 한다.

6) 지반조사 주상도에 기입되는 사항은 다음과 같다.

가) 조사명

나) 조사기간

다) 조사지점 위치 및 표고

라) 조사자

마) 시추번호

바) 시추장비명

사) 각 채취 자료의 위치 및 심도

아) 시추 중에 나타난 층의 관찰

자) 시험의 심도 및 결과

차) 지하수위

카) 코어 회수율 및 천공속도

타) 기타 시추 작업 중 확인된 사항

하) 시추 중에 판단되는 토층, 암층분류 및 심볼 표시

다. 시추조사 실시

1) 사전조치 사항

지하 매설지장물이 예상되는 지역은 가급적 피하여 인근지점에서 시추를 실시하되 도심지에서는 시추 전 일정심도까지 인력 터파기를 실시하여 반드시 지장물을 확인하여 지장물의 파손을 사전에 예방하여야 한다.

2) 시추조사

가) 시추조사는 원칙적으로 일정한 압력 및 회전속도를 유지할 수 있는 유압식 시추기를 사용하고 시추공경은 NX로 굴진하는 것을 원칙으로 하나 현장 원위치시험과 자연시료채취 등에 있어서 필요시는 담당자의 승인을 득한 후 시추공경, 시추방법 등을 변경하여 시행한다.

나) 시추간격 및 심도는 지질상태의 변화와 주요 구조물 설치지역의 장기적 안정성 등을 고려하여 담당자의 승인을 득한 후 시추 간격 및 심도를 조정할 수 있다.

다) 시추 시 사용하는 용수는 굴진 시 순환수나 슬라임의 색조를 이용하여 지층변화 상태를 파악할 수 있도록 원칙적으로 청수를 사용하여야 한다. 단, 공벽 붕괴 등으로 시추가 곤란한 경우는 담당자의 승인을 득한 후 시추 이수를 사용할 수 있다.

라) 암반층 시추 시에는 반드시 다이아몬드비트를 사용하고 더블코어배럴을 사용하여 코어회수율을 최대한 높여야 하며, 굴진속도를 가능한 범위 내에서 암층별로 구분하여 기록 유지한다.

3) 시료상자 정리

가) 시료상자의 규격은 NX 시추시료 보관이 가능한 규격(예: 100×50×8cm) 이상으로 하고 상자에는 과업명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자번호를 표시하고 상자 내에서 토사나 암석코어를 채취심도별로 구분 보관하여야 하며, 시료상자는 천연색 사진으로 촬영하여 보고서에 천연색 인쇄로 첨부한다. 이 때 사진은 코어가 잘 관찰될 수 있도록 상자 직상부에서 촬영하여야 하며, 암석의 색조와 조직이 선명하게 나타나도록 맑은 물을 코어 표면에 살포하여 젖은 상태에서 촬영하도록 한다.

나) 암석코어가 아닌 슬라임 만이 채취된 경우에는 슬라임을 흙 시료와 같은 요령으로 시료 병에 넣어 시료상자에 보관한다.

4) 자연시료 채취

가) 연약점토층에서는 시추조사와 병행하여 실내시험용 불교란 자연시료를 채취  하여야 하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 파라핀을 사용하여 밀봉 하고 시료상자에 보관하며 이동 중의 교란을 방지한다.

나) 자연시료의 채취는 KS 규정한 시험방법에 따라 연약하고 포화된 점성토를 중심적으로 채취하되 보링과 병행하여 연약 토질의 성질을 연속적으로 파악할 수 있도록 실시하며 채취심도는 담당자의 지시에 따른다.

다) 자연시료 채취용 얇은 관은 내경이 80mm 이상으로 내경비 1%, 면적비 15% 이내, 길이 80cm 이상의 것을 사용한다.

라) 시료 채취 시 채취심도와 채취기의 길이 측정을 정확히 하여 어떠한 경우라도 채취기 길이보다 많이 압입되어 내부의 시료가 압축되는 경우가 발생치 않도록 하여야 한다. 만약 이러한 경우 실내시험에 사용될 수 없으며 동일 심도 혹은 연속된 하부층에서 다시 시료를 채취한다.

5) 시추공 폐공처리

지반조사 완료 후 모든 시추공은 지하수 오염방지를 위해 반드시 관련 규정에 따라 폐공처리를 하고 담당자의 확인을 받는다.

6) 사진촬영

조사 전‧후 및 현장시험 광경 중 검사 및 확인이 곤란한 부분은 조사 전 과정을 천연색 사진으로 촬영하여 소형 흑판에 조사명, 공번, 일자, 기타 감독이 지시한 사항을 기록하여 사진첩에 정리한다.

라. 시험굴 실시

1) 현장답사를 통하여 성토지역 또는 토취장 지역에서 지표토질조사를 실시한 후 토질의 변화에 따라 각 구간에서 대표될 만한 토질의 노출지점에 시험굴의 위치를 담당 담당자와 협의하여 선정하여야 한다.

2) 시험굴의 심도는 토사층 1 ~ 2m를 기준으로 하되 각 토질의 대표되는 심도에서 시료를 채취하며, 시료의 양은 토성시험, 다짐시험, 실내 CBR시험 등을 실시할 수 있도록 50kgf 이상을 채취하여야 한다.

3) 토량환산계수 산출을 위하여 토층 1m 및 2m 깊이에서 자연상태의 현장밀도시험 각 1회, 굴착해 놓은 느슨한 상태에서 1회의 현장밀도시험을 실시하여야 한다.

마. 현장시험

1) 표준관입시험

가) 표준관입시험은 KS 규정에 의거한 시험방법에 따라 실시한다.

나) 시험횟수는 지층이 변할 때마다 또는 동일 층이라도 1.0m 깊이마다 1회씩 실시하여야 하며, N치가 50회에 도달하더라도 관입 깊이가 10cm 미만일 때는 타격을 중지하고 그 때의 관입깊이와 타격횟수를 기록한다.

다) 채취된 시료는 함수비 변화가 없도록 200gf 이상으로 2개의 시료 병에 넣어 밀폐시킨 후 시추번호, 심도 및 N치, 현장 토질 분류 등 제반정보가 기록된 규정된 명패를 부착하여야 한다.

2) 현장투수시험

가) 토사층의 투수계수를 파악하기 위하여 정수두(Constant Head) 또는 변수두(Falling Head) 시험법으로 현장투수시험을 시행한다.

나) 시험결과로부터 투수계수의 산정은 관련 규정에 근거하여 산출한다.

3) 수압시험

가) 암반층에서의 투수계수 측정을 위한 수압시험은 Double Packer Method를 원칙으로 하며 시험단위 길이는 3.0m를 기준으로 하되 현장조건에 따라 조정한다.

나) 수압시험 중 Packer 윗 부분에서 누수가 발생할 때에는 Packer의 위치를 상향 이동시킨 후 시험한다.

다) 주수량 측정은 주수율이 일정하게 된 후 시행하며, 각 단계별로 압력부하시간은 10분이상 되어야 하며, 각 측정시간은 1분 간격으로 한다.

라) 주입수의 주입압력은 시험지점에서의 상재토압을 상회하지 않는 것을 원칙으로 하며, 임의의 압력하에서 펌프의 용량이 부족한 경우 Packer 위치를 펌프용량에 일치하는 지점까지 이동시켜 시험 단위길이를 짧게하여 실시한다.

마) 수압시험 시 시추공 저부심도, Packer의 위치, 지하수위, 시추공 상부에서 압력계까지의 거리등 필요한 사항을 측정 기록한다.

바) 시험결과에서 루젼치(Lugeon Value : 압력 10kgf/cm2 하에서 길이 1m의 Nx 시추공에서 1분간 주입량은 Liter로 표시하며, 1 Lu = 10 -5cm/sec)를 산출하여 지반의 투수계수를 결정한다.

4) 공내재하시험

가) 수치해석에 필요한 암반의 변형계수를 측정하기 위하여 시추공내에서 공내재하시험을 실시한다.

나) 시험은 지반강성에 적합한 허용압력을 가지는 시험기로 수행하여야 한다.

다) 본 시험은 시추공 내에 시험기를 삽입하여 유압이나 수압을 사용, 공벽에 압력을 가한 후 시험기 내부에 장착되어 있는 공경 측정 장치를 사용하여 압력증가에 따른 공경의 변화정도, 즉 지반 변위량을 측정한다.

라) 압력조건은 다단계로하여 반복 시험하는 것을 원칙으로 하며 풍화대 및 연암층에서는 각 압력단계에서의 Creep변형을 파악하기 위하여 15, 30, 60, 120초   간격으로 측정한다.

마) 공벽에 가한 압력과 지반의 변위량에 의거 압력-변위량곡선을 작성하여 지반의 변형계수를 산출한다

5) 공내전단시험

가) 불교란시료 채취가 어려운 풍화대(풍화토 및 풍화암)의 전단강도(점착력, 내부 마찰각)을 측정하기 위하여 공내전단시험을 실시한다.

나) 시추공내 시험구간에 전단기를 삽입하고 지상에서 핸드 펌프를 이용하여 전단기를 공벽에 부착시킨 후 수평압력을 가한다.

다) 시추공내 전단기와 연결된 Rod를 지상에서 유압잭으로 끌어당기는 전단응력을 가하여 파괴시의 전단력을 산정한다.

라) 시험구간을 변경한 후 동일한 방법으로 수평응력을 바꾸어 3회 이상 시험하고 측정된 각 3회 이상의 수평응력과 전단력을 근거로 선형회귀분석을 실시하고, 그 결과 산출된 직선적 관계로부터 점착력과 마찰각을 산정한다.

6) 기타 현장시험

특정구간의 현장여건으로 인하여 설계 목적상 필요하다고 판단하는 경우 수행업체는 추가시험의 합당성에 대한 전문가의 자문의견서를 첨부한 시험계획서를 제출하여 담당자의 사전승인을 득하도록 하고 시험소요 경비는 실비 정산한다.

바. 실내시험

1) 기타

가) 토질의 물성시험은 사업부지 전 구간에 대하여 교란된 시료를 대상으로 흙의 물성이 변화되기 이전에 실시하고 역학시험은 교란되지 않은 시료가 채취될 경우 필요한 지점에 대하여 실시하되 그 지점 및 시기는 담당자와 협의하여 시행한다.

나) 토질 및 암석시험의 항목은 담당자와 협의하여 정하고 반드시 공인된 시험기관에 의해 시험을 실시해야 하며 시험결과의 기록 및 제출은 시험성과표 및 시험계산서를 포함하여 제출한다. 단, 암석시험은 시험의 정도를 보장하기 위하여 시험기관은 발주청과 협의하여 시험토록 하며 토질 및 암석시험의 횟수, 제 시험의 수수료 등이 과업내용서나 설계서와 상이할 때는 실제와 부합되게 실비정산한다.

5. 기타(각종 서식)

〔붙임 1〕

착  수  계

1. 용  역  명: 국립한국문학관 건립공사 소규모 지하안전평가용역

2. 계 약 금 액:               원

3. 계약 연월일: 202 .   .   .

4. 착수 연월일: 202 .   .   .

5. 완수 예정일: 202 .   .   .

위와 같이 착수하였기에 착수신고서를 제출합니다.

붙임  1. 책임기술자 선임계 1부.

2. 사업수행 조직표 1부.

3. 예정공정표 1부.

4. 투입장비 현황 1부.

5. 보안각서 1부.

6. 기타 증빙서류 1식.

2021.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                      (인)

문화체육관광부장관 귀하

〔붙임 2〕

책임기술자 선임계

1. 용  역  명: 국립한국문학관 건립공사 소규모 지하안전평가용역

2. 계 약 금 액:               원

3. 계 약 일 자: 202 .   .   .

4. 착 수 일 자: 202 .   .   .

5. 완수 예정일: 202 .   .   .

-  아            래  -

가. 성       명 :

나. 주       소 :

다. 생 년 월 일 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임  1. 경력증명서 원본 1부.

2. 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 사본 1부

202 .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                      (인)

문화체육관광부장관 귀하

〔붙임 3〕

사업수행 조직표

○ 용역명 : 국립한국문학관 건립공사 소규모 지하안전평가용역

구 분	직책	성명	담 당 업 무	자격	비 고
총괄
참여자

〔붙임 4〕

예 정 공 정 표

1. 용  역  명 : 국립한국문학관 건립공사 소규모 지하안전평가용역

2. 계 약 금 액 :               원

3. 계 약 일 자 : 202 .   .   .

4. 착 수 일 자 : 202 .   .   .

5. 완수 예정일 : 202 .   .   .

6. 부문별 예정공정

추정일정 과업내용	시 행 기 간( 일간)						계 (%)	비 고
	1	2	3	4	···········

위와 같이 예정공정표를 제출합니다.

202 .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                      (인)

문화체육관광부장관 귀하

〔붙임 5〕

투입장비 현황

○ 용역명: 국립한국문학관 건립공사 소규모 지하안전평가용역

장 비 명	규 격	수 량	용 도	투입시기	검교정여부	비 고

〔붙임 6〕

보 안 각 서

1. 용  역  명 : 국립한국문학관 건립공사 소규모 지하안전평가용역

2. 계 약 일 자 : 202 .    .    .

3. 착 수 일 자 : 202 .    .    .

4. 완료예정일 : 202 .    .    .

아래의 본인은 상기 용역을 수행함에 있어 취득한 자료와 성과물을 유출   (제공, 대여, 분실 등)할 시 민․형사상의 책임을 질 것을 각서로 제출합니다.

-- 아            래 --

분야	성명	직위	생년월일	주 소	서명	비고

202 .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                      (인)

문화체육관광부장관 귀하

〔붙임 7〕

용역완료 검사원

1. 용  역  명 : 국립한국문학관 건립공사 소규모 지하안전평가용역

2. 계 약 금 액 :              원

3. 계 약 일 자 : 202 .    .    .

4. 착 수 일 자 : 202 .    .    .

5. 완료 예정일 : 202 .    .    .

붙임 : 용역 완료계 2부.

“국립한국문학관 건립공사 소규모 지하안전평가 용역”이 완성되어 검사원을 제출하오니 검사 바랍니다.

2021.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                      (인)

문화체육관광부장관 귀하

〔붙임 8〕

용역 완료계

1. 용  역  명 : 국립한국문학관 건립공사 소규모 지하안전평가용역

2. 계 약 금 액 :              원

3. 계 약 일 자 : 202 .    .    .

4. 착 수 일 자 : 202 .    .    .

5. 완료 예정일 : 202 .    .    .

붙임  1) 용역 완료 내역서 2부.

2) 성과품 1식.

“국립한국문학관 건립공사 소규모 지하안전평가용역”이 완성되어 용역 완료계를 제출합니다.

202 .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                      (인)

문화체육관광부장관 귀하

〔붙임 9〕

주간공정보고

□ 용 역 명 : 국립한국문학관 건립공사 소규모 지하안전평가용역

□ 용역기간 :

□ 계약금액 :

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(201 . . .)	금주예정사항(201 . . .)	비고
업무내용	- 인원투입현황 - 작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기
공정률

202  .  .  .

계  약  자

상      호

책임기술자 :             (인)

문화체육관광부장관 귀하

〔붙임 10〕

월간공정보고

□ 용 역 명 : 국립한국문학관 건립공사 소규모 지하안전평가용역

□ 용역기간 :

□ 계약금액 :

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (202 . . . ～ 202 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월

202 .  .  .

계 약 자

상      호 :

책임기술자 :           (인)

문화체육관광부장관 귀하

〔붙임 11〕

현장조사 작업일지

○ 용역명: 국립한국문학관 건립공사 소규모 지하안전평가용역
일 자	202 . . .		날 씨		상 세 히
작 성 자	현장 상주 기술자(인)		확 인		책임기술자 (인)
금일작업 사항
지시 및 계획사항
장비투입 현황
작업인원 현황	구 분	인 원 수		서 명		비 고
	중급기술자
	보 링 공
	특수인부
	인 부
	기 타
현장조사

〔붙임 12〕

시료보관증

시료보관증

용역명 : 국립한국문학관 건립공사 소규모 지하안전평가용역

위와 같이 국립한국문학관 건립공사 대지에 대하여 시추조사한 시료상자를 용역 완료 후 5년까지 보관하겠으며 분실할 경우 민·형사상의 책임을 질 것을 확약합니다.

성 명	○ ○ ○	생년월일 (사업자등록번호)
주 소
상호 또는 명칭
보관 품목	시료 박스 (○ BOX)

붙임 : 시료박스 보관 사진

202   .   .   .

(주)○○○ 엔지니어링    대표 ○○○ (서명)