<국립한글박물관 교육공간 조성 및 증축 공사>

감리 용역 과업 지시서

2024. 9.

1. 용 역 명: 국립한글박물관 교육공간 조성 및 증축공사 감리 용역(건축,기계)

2. 용역기간

가. 과업기간: 착수일로부터 12개월(365일)

나. 공사기간의 변경이 있을 경우, 그에 동일하게 감리기간도 변경한다.

3. 공사감리의 목적

본 과업은 『국립한글박물관 교육공간 조성 및 증축공사』의 설계도서와 제반 시방서 및 관계 법령에 맞도록 시공자의 공사 수행을 지도·감독함에 있어, 효율적인 공정관리, 품질관리, 안전관리를 통한 완벽한 시설물을 공사 기간에 완료하고 적정한 예산을 집행할 수 있도록 하는데 목적이 있음

4. 관련근거

가. 「건축법」 제25조(건축물의 공사감리), 「건축법 시행령」 제19조(공사감리), 「건축법 시행규칙」 제19조의2(공사감리업무 등)

나. 「건축사법」 제4조(설계 또는 공사감리 등)

다. 「건축공사 감리세부기준」(국토교통부고시 제2020-1011호)

라. 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부고시 제2020-635호)

마. 기타 건설공사 관계법

5. 공사개요(건축)

위 치	서울특별시 용산구 서빙고로 139 (국립한글박물관)
규 모	개보수 및 증축 2,097㎡ (지하1층/ 지상4층)
연 면 적	기존 11,767.29㎡ (증축 후 13,057.15㎡)
예정 공사비	금 4,336,849,000원(건축, 기계 / 관급자설치관급자재비 제외)
공 사 기 간	2024. 10. ~ 2025. 10. (예정, 12개월) (※ 본공사 기간 변경 시 이에 따라 감리용역 기간도 변경)
용 도	문화및집회시설(박물관)
구 조	철근콘크리트구조, 철골철근콘크리트구조, 철골구조

6. 감리 범위

가. 교육공간 조성 및 증축에 따른 공사감리(건축, 기계설비) 전반

나. 해체감리 포함 / 전기, 정보통신, 소방공사 감리 용역 별도(분리발주)

다. 감리원 배치 기준

1) 상주감리원(건축사보 초급이상, 안전보건조정자 선임): 1명(건축)

2) 상주감리원(기계설비 분야 건축사보 초급이상): 1명(기계설비)

3) 비상주감리원(건축사): 1명(건축)

4) 실제 감리원(상주, 비상주) 배치는 감리원 배치계획표에 준하여 국립한글박물관(이하 “발주청”이라 한다)과 협의 후 배치한다. (상주기간 등 배치기간 변경 시 정산 처리)

5) 감리원의 인건비는 실제 근무일수에 따라 정산 처리하며, 정산 증빙서류의 인정은 근무사실여부를 확인할 수 있는 자료를 근거로 한다.

※ 근거자료: 현장 출퇴근 기록기(지문인식기 기록) 등 신뢰할 수 있는 자료

라. 발주청의 자문요구 및 감리자의 의견 제시

1) 발주청은 당해 공사와 관련하여 건축물의 구조상 안전, 건축설비의 설치, 공법의 변경 등 중요한 기술적인 사항에 대하여 감리자로 하여금 관계전문가(관련 교수 및 관계전문기술자)의 자문을 받아 조치하도록 요구할 수 있다.

2) 관계전문가(관련 교수 및 관계전문기술자)와 협력하여 검토․조치한 내용에 대해서는 관련자료(감리보고서 등)에 관계전문가의 서명․날인을 득하여야 한다.

3) 관계전문가(관련 교수 및 관계전문기술자)는 필요시 현장 조사와 검측 및 안전 관련 사항을 점검하고 기록하여 발주청에 보고한다.

4) 감리자가 발주청의 지시에 위배된다고 인정될 경우 이에 대하여 해명토록 하거나 시정토록 지시할 수 있다.

5) 감리자는 공사와 관련하여 검토한 내용에 대하여 의문점이 있을 경우 발주청 또는 시공자에게 의견을 제시할 수 있다.

마. 특기사항

1) 계약자 및 감리원은 공사 시행중은 물론 공사가 종료된 후라도 감사기관의 수감요구 및 문제발생으로 출석요구가 있는 경우에는 이에 응하여야 한다.

2) 공사 준공 후 하자가 발생되었을 경우 그 원인을 조사하여 필요한 조치를 취하여야 하며, 발생 원인이 감리자에게 있는 경우에는 민사상의 책임은 물론 재산상 손해를 배상한다.

3) 공사장 주변에 발생하는 각종 민원사항에 대하여 원인 파악 등 해결방안을 모색하여 적극 해결토록 하여야 하며, 감독자 및 발주청에 보고하여야 한다.

7. 유의사항

가. 본 용역 대가 산출은 『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부고시 제2020-635호)』제17조에 따라 실비정액가산식으로 산출함

나. 계약상대자는 착수 시 제출한 감리원 배치계획표(등급 및 배치기간 포함)에 따라 감리원(상주, 비상주)을 배치하여야 하며, 출근부 등 근무일수(근무사실여부)를 확인할 수 있는 자료를 작성하여 매일 공사 감독관에게 통보하여야 한다.

다. 건축 감리원은 안전보건조정자의 업무도 병행하여야 하며, 안전보건조정자로서 업무 수행 시 공사 감독관에게 통보하여야 한다.

라. 기타 일반적인 사항은 국토교통부 제정 “감리업무 수행지침서” 및 “건축공사 감리세부기준”에 따르며, 용역금액 중 직접경비(주재비, 여비, 도서인쇄비 등)는 실제 소요비용에 대하여 정산처리하며 발주 시 반영한 금액을 변경 없이 산출내역서에 반영해야 한다.

8. 현장지도 및 확인업무[건축법 시행령 제19조제9항, 같은 법 시행규칙 제19조의2〕

가. 시공자가 설계도서에 따라 적합하게 시공하는지 여부의 확인

나. 시공자가 사용하는 건축자재가 관계 법령에 따른 기준에 적합한 건축자재인지 여부의 확인

다. 건축물 및 대지가 관계법령에 적합하도록 시공자 및 건축주를 지도

라. 시공계획 및 공사관리의 적정여부의 확인

마. 공사현장에서의 안전관리의 지도

바. 공정표의 검토

사. 상세시공도면의 검토·확인

아. 구조물의 위치와 규격의 적정여부의 검토·확인

자. 품질시험의 실시여부 및 시험성과의 검토·확인

차. 설계변경의 적정여부의 검토·확인

카. 공정, 기성고 및 도면의 검토, 완성사실 확인

타. 하도급에 대한 타당성 검토 및 현장 노임 지불 확인

파. 기타공사의 질적 향상을 위하여 필요한 사항

하. 감리자의 시공지도 및 시공 확인사항

1) 건축물의 위치 및 배치, 건폐율, 용적률의 설계도서와 합치여부

2) 도로, 인접대지경계선, 인접대지 건축물과 관련되는 건축물의 높이

3) 동일 대지안의 건축물 상호간에 띄어야 할 거리와 건축물의 높이

4) 건축물 구조상의 안전에 관계되는 기초 및 구조체의 규격 또는 단면적, 철근의 가공 및 배근, 콘크리트의 배합 타설 및 양생 등

5) 피난시설, 내화구조, 방화구조, 방화구획, 방화문 등의 설계도서와의 합치여부

6) 토지의 굴착부분에 대한 정리 확인

7) 주요 구조부용 재료의 적정성

갸. 현황조사 사항

1) 감리자는 현지조사 및 피해방지 대책 사항에 대하여 시공 전에 시공자가 조사, 대책을 수립한 사항에 대하여 검토·협의하여야 한다.

가) 현지조사 사항의 검토

나) 안전관리 대책수립 사항의 검토·확인

2) 감리자는 현지 확인 결과 당초설계 내용의 변경이 필요한 경우에는 시공자, 감독관과 설계변경에 관련된 내용을 협의하여야 한다.

9. 감리방법

※ 본 수행지침서에 기재되어 있지 않은 사항은 □건축공사 감리세부기준□(국토교통부고시 제2020-1011호)과 □건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침□(국토교통부고시 제2024-207호)에 따라 공사전반에 대한 책임을 진다.

가. 감리자는 제출한 감리원 배치계획표 중 건축 분야의 건축사보 한 명 이상을 공사기간 동안 공사현장에서 감리업무를 수행하게 하여야 한다.

나. 시정 및 시공 중지요구

- 감리자는 그 업무를 수행함에 있어 공사가 설계도서대로 실시되고 있지 아니하다고 인정되는 경우에는 공사 시공자에게 조속한 시정이나 공사 중지를 요구할 수 있으며, 공사 중지를 요구한 때에는 지체 없이 그 내용을 발주청에 보고하여야 한다.

다. 발주청의 자문요구 및 감리자의 의견 제시

1) 발주청은 당해 공사와 관련하여 공법의 변경 등 중요한 기술적인 사항에 대하여 감리자로 하여금 관계전문가(관련 교수 및 관계전문기술자)의 자문을 받아 조치하도록 요구할 수 있다.

2) 관계전문가(관련 교수 및 관계전문기술자)와 협력하여 검토․조치한 내용에 대해서는 관련자료(감리보고서 등)에 관계전문가의 서명․날인을 득하여야 한다.

3) 감리자가 발주청의 지시에 위배된다고 인정될 경우 이에 대하여 해명토록 하거나 시정토록 지시할 수 있다.

4) 감리자는 공사와 관련하여 검토한 내용에 대하여 의문점이 있을 경우 발주청 또는 시공자에게 의견을 제시할 수 있다.

10. 임무 및 작업보고

감리자는 그 임무수행에 따라 발생한 상황에 대하여 다음과 같이 서면으로 보고 제출하여야 한다.

가. 착수 시 제출서류

1) 제출시기: 착수 시

2) 제출서류

가) 착수신고서

나) 감리업무 수행계획서(기술자 배치 계획서 포함)

다) 감리자 지정신고서 및 경력사항 확인서

라) 공사감리비 내역서

마) 감리자 조직 구성 내용과 감리자별 투입기간 및 담당업무

나. 공사감리 정기보고서

1) 제출 시기: 매월 말

2) 제출서류 (실적 및 계획 포함)

가) 실시공정표

나) 감리업무 수행사항

다) 현장회의록

라) 설계변경사항

마) 감독관의 지시사항

바) 재해예방 및 안전관련 서류(월별 안전관리비 사용내역 포함)

사) 기타 필요하다고 인정된 사항

다. 공사감리 중간보고서

1) 제출시기

- 기초공사시 철근배치를 완료한 때

- 지붕슬래브 배근을 완료한 때

가) 공사감리 중간보고서

나) 건축공사감리 체크리스트(단계별 감리업무 체크리스트는 해당 당계에 한함)

다) 공사감리일지

라) 공사현황 사진 및 동영상(해당 시)

마) 기타 공사감리자가 필요 시 별지로 의견 및 자료 첨부

3) 보고 시 정기보고와 제출 시기가 동일할 경우 통합하여 보고

라. 수시보고

발주청의 별도 지시가 있을 경우 즉시 보고서를 작성하여 제출하여야 한다.

마. 공사감리 완료보고서

1) 제출시기: 공사 준공 후 7일 이내

2) 제출서류

가) 공사감리 완료보고서

나) 건축공사감리 체크리스트

다) 공사감리 일지

라) 공사추진 실적 및 설계변경 종합

마) 품질시험성과 총괄표

바) KS자재 및 국토교통부장관 인정자재 사용 총괄표

사) 공사현황 사진(전, 중, 후) 및 동영상(해당시)

아) 기타 공사감리자가 필요 시 별지로 의견 및 자료 첨부

자) 기타 각종 증빙기록관리 자료

차) 사용승인 관련 자료(사용승인조사 및 검사조서 등-감독관 확인 및 협의)

카) 건축자재 품질관리서「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제1호~7호의 각종 품질관리서 작성(해당 시)

타) 에너지절약계획 이행 검토서「건축물의 에너지절약설계기준」 제24조 [별지 제3호]

파) 참여설계자 확인서「건축서비스산업진흥법 시행령」 제19조, 시행규칙 [별지 제8호] (해당시)

11. 공사감리업무

가. 설계도서 검토

1) 설계도서 상호간의 불일치한 사항, 불명확한 사항, 의문사항 등을 설계자와 협의·확인 검토하여야 한다.

2) 구조도와 구조계산서, 특기시방서 등 설계도서 전반에 걸쳐 공사 착공 전에 공사가 원활하게 추진될 수 있도록 사전 검토하여야 한다.

가) 건물 층고의 확인

나) 보의 위치 및 크기의 확인(특히, 창호 크기와의 관계)

다) 벽체의 위치 및 두께의 확인, 바닥의 고저와 마감두께 확인

라) 구조도와 구조계산서의 대조

마) 특기시방서 검토

바) 입지조건 검사

사) 공법 및 시공자의 시공능력

아) 사용재료 및 제작기간

자) 관련 별도공사

나. 시공관리

1) 감리자는 시공자가 실시한 각종 측량성과 등을 검측·확인하고 시공계획, 품질관리계획, 사용자재의 적합 여부, 안전점검사항 등을 검토·확인하여야 한다.

2) 감리자는 현지조건과 설계도서를 연계 검토하여 시공자가 공사를 원활히 수행할 수 있도록 검토의견을 제시 할 수 있다.

3) 감리자는 시공자의 업무와 책임을 면제시킬 수 없으며 임의로 설계를 변경시키거나 공사기간 연장 등 공사계약조건과 다른 지시나 결정을 하여서는 아니 된다.

4) 감리자는 업무수행 중 설계변경, 공법변경 등 중요한 사항 발생 시에는 발주청에 보고하여 승인을 득한 후 시공토록 조치하여야 한다.

5) 감리자는 공정별로 시공자의 공사일지를 확인하도록 하며 공사 시 매몰되는 주요부위에 대해서는 기술적 판단자료로 활용될 수 있도록 사진을 촬영하여 보관하여야 한다.

나. 공사의 하도급관련사항

1) 감리자는 시공자가 도급받은 건설공사를 「건설산업기본법」, 「공사계약일반조건」에 의거 하도급 하고자 발주청에 통지하거나, 동의 또는 승낙을 요청하는 사항에 대해서는 다음 각 호의 사항에 관한 적정성 여부를 검토하여 요청받은 날로부터 7일 이내에 그 의견을 첨부하여 발주청에 제출하여야 한다.

- 하도급자 자격의 적정성 검토

- 하도급 통지기간 준수 등

- 저가 하도급에 대한 검토의견서 등(저가 하도급에 해당될 경우)

2) 감리자는 상기“1)항”에 의거 처리된 하도급에 대해서는 시공자가 「건설산업기본법」제34조부터 제38조까지 및 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 규정된 사항을 이행하도록 확인하여야 한다.

3) 감리자는 하도급 받은 건설업자가 「건설산업기본법」시행령 제26조제2항에 따라 하도급계약 내용을 건설산업종합정보망(KISCON)을 이용하여 통보하였는지를 확인하여야 한다.

다. 현장대리인 교체

감리자는 현장대리인이 다음과 같은 사항으로 당해 공사 추진에 지장이 있다고 인정되는 경우 그 사유를 첨부하여 현장대리인 교체를 발주청에 요청하여야 한다.

1) 해당 공사의 적정한 품질확보 및 공정관리를 위하여 부적당하다고 인정되는 경우

2) 감리자 및 감독관의 정당한 지시나 의견 제시에 불응하거나 특별한 사유 없이 이행을 지연하여 공정에 지장을 초래하였다고 인정되는 경우

3) 현장대리인으로서의 품위유지 및 능력을 보유하지 못하였다고 인정되는 경우

4) 공정 간 협의·협조 부족 및 거부, 민원 등에 적절하게 대처하지 못하여 발주청 또는 공사 전반에 지장을 초래하였다고 인정되는 경우

5) 현장대리인으로서 의무를 성실히 이행하지 않은 경우

6) 그 외 관련법령 등을 준수하지 않은 경우

라. 공정·품질·안전관리

1) 감리자는 시공자의 공정관리계획이 공사의 종류, 특성, 공기 및 현장의 실정 등을 감안하여 수립되었는지를 검토, 확인하고 시공의 경제성과 품질 확보의 적합성 등을 검토하여야 한다.

2) 감리자는 시공자로부터 주요공종에 대한 세부계획서를 제출받아 공정계획, 자재수급 및 인력동원계획, 장비투입계획등 기타사항을 검토하여야 한다.

3) 감리자는 당해 공사에 적합한 사용자재, 시공품질 등의 검사항목에 따른 시험결과를 적정하게 시행되었는지 확인하며 품질관리가 요구되는 주요공종의 시공과정에 입회·확인하여야 한다.

4) 감리자는 시공자가 사용자재에 대하여 시방서, 법령에 따라 수행하는 품질관리 시험업무 및 시험성과에 관하여 적정여부를 검토·확인하여야 한다.

5) 감리자는 공사전반에 대하여 안전관리계획의 사전검토, 실시확인 등 공사 시공자가 사고예방을 위한 안전관리를 철저히 할 수 있도록 검토·확인하여야 한다.

6) 감리자는 공사현장의 안전관리를 위하여 다음 자료들의 기록 여부를 확인하여야 한다.

가) 안전업무일지 및 점검 실시 여부

나) 안전교육 및 각종 사고 보고

다) 산업안전보건관리비 사용기준에 따른 적정 사용 여부

7) 감리자는 현장에서 사고가 발생하였을 경우에는 시공자에게 즉시 필요한 응급조치를 취하도록 한 후 발주청에 보고하여야 한다.

8) 감리자에게 협력한 관계전문기술자는 그가 작성한 감리중간보고서 및 완료보고서에 감리자와 함께 서명 날인하여야 한다.

라. 설계변경 등

1) 감리자는 공사시행 과정에서 구조·기능상 중요한 설계변경이 필요한 경우나 구조물의 구조·공법의 변경 없이 현지여건에 따른 위치변경과 연장 증감이나 단순구조물의 추가시공 등 경미한 설계변경 사항이 발생한 경우에도 그 사유와 의견을 첨부하여 우리 청에 서면 보고하고 지시를 받은 후 시공토록 조치하여야 한다.(단, 경미한 설계변경의 구체적 범위는 발주청이 정한다.)

2) 감리자는 시공자로부터 설계변경에 필요한 자료를 제출받아 계약변경이 가능한 설계변경 서류를 검토하고, 감리회사 대표자와 연명으로 발주청에 제출하며, 발주청의 지시에 따라 시공토록 하여야한다.

마. 기성검사

1) 감리자는 시공자가 제출한 기성부분 검사원을 실제 시공현황과 비교·검토한 후 확인필하여 발주청에 제출토록 하여야 한다.

2) 감리자는 발주청의 기성검사 시 입회하여야 한다.

바. 민원사항

1) 발주청은 공사시행과 관련한 업무 등에 대한 관·민원 업무 및 인허가 업무 등을 해결하기 위하여 감리자로 하여금 자료조사 및 관련 서류를 작성하게 할 수 있으며, 감리자는 이에 응하여야한다.

2) 감리자는 시공자와 협조하여 공사상 민원이 최소화 되도록 조치하고 민원 발생 시 발주청에 통보하고 자료조사 및 관련서류 작성에 최선을 다하여야 한다.

사. 부대행정

1) 감리자의 보고와 발주청의 지시·통보에 따른 결과보고는 서면보고를 원칙으로 한다.

2) 감리자는 감리관련 서류를 비치하고 각종 문서수발 및 기록유지를 하여야 하며 발주청의 계약에 의한 요구조건에 따라 필요한 보고서를 작성하여 발주청에 제출하여야 한다.

3) 감리자는 시공자가 발주청에 제출하는 서류를 검토하여 필요 시 의견을 첨부하여야 한다.

아. 예비 준공검사

1) 감리자는 준공 1개월 전에 준공기한 내 준공 가능여부 및 미진사항의 사전보완을 위해 감리자가 예비검사를 실시하고, 그 결과를 발주청에 보고 하여야 한다.

2) 감리자는 예비준공검사 결과 미진한 사항에 대하여 준공일까지 보완토록 시공자에게 지시하여야 한다.

자. 준공검사 등

1) 감리자는 계약내용대로 시공이 완료되었는지 여부를 확인하고 시공자가 제출할 준공검사원에 경유·서명하여 발주청에 접수토록 하여야 한다.

2) 감리자는 준공검사 시 입회하여야 한다.

3) 감리자는 계약내용대로 완료되었는지 검토·확인하고 공사목적물이 발주청에 차질 없이 인계될 수 있도록 시공자를 지도·감독하여야 한다.

4) 감리자는 공사 준공 후 발주청과 시공자간의 하자보수 처리에 대한 분쟁 또는 이견이 있는 경우 감리자로서의 의견을 제시하여야 하며 분쟁해소에 최대한 노력하여야 한다.

차. 공사비 지불 검사·확인

도급계약(공사비명세서 포함) 등 공사 진행 및 완료 상태를 확인하고 도급계약서에 따른 공사비 지불 청구에 대한 적정성 검토

1) 중간지불 청구서(시공자가 제출한 공사비 지불청구 검토)

2) 최종지불 청구서(공사완료검사에 의한 최종지불 청구 검토·확인)

12. 기록관리·유지

가. 감리자는 그 임무를 수행하는 동안 다음 기록을 작성, 서명 날인하여 적당한 장소에 비치하고 발주청 감독관의 요구가 있으면 언제든지 제시하여야 한다.

1) 공사감리일지

2) 계획 및 시행공정표

3) 사용자재의 적합성 검토내용

4) 각종시험성과에 대한 검토내용

5) 공법 등의 기술검토

6) 감리자, 시공자, 관급자재 계약자 및 기타 관계자와 실시한 공사 관련 회의록

7) 공사진행 사진첩(주요공정 및 기타)

8) 기타공사(관급자재 등) 에 관련된 서류 및 기록

나. 감리자는 지하에서 행하여지는 공사나 외부에서 확인하기 곤란한 부분의 시공에는 반드시 직접 참관하여 시공 당시 상세한 기록 및 사진촬영 등의 방법으로 그 시공내용을 명확히 입증할 수 있는 자료를 작성·비치하고, 발주청 감독관의 요구가 있을 시 제시하여야 한다.

13. 보고서 및 설계도서 자료의 소유권

업무를 수행하기 위하여 수집 및 작성된 보고서, 설계, 기록, 통계자료 및 이에 관련된 기술자료 등은 발주청이 소유권을 가지게 된다.

14. 감독관의 업무

가. 지원업무

1) 감독관은 박물관 시설관련 전반적인 기술적인 사항에 대해서 감리자에게 검토의견을 요구할 수도 있으며, 감리자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

2) 감독관은 지시사항 등을 반드시 공사감리자를 통하여 전달하며 공사의 시공과 관련하여 시공자에게 직접 지시하지 아니한다.

나. 민원해결

감독관은 공사시행과 관련한 업무 해결하기 위하여 감리자로 하여금 자료조사 및 관련 서류를 작성케 할 수도 있다.

다. 감독관은 공사수행에 따른 업무연락 및 문제점 파악을 위해 공사 수행 상 필요 내용을 점검 또는 검토 할 수도 있다.

라. 감리자가 수행하고 있는 업무를 계약서 및 관계규정대로 성실히 감리하고 있는지를 지도·점검을 실시하여야 한다.

마. 감리자가 행한 감리보고서의 내용에 대하여 현장 점검을 할 수 있다.

바. 감리자가 시공자에게 지시한 명령에 대해 시공자로부터 불만 제기가 있는 경우 감독관은 그 내용을 조사하여 시공자와 감리자에게 협의를 요구할 수 있다.

15. 안전보건조정자 과업내용

가. 과업 목적

1) 산업안전보건법 제68조의 규정에 따라 각 건설공사의 금액의 합이 50억원이 이상인 경우, 2개이상의 건설공사를 도급한 건설공사발주자는 그 2개 이상의 건설공사가 같은 장소에서 행해지는 경우 작업의 혼재로 인하여 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 안전보건조정자를 두어야 함.

2) 중대재해처벌법 시행으로 안전보건조정자는 건축분야의 공사감리자로 지정하여 산업재해를 예방코자 함.

나. 법적 근거

1) 산업안전보건법 제68조(안전보건조정자)

2) 같은 법 시행령 제56조(안전보건조정자의 선임 등) 및 제57조(안전보건조정자의 업무)

다. 과업 수행기간: 착수일로부터 12개월(365일)

※ 본 공사 기간과 동일하며, 공사기간의 변경이 있을 경우, 그에 동일하게 감리기간도 변경한다.

라. 과업 기본방침

1) 안전보건조정자는 혼재작업 발생 시 각 건설공사의 도급인(전기, 소방, 통신공사 등)을 소집하여 회의를 실시하여 위험성평가 결과, 안전작업허가서 내용을 공유하여야 한다.

2) 공사장 순회점검을 실시하여 유해·위험요인을 파악하고 위험성을 개선하도록 하여야 한다.

3) 안전보건조정자 참석자의 회의결과 및 점검표 등 서명, 기록관리후 건축분야의 안전보건총괄자에게 이행토록 하여야 한다.

4) 각 공사간에 혼재된 작업으로 인한 산업재해를 예방하기 위한 작업의 시기·내용 및 안전보건 조치 등 조정토록 하여야 한다.

5) 각각의 공사 도급인의 안전보건관리책임자 간 작업 내용에 관한 정보 공유를 하여야 한다.

6) 관계 도급인과의 협력(협의)

7) 안전보건조정자의 인건비는 실제 당해 업무 근무일수에 따라 정산 처리하며, 정산 증빙서류의 인정은 근무사실여부를 확인할 수 있는 자료를 근거로 한다.

※ 근거 자료: 현장 출퇴근 기록을 위한 근태관리기(지문인식기의 기록) 등 신뢰할 수 있는 자료

마. 과업 수행요령

1) 안전보건조정자 수행 과업은 건축물 콘크리트 타설후 업무를 수행하여야 한다.

2) 과업 수행전 각 건설공사의 도급인에게 회의를 참석하도록 하여야 한다.

3) 안전보건조정자 회의시 참석자 서명 및 회의록을 작성하여야 한다.

4) 전회차 의결사항 등 피드백을 실시하여야 한다.

5) 과업을 수행하기 위하여 필요한 경우 해당 공사의 도급인과 관계수급인에게 자료(착공계, 도급 내역서, 위험성평가, 공사 예정공정표, 등)의 제출을 요구하여야 한다.

바. 과업 업무내용

1) 같은 장소에서 이루어지는 각각의 공사 간에 혼재된 작업의 파악

2) 혼재된 작업으로 인한 산업재해 발생의 위험성 파악

3) 혼재된 작업으로 인한 산업재해를 예방하기 위한 작업의 시기·내용 및 안전보건조치 등의 조정

4) 각각의 공사 도급인의 안전보건관리책임자 간 작업 내용에 관한 정보 공유 여부의 확인

사. 과업 성과품

1) 안전보건조정자 용역 수행 결과서 2부

아. 과업수행 보안유지

1) 용역자는 착수계 및 보안각서를 제출하여야 한다.

2) 성과품은 용역자가 소유 또는 임의로 복사하거나 외부로 유출하여서는 아니된다.

16. 보고서 및 제출서류

가. 보고서 작성

감리원은 업무수행에 따라 발생한 상황에 대하여 붙임 서식을 포함한 아래 단계별 제출서류를 작성하여 서면으로 제출하여야 한다.

※ 보고문서는 생산을 하여야 하나, 붙임 보고 서식 내용 중에 없는 서식은 발주기관과 협의하여 작성 제출한다.

나. 제출서류 인쇄

1) 표지·본문(A4)

2) 사진 등 기타 색상이 필요한 서류는 컬러로 인쇄

3) 제본 좌철 및 기타 필요사항 발주기관 감독관과 협의 후 제본

다. 단계별 제출서류

제출건명	제 출 시 기	첨 부 물 (붙임 서식참조)	부수	비고
감 리 착수보고	◦ 용역 착수 시 ◦ 공사 착공일 전까지	• 감리 착수계 (표지 포함) • 인력투입 현황(국가기술 자격증 사본, 경력증명서 등 첨부) • 책임기술자 보조자 신고서, 각서 등 (재직/자격수첩사본/경력증명서 첨부)	2부
정기감리 보 고 (월별감리)	◦ 매월 말일 기준 작성 익월 7일 이내 제출	• 월별 정기 감리보고서 등 • 공사추진예정공정표에 추진실적이 표기된 공정표 • 각종 증빙 자료 • 기타 붙임 서식에 의한 내용 등 발주기관의 지시사항 등 중요사항	1부
중간감리 보 고	◦ 중간보고시	• 공사감리 중간보고서 등 • 체크리스트, 감리일지, 사진 등 • 각종 증빙 자료 및 의견 첨부	1부
기성부분 감리보고	◦ 공사 도급 상대자가 기성 부분을 신청할 때마다 확인	• 기성 부분 검사조서 • 기성금액 산정 내역서 및 증빙 사진 • 산업 안전보건관리비 사용 내용 사본 • 환경관리비 사용 내용 사본 • 각종 보험 가입증명서 사본 • 기타 증빙 자료	2부	필요시
수시보고	◦ 별도 지시가 있을 경우 즉시 보고(해당 시)	• 감독관 요구하는 서류 등 • 관계 전문기술자와의 협력 등	요구 부수
감 리 완료보고	◦ 감리 대상 공사 준공 후 7일 이내 제출	• 공사감리 완료보고서, 체크리스트 등 • 각종 증빙 자료(원본 등) • 기타 붙임 서식에 의한 내용 등 발주기관의 지시사항 및 중요하다고 판단되는 사항 등	2부
최종감리 완료보고서 제출시 별도제출 서류	◦ 감리 대상 공사 준공 후 7일 이내 제출	• 건물사용 신고서 및 사용 검사필증	2부
		• 건축물대장 및 건축물대장 기재신청서	2부
		• 각종 공사에 사용한 자재나 재료의 시험 성적서 원본 전체	1부
		• 감리업무 수행 중 촬영한 공사사진 및 그에 따른 사진저장 전체 자료	1부
		• 감리업무 수행 중에 발생한 각종 서류 원본 전체(파일로 작성제출)	1부
		• 준공도면(CD 수록)	2부
		• 준공도면(A3 반책 좌철)	2부
유지관리 지침서	◦ 감리 대상 공사 준공 후 7일 이내 제출	• 유지관리지침서(공종별)	2부

※ 보고서의 제출내용, 서식, 제출부수 등은 공사감독관과 협의하여 조정한다.

※ 위 제출 서류 이외로 기타의 서류 및 제출 부수 등을 발주기관에서 추가로 요구할 경우 감리사는 이유 없이 자부담으로 즉시 작성하여 요구하는 일정까지 제출하여야 한다.

붙임

감리보고 및 기타서식

	유 의 사 항
이 지침서에 제시된 각종 서식은 공사 현장에 적용할 표준적인 서식으로서 해당 현장의 실정과 발주기관의 사정에 따라 변형하여 적용할 수 있음. 단, 붙임 서식을 변형하여 적용할 경우에는 사전에 발주기관과 협의·결정한 후 사용토록 하여야 한다.

【별지 제1호 서식】

감 리 착 수 계

[OOO OOO 공사 감리용역]

주  소 :

상  호 :

성  명 :                    (인 또는 서명)

국립한글박물관 귀하

감리 착수 신고서

계 약 명 :

계약금액 :

계 약 일 :     년    월    일

착 수 일 :     년    월    일

감리기간  :     년    월    일

위와 같이 감리를 착수하였기에 착수신고서를 제출합니다.

붙임 : 1. 감리원지정신고서 1부.

2. 인력투입계획  1부.

3. 서약서 1부.

년    월    일

주  소 :

상  호 :

성  명 :                    (인 또는 서명)

국립한글박물관 귀하

감리원 지정 신고서

용   역   명 :

감  리   기  간 : 20  년  월  일 ～ 20 년  월  일

감  리  분  야 : 건축(상주)

감 리 자 성 명 : ○○○

주민등록 번호 :            -

위와 같이 건축법 제25조 및 같은 법 시행령 제19조에 따라 소속 감리원을 선정하여 감리업무를 수행하고자 신고서를 제출합니다.

20 년  월  일

첨부)  1. 감리원 재직증명서

2. 감리원 자격 수첩 사본 1부.

3. 감리원 건설기술자 경력증명서 1부

주  소 :

상  호 :

성  명 :                    (인)

국립한글박물관 귀하

인 력 투 입 계 획

□ 용역명 :

			감리사
			건축사
			성 명
기 능	분 야 별	성 명		주민등록번호				기술자격종목		비 고
상 주 감 리 원	건축분야

※ 건설기술자 기술인력 보유증명서를 첨부하여야 합니다.

【별지 제2호 서식】

공사계약번호 - 보고일련번호

20  .   .

OOO OOO 증축공사(건축)

○월 감리 보고서

조 감 도

주  소 :

상  호 :

대  표 :                 (인 또는 서명)

국립한글박물관 귀하

목     차

1. 중간 감리보고서
2. 회의 기록부
3. 관급자재 사용 확인 기록부
4. 검측요청·결과 통보내용
5. 주요자재 검사 및 수불부
6. 주요구조물 단계별 시공 현황
7. 품질시험·검사 성과 현황
8. 시험·검사 실적
9. 구조물 콘크리트 타설 현황
10. KS자재 및 국토교육부장관 인정 자재 사용 총괄표
11. 검측대장
12. 관급자재 발생품(잉여) 정리부
13. 안전교육 실적부
14. 산업안전보건관리비 사용실적
15. 부진공정 만회 대책
16. 감리자 근무상황 기록부
17. 민원처리부(전화 및 상담)
18. 공사사고 보고서
19. 감리 업무일지

중간 감리보고서

1. 공사계약 개요

1) 공 사 명 :

2) 위    치 :

3) 공사종류 :

4) 사업개요 :

5) 계약체결 내용

(1) 건축․토목·조경공사

① 계약일자 :

② 착공일자 :

③ 준공예정일자 :

④ 계약금액 :            원(관급액 :              원 별도)

⑤ 낙 찰 률 :     %

⑥ 공사도급회사 :  상호명          대표

※ 작성요령

1. 공동도급일 경우 지분율 및 이행방식을 기재합니다.

2. 공종별 분리발주 시 각각의 계약내용을 전부 기재합니다.

2. 감리용역 계약 개요

1) 계 약  일 자 :

2) 착 수  일 자 :

2) 준공예정일자 :

3) 계 약  금 액 :

4) 감 리  회 사 :  상호명          대표

5) 낙   찰   률 :    %

6) 입 찰  방 법 :

1. 공 사 감리건명
2. 공 사 감 리 자		상호 : 대표 : ○○○(인)
3. 용역계약 내 용		계약일	20 년 월 일				감 리 용 역 기 간
		계약액	￦ 원				20 년 월 일～20 년 월 일
4. 공사계약 내 용		공사별	공 사 비 (원)				총 공사기간	공사도급자
			계약금액	관 급	계
					0		20 년 월 일 ～ 20 년 월 일	(주)○○회사 대표 ○○○
5. 감리구분		(■중간,□수시,□기성,□최종 구분)			금회감리 실시기간		20 년 월 일 부터 20 년 월 일 까지 ( 일간)
6. 공사진도 (추 정)		전체추진공정 : %			(예정공정대비 : % 진척)
7. 주요 공사감리내용
감리일자	확 인 사 항					지적내용 및 현장 조치사항			비 고
20 . . .	○ - ○ -

8. 전차 공사감리 지적사항 확인결과

감리일자	지 적 사 항	확 인 결 과	비 고
20 . . .	○ - ○ -
20 . . .	○ - ○ -

9. 현장배치 기술자(현장대리인) 근무상황 :

10. 공사감리자 의견(※ 추진공정, 설계변경요인, 기타 공사시공 관련의견 기재)

11. 공사사진 : “별첨”

감리업무 관련법령 및 동 공사 감리 용역 과업지침에 의거 위와 같이 공사 감리를 실시하고 보고서를 작성하여 제출합니다.

20  년      월      일

공 사 감 리 자 : 직                성명              (인)

감리회사 대표 : 직                성명              (인)

국립한글박물관 귀하

공 사 사 진 건 명:
사진설명
사진설명

회 의 기 록 부

▣ 공사명 :

▣ 작성자 : (감리회사명)                   상주감리원  성명           (인 또는 서명)

제 0 회	회 의 록
회의안건		회의일시	년 월 일
업무분류 체계번호		발 주 청
참 석 자		감 리 단	(인 또는 서명)
		시 공 자	(인 또는 서명)
		회의장소
특기사항
연 번	제 목	내 용		비고
1 2 3 4 5 6	“예” ○ 공정보고 ○ 인력투입현황 ○ 현안사항 ○ 업무처리실적 ○ 향후 수행계획 ○ 기타사항	“현안사항은 일련번호를 부여하며 차후 업무분류와 연결되어야 하므로 업무분류 체계 구축 완료 후 번호 부여”

관급자재 사용 확인 기록부

▣ 공사명 :

▣ 작성자 : (감리회사명)            상주 또는 비상감리원 성명         (인 또는 서명)

▣ 기  간 : 20  . 00. 00 ~ 20  . 00. 00.

품 명				규 격
년월일	설계량	인수량	사용량	잔 량	인․계 인수자		비고
					감 리 원	현장대리인

※ 관급자재 현황 참조(관급 자재별 별지로 작성)

※ 본 서식은 월별 감리·기성감리(사본) 및 최종 감리완료(원본) 보고 시 제출 합니다

검측요청․결과 통보내용

검 측 요 청 서

번호 :                                                            20  .   .   .

받음 :

다음과 같은 세부공종에 대하여 검측요청 하오니 검사 후 승인하여 주시기 바랍니다.

위 치 및 공 종
검 측 부 위
검 측 요 구 일 시
검 측 사 항

시공자     점 검 직 원                (인 또는 서명)

현장 대리인                (인 또는 서명)

................................................................................................................

검 측 결 과  통 보

번호 :                                                            20  .   .   .

받음 :

문서번호 ○○로 검측요청 한 건에 대하여 20  .  .  . 검측한 결과를 다음과

같이 통보합니다.

1. 검측결과

2. 지시사항

붙임 : 감리원의 검측 체크리스트

감리원                   (인 또는 서명)

※ 작성요령

1. 재검측시에는 붉은 글씨로“(재)”를 우측 상단에 작성합니다.

2. 시공자가 재검측 요청할 때에는 잘못 시공한 기능공의 성명을 받아 그 명단을 첨부하여야 합니다.

3. 2부 작성하여 시공자, 감리원 각 1부를 보관하여야 합니다.

주요자재 검사 및 수불부

▣ 공 사 명 :

▣ 검 측 자 : (감리회사명)           상주 또는 비상감리원 성명        (인 또는 서명)

▣ 입 회 자 : 현장대리인                                  성명        (인 또는 서명)

▣ 품    명 :

반 입 년월일	설계량	단위	반입수량	합격수량	불 합 격		출고일	출고량	잔량	비고
				금회 누계	수량	사유

※ 작성요령

- 건설자재별로 작성

- 상단은 반입검수자가 하단은 출고검수자가 기재합니다

- 현장 반입 후 작업장 반출 시 까지는 감리원의 감독하에 관리합니다

(매 출고시마다 감리원이 확인하여 반출량 및 잔량을 확인하여야 합니다)

주요구조물 단계별 시공현황(건축 “예”)

▣ 공 사 명 :

▣ 검 측 자 : (감리회사명)       상주 또는 비상주감리원  성명         (인 또는 서명)

▣ 건축물

◦ 시공기간 :

◦ 터파기 완료일 :

◦ 버림CON`C 타설일 :

(시공/설계)

구 분		층 고 (m)	철근조립	거푸집 조 립	CON`C 타설	양 생	거푸집 해 체	자 재
								철근 (ton)	CON`C (m3)
기 초
지하층	2층
	1층
지상층	1층
	2층
	3층
	4층
	5층
	6층
총 계
※ 작성요령 1. 필요시 단면도 및 정면도, 좌표 등을 첨부합니다. 2. 철근조립에서 거푸집 해체까지는 최초일부터 최종일까지 소요된 작업기간을 기재합니다.

품질시험·검사성과 현황

▣ 공 사 명 :

▣ 작 성 자 : (감리회사명)          상주 또는 비상감리원 성명         (인 또는 서명)

일련 번호	년월일	시험·검사 종 류	재료	시험·검사 회수					비고
				계 획	실 시	합 격	불합격	재시험

붙임 : 주요자재 시험성적 확인사항 입증자료 첨부

시험․검사 실적

▣ 공 사 명 :

▣ 확 인 자 : (감리회사명)                    감리인 성명             (인 또는 서명)

▣ 작 성 자 : 현장대리인                             성명             (인 또는 서명)

공종	시험․검사 종 목	계획시험 ․ 검사회수	전월까지 시험․검사회수				금월 시험․검사회수				누계 시험․검사회수
			실 시	합 격	불합격	재시험	실 시	합 격	불합격	재시험	실 시	합 격	불합격	재시험

※ 작성요령

- 횡 서식으로 변형 사용

※ 본 서식은 1부는 감리사무실에 작성·비치하여야 합니다

구조물별 콘크리트 타설 현황

▣ 공 사 명 :

▣ 작 성 자 : (감리회사명)          상주 또는 비상감리원 성명         (인 또는 서명)

구조 물명	타설 일자	타설 부위	설계량 (㎥)	타설량 (㎥)	콘크리트 배합종류	납품 회사	타설 방법	타설 시간	타설시 온 도 (℃)	시 험 결 과				시 험 자
										슬럼프 (㎝)	공기량 (%)	염분량 (㎏/㎥)	28일 압축 강도 (kg/㎝2)	시공사 직 원		감리원
														성명	서명	성명	서명

※ 작성요령

1. 횡서식으로 변경 작성

2. 슬럼프, 공기량과 28일강도 시험자가 다를 경우 슬럼프, 공기량 시험자는 상단에, 28일강도 시험자는 하단에 성명과 서명

3. 직접타설 : Mixer Truck으로부터 직접 받아 타설.

4. Pump : Pump Car로 타설

KS자재 및 국토교통부장관 인정자재 사용 총괄표

▣ 공 사 명 :

▣ 작 성 자 : (감리회사명)         상주 또는 비상주감리원 성명         (인 또는 서명)

K.S자재 및 국토교통부장관 인정자재 사용 총괄표
순 번	품 명	규 격	수 량	KS규격번호	제조회사	제조회사 주소	비 고

검  측  대  장

▣ 공 사 명 :

▣ 검 측 자 : (감리회사명)         상주 또는 비상주감리원 성명         (인 또는 서명)

▣ 입 회 자 : 현장대리인                                   성명         (인 또는 서명)

공 종	검 측 부 위 (설계규격, 단위, 수량 포함)	검 측 일	검 측 내 용	합격여부	검측결과 또는 입증자료

붙임 : 매몰 부분 사진 첨부

관급자재  발생품(잉여) 정리부

▣ 공 사 명 :

▣ 확 인 자 : (감리회사명)         상주 또는 비상주감리원 성명         (인 또는 서명)

▣ 입 회 자 : 현장대리인                                   성명         (인 또는 서명)

발 생 년월일	품 명	규 격	단위	수 량		발생사유	보관사항 (발주청인계여부)
				사용가능	사용불가

안 전 교 육 실 적 부

▣ 제    목 : ○ 월분 안전교육 실적보고

▣ 공 사 명 :

▣ 작 성 자 : (감리회사명)        상주 또는 비상주감리원 성명          (인 또는 서명)

▣ 입 회 자 : 현장대리인                                 성명          (인 또는 서명)

구 분	실 시 년월일	주요내용	교육인원(명)		비 고
			직 원	기능공
정기교육
특별교육
계

※ 작성요령

- 구분은 정기교육, 특별교육 등을 기재(교육용 책자 등과 사진 첨부)

산업안전보건관리비 사용실적

▣ 공 사 명 :

▣ 검 토 자 : (감리회사명)        상주 또는 비상주감리원 성명          (인 또는 서명)

산업안전보건관리비 사용실적총괄
	건설업체명		공 사 명
	소 재 지		대 표 자
	공 사 금 액	원	공 사 기 간		～
	발 주 자		누계공정률		%
	계 상 된 안전관리비	원
	사 용 금 액
	항 목			누계 사용금액
	계
	1. 안전관리자 등 인건비 및 각종 업무수당 등
	2. 안전시설비 등
	3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등
	4. 안전진단비 등
	5. 안전보건교육비 및 행사비 등
	6. 근로자 건강관리비 등
	7. 건설재해예방 기술지도비
	8. 본사사용비
건설업산업안전보건관리비계상및사용기준 제10조제1항의 규정에 의하여 위와 같이 사용 내역서를 작성하였습니다. 년 월 일 작 성 자 : (시공회사명) 직책 성명 (인 또는 서명)

※ 제출시기 : 월간 감리보고 시 제출하고 기성금 신청 시에는 월간 보고된 내용을 취합 제출

부진공정 만회대책

▣ 공 사 명 :

▣ 검 토 자 : (감리회사명)            상주 또는 비상주감리원 성명      (인 또는 서명)

▣ 작 성 자 : 현장대리인                                     성명      (인 도는 서명)

▣ 공정현황(20  .   .   . 현재)

구 분	계 획	실 적	대 비	비고
공정률(%)

ㅇ 부진사유

-

ㅇ 만회대책

-

ㅇ 감리원 의견

-

※ 본 서식은 공사예정공정표에 추진실적이 표기된 공정표 후면에 첨부하여 제출합니다

감리자 근무상황 기록부

▣ 공 사 명 :

▣ 작 성 자 : (감리회사명)                        대표                (인 또는 서명)

▣ 감리기간 : 20  .  . ∼ 20  .  .  .(00 일간)

구 분		근 무 상 황										확인자 (감독관)	비고
		책임관리원		감 리 원						보조요원
년월일	요일	건 축		건 축		토 목		조 경		서무/경리
		성 명	서명	성 명	서명	성 명	서명	성 명	서명	성 명	서명

※ 작성요령 : 횡 서식은 변경 사용 가능

※ 본 서식은 월별 감리(사본) 및 최종 감리완료(원본 취합) 보고 시 제출 합니다

민원처리부(전화 및 상담)

▣ 공 사 명 :

▣ 작 성 자 : (감리회사명)            상주 또는 비상주감리원           (인 또는 서명)

월 일	민 원 인	민 원 내 용	처리계획 및 조치내용	비 고
	(주 소) (성 명) (연락처)	(위 치) (민원내용)

※ 작성요령

- 시공감리원이 처리 불가능한 사항은 발주청에 서면 보고합니다.

- 횡으로 서식 변경 사용 가능

공사사고 보고서

수 신 :                       분 류 기 호  :

참 조 :                       제출년월일 :

발 신 :                                                   (인 또는 서명)

공 사 명
계 약 금 액
시 공 자
착 공 년 월 일
준공예정 년월일
사고발생 년월일
최 근 공 정
피 해 개 요
복 구 대 책
첨 부 서 류	피해 광경사진, 피해 내역서

※ 공사사고 발생 시 즉시 보고하고, 사고발생 해당 월에 감리보고 시 제출 합니다

감 리 업 무 일 지

공 사 명				누계공정		상주감리원
				%		성 명	서명
년월일	년 월 일( 요일)	날씨 :	기온	최저	℃
				최고	℃

주요작업상황	공 종	작 업 내 용		공정(%)	특기사항
감리원별업무수행내용	성 명	서 명	주 요 업 무 수 행 내 용		공사감독관 지 시 사 항
	건축감리원 ○ ○ ○
	토목감리원 ○ ○ ○		※ 조경공사를 포함한 감리내용을 작성할 것

문서수발	분류	문서번호	제 목(내용요약)	비 고
	발송
	접수
특기사항

1. 현장배치기술자(현장대리인) 근무상황 :

인 원 및 장 비 투 입 현 황
투 입 인 원				장 비 투 입
직 종	금 일	누계(월간)	비고	장비명	금일	누계(월간)	비고
계

2. 감리자 의견(※ 추진공정, 설계변경요인, 기타 공사시공 관련의견 기재)

3. 시공감리 관련사진 : 붙임

상주감리 업무 관련 법령 및 동 감리용역 과업지침에 의거 위와 같이 공사 감리를 실시하고 보고서를 작성하여 제출합니다.

2015년     월     일

상 주 감  리 원 : (회사명)                성명                (인 또는 서명)

감리 회사 대표 :  (회사명)               성명                (인 또는 서명)

국립한글박물관 귀하

※ 작성요령

1. 보조 감리원 추가 시 칸수 조정가능, 누계는 월간단위로 기록한다.

2. 감리원 본인의 업무내용을 6하 원칙에 의거 기록함과 동시에 공사추진내용, 검측결과, 현장실정 보고 등을 빠짐없이 기록하고 모든 감리원에게 공람 서명토록 하여 감리원 모두가 현장내용을 파악할 수 있도록 작성한다.

3. 주요작업상황은 공사추진계획에 따라 당일 작업을 수행하였거나 그와 관련된 공종에 대하여 업무수행내용을 상세히 기록하여 작성한다.

4. 감리업무일지는 매일매일 작성하는 것을 원칙으로 하고, 업무내용이 많아 기재가 원활하지 못할 경우 칸수를 조정하여 기재합니다.

5. 감리원이 현장점검시 동행자 소속, 직책, 성명 등과 점검내용, 위치, 특정부위, 점검결과 등을 기록하고 현장점검 중 지적된 사항과 시공자에게 지시한 내용 등을 기재합니다.

6. 감리원은 공사와 관련하여 현장의 긴급상황, 조치사항, 도면검토, 구두협의 및 지시한 사항의 경우 상대방의 소속, 직책, 성명 등을 기록하고, 구두지시 및 유선통화 내용은 감리원들의 업무수행 근거자료이므로 상세히 기재합니다.

【별지 제3호 서식】

공사계약번호 - 보고일련번호

20  .   .

OOO OOO 공사 (건축)

기성부분 감리 보고서

조 감 도

주  소 :

상  호 :

대  표 :                 (인 또는 서명)

국립한글박물관 귀하

목     차

1. 기성부분 검사조서	page
2. 기성부분 내역서
3. 기성부분 감리보고서
4. 산업안전보건관리비 사용 내역 사본
5. 환경관리비 사용 내역 사본
6. 각종 보험 가입증명서 사본
7. 기타 증빙 서류

○○공사 기성부분 검사조서(제 회)

1. 공 사 명 :

2. 공사위치 :

3. 계약금액 : ￦    원

4. 공사도급자 : 상호 (주)○○회사    대표 ○○○

5. 계약년월일 : 20 년   월   일

6. 착공년월일 : 20 년   월   일

7. 준 공  기 한 : 20 년   월   일

8. 현 재 공 정 : 20 년   월   일  [현재     %]

9. 첨부서류 : 기성부분 내역서, 기성부분 사진

위 공사의 기성부분 감리 시행에 있어서 공사 전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 기성되었음을 확인하오며, 만약 공사감리 수행에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 실액 변상 또는 도급자로 하여금 재시공 지시하는 등 특단의 조치를 취할 것을 서약하고 이에 기성부분검사 내역을 제출합니다.

20  년   월   일

검사자  소속                  감리자  성명          (인)

입회자  소속               현장대리인 성명          (인)

국립한글박물관귀하

※ 검사자는 감리회사 대표 또는 감리자가 서명, 입회자는 시공회사의 현장대리인이 서명한다.

○○공사 기성부분 내역서

1. 공   사   명 :

2. 계  약  금  액 : ￦    원

3. 기성부분금액 : ￦    원  20 년  월  일 현재

4. 내        역

[공사원가계산서](갑)

품 명	규 격	도 급 액			금회 기성액			전회까지의 기성액			비고
		수량	단가	금액	수량	금액	비율 (%)	수량	금액	비율 (%)

[내역서](을)

품 명	규 격	도 급 액			금회 기성액			전회까지의 기성액			비고
		수량	단가	금액	수량	금액	비율 (%)	수량	금액	비율 (%)

※ 본 서식은 계약자가 횡 서식으로 변경하여 사용하며 제출함.

기성부분 감리보고서

1. 공사계약 개요

1) 공 사 명 :

2) 위    치 :

3) 공사종류 :

4) 사업개요 :

5) 계약체결 내용

(1) 건축․토목·조경공사

① 계약일자 :

② 착공일자 :

③ 준공예정일자 :

④ 계약금액 :            원(관급액 :              원 별도)

⑤ 낙 찰 률 :     %

⑥ 공사도급회사 :  상호명          대표

※ 작성요령

1. 공동도급일 경우 지분율 및 이행방식을 기재합니다.

2. 공종별 분리발주 시 각각의 계약내용을 전부 기재합니다.

2. 감리용역 계약 개요

1) 계 약  일 자 :

2) 착 수  일 자 :

2) 준공예정일자 :

3) 계 약  금 액 :

4) 감 리  회 사 :  상호명          대표

5) 낙   찰   률 :    %

6) 입 찰  방 법 :

1. 공 사 감리건명
2. 공 사 감 리 자		상호 : 대표 : ○○○(인)
3. 용역계약 내 용		계약일	20 년 월 일				감 리 용 역 기 간
		계약액	￦ 원				20 년 월 일～20 년 월 일
4. 공사계약 내 용		공사별	공 사 비 (원)				총 공사기간	공사도급자
			계약금액	관 급	계
					0		20 년 월 일 ～ 20 년 월 일	(주)○○회사 대표 ○○○
5. 감리구분		(□중간,□수시,■기성,□최종 구분)			금회감리 실시기간		20 년 월 일 부터 20 년 월 일 까지 ( 일간)
6. 공사진도 (추 정)		전체추진공정 : %			(예정공정대비 : % 진척)
7. 주요 공사감리내용
감리일자	확 인 사 항					지적내용 및 현장 조치사항			비 고
20 . . .	○ - ○ -

8. 전차 공사감리 지적사항 확인결과

감리일자	지 적 사 항	확 인 결 과	비 고
20 . . .	○ - ○ -
20 . . .	○ - ○ -

9. 현장배치 기술자(현장대리인) 근무상황 :

10. 공사감리자 의견(※ 추진공정, 설계변경요인, 기타 공사시공 관련의견 기재)

11. 공사사진 : “별첨”

감리업무 관련법령 및 동 공사 감리 용역 과업지침에 의거 위와 같이 공사 감리를 실시하고 보고서를 작성하여 제출합니다.

20  년      월      일

공 사 감 리 자 : 직                성명              (인)

감리회사 대표 : 직                성명              (인)

국립한글박물관 귀하

공 사 사 진 건 명:
사진설명
사진설명

산업안전보건관리비 사용 내역

▣ 공 사 명 :

▣ 검 토 자 : (감리회사명)        상주 또는 비상주감리원 성명          (인 또는 서명)

산업안전보건관리비 사용 내역
	건설업체명		공 사 명
	소 재 지		대 표 자
	공 사 금 액	원	공 사 기 간		～
	발 주 자		누계공정률		%
	계 상 된 안전관리비	원
	사 용 금 액
	항 목			누계 사용금액
	계
	1. 안전관리자 등 인건비 및 각종 업무수당 등
	2. 안전시설비 등
	3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등
	4. 안전진단비 등
	5. 안전보건교육비 및 행사비 등
	6. 근로자 건강관리비 등
	7. 건설재해예방 기술지도비
	8. 본사사용비
건설업산업안전보건관리비계상및사용기준 제10조제1항의 규정에 의하여 위와 같이 사용 내역서를 작성하였습니다. 년 월 일 작 성 자 : (시공회사명) 직책 성명 (인 또는 서명)

환경보전비 사용 내역

▣ 공 사 명 :

▣ 검 토 자 : (감리회사명)        상주 또는 비상주감리원 성명          (인 또는 서명)

환경보전비 사용 내역서
건설업체명	0000 ㈜	공 사 명
소 재 지		대 표 자
공사금액		공사기간
발 주 자		누계공정율
계상된 환경보전비		사용 환경보전비
계 획 금 액
항 목		계획금액	잔 액	비고
1. 환경시설물 설치자 인건비
2. 환경시설물 설치에 따른 재료비
3. 환경관리 관련 교육훈련비
합 계
건설기술관리법 시행규칙 제28조 2항에 의거 위와 같이 당 현장의 환경보전비 사용계획서를 제출합니다. 20 년 00월 00일 주 소 : 상 호 : 대 표 자 : 김 0 0 (인) 전화번호 :

【별지 제4호 서식】

공사계약번호 - 보고번호

20.   .

OOO OOO 공사 (건축)

최종 감리 보고서

준공 전경사진

주  소 :

상  호 :

대  표 :                 (인 또는 서명)

국립한글박물관 귀하

목     차

1. 감리 완료 보고서
2. 건설공사 및 감리용역 개요
1) 건설공사 개요
2) 감리용역 개요
3) 공사현장 위치도 및 준공사진
3. 공사추진내용 실적
1) 실정보고 처리현황
2) 발주청 지시사항 처리현황
3) 주요인력 및 장비투입 현황
4) 하도급 현황
5) 감리용역 설계변경 현황
6) 감리원 투입현황
4. 검측내용 실적종합
1) 검측관리실적
2) 검측관리 종합분석
5. 품질시험․검사실적 종합
1) 품질관리자
2) 시험장비 사용현황
3) 품질시험․검사성과 총괄표
4) 품질관리 종합분석
6. 주요자재 관리실적 종합
1) 자재공급원 승인현황
2) 주요자재 투입현황
3) 주요자재관리 종합분석
7. 안전관리 실적 종합
1) 안전관리 조직도
2) 안전보건교육 현황
3) 안전점검 현황
4) 산업안전보건관리비 사용실적
8. 우수시공 및 실패시공 사례
1) 우수시공사례 현황
2) 우수시공 사례
3) 실패시공사례 현황
4) 실패시공 사례
9. 종합분석
10. 품질,안전 재해 현황

감 리 완 료 보 고 서

1. 공 사 명 :

2. 공사위치 :

3. 공사계약금액 : 일금

4. 공사도급자 :

5. 계약년월일 :     년   월   일

6. 착공년월일 :     년   월   일

7. 준 공 기 한 :     년   월   일

8. 실지준공년월일 :     년   월   일

9. 붙임서류 : 준공사진, 각종 서류원본.

위 공사의 시공공사 감리 시행에 있어서 공사 전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공(완성) 되었음을 인정하여, 만약 공사 감리 수행에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 실액변상 또는 공사 도급자로 하여금 재시공 지시하는 등 특단의 조치를 취할 것을 서약하고 이에 감리완료 보고서를 제출합니다.

20  년   월   일

감리사  소속                  대표  성명          (인)

국립한글박물관귀하

건설공사 및 감리용역 개요

1. 건설공사 개요

ㅇ 공 사 명 :

ㅇ 위    치 :

ㅇ 사업개요 :

ㅇ 계약일자 :

ㅇ 공사종류 :

ㅇ 공사기간 :

ㅇ 사 업 비

(단위 : 천원)

공사 분야별	도 급 액	관 급 액	계	비고
건축/토목
계

ㅇ 낙 찰 율 :    %

ㅇ 시공회사 :

※ 공동도급일 경우 지분율 표기

ㅇ 입찰방법 :

ㅇ 건설현장 조직(“예”)

														시공사 대표
														(성명)
														현장대리인
														(등급)		(성명)
																													안전관리자
																													(등급)			(성명)
공무팀장									공사팀장										품질관리자											시험보조
(등급)			(성명)						(등급)				(성명)						(등급)			(성명)								(등급)				(성명)

2. 감리용역 개요

ㅇ 계 약 일 자 :

ㅇ 용 역 기 간 :

ㅇ 준 공 금 액 :

ㅇ 감 리 회 사 :

ㅇ 낙   찰   률 :

ㅇ 입 찰 방 법 :

ㅇ 감리단 조직(“예”)

							담 당					총 괄
							(등 급)					(성 명)
상주감리원				감 리 원					감 리 원						감리보조						감리보조
건축분야				토목분야
(등급)	(성 명)			(등급)	(성 명)				(등급)		(성 명)				직위			(성 명)			직위		(성 명)

〔감리원 기술자격 종목]

구 분	성 명	기술자격 종목	배치기간
“예” 감리사(고급)
〃

---------------------------------------------------------

※ 작성요령

1. 감리단 조직은 준공 기준으로 작성합니다.

2. 감리원 등급은 과업지시서 등 계약문서에 기록된 등급을 기재(실제 “수석감리사(특급)”라도 “감리사(고급)”를 배치하는 것으로 계약된 경우는 “감리사(고급)”로 기재)합니다.

3. 공사현장 위치도 및 준공사진

공사추진내용 실적

1. 실정보고 처리현황

번 호	보고일 (문서번호)	승인일 (문서번호)	제목	내용

2. 발주기관 지시사항 처리현황

번 호	접수일	문서번호	지시사항	처리내용

3. 주요인력 및 장비투입 현황

인 원 투 입 현 황			장 비 투 입 현 황
직종	투입인원	비고	장비명	규격	투입대수	비고

4. 하도급 현황

공 종	협 력 업 체 명				하도급 금 액 (천원)	하도급률 (%)	공사기간	현 장 대리인
	상 호	대표자	업 종 및 면허	전화번호

5. 감리용역 설계변경 현황

구 분	계약일자	계약금액	설계변경내용	비 고
당 초

6. 감리원 투입현황

구분	성명	담당업무	기술자격	참여등급	참여기간	비고
상주감리원
기 술 지 원 감 리 원 (비상주)

검측내용 실적종합

1. 검측관리실적

공 종	검 측 결 과(건수)			비 고
	합격	불합격	재검측
계
토목공사
조경공사
건축공사
자재검수

2. 검측관리 종합분석

ㅇ

품질시험․검사실적 종합

1. 품질관리자

성 명	등 급	품질관리업무 수행기간	비 고
			* 기술자격 또는 학·경력 사항 기재

2. 시험장비 사용현황

장비명	규 격	단 위	수 량	비 고

3. 품질시험․검사성과 총괄표

공 종	시험․검사종류 (재 료)	시험․검사회수					비 고
		계 획	실 시	합 격	불합격	재시험

4. 품질관리 종합분석

ㅇ

주요자재 관리실적 종합

1. 자재공급원 승인현황

품 명	규 격	공급원	승인일	비고

2. 주요자재 투입현황

1) 관급자재 투입현황

품 명	규 격	단 위	설계량	반입량	사용량	잔 량

2) 사급자재 투입현황

품 명	규 격	단 위	설계량	반입량	사용량	잔 량

3. 주요자재관리 종합분석

ㅇ

안전관리 실적 종합

1. 안전관리 조직도(“예”)

							안전보건총괄책임자 (안전총괄책임자)
							현장소장
안 전 관 리 자																	협 의 체
○ ○ ○																	(수급인 및 하수급인 사업주 전원)
관리감독자 (안전관리책임자)					관리감독자 (안전관리담당자)							관리감독자 (안전관리담당자)					관리감독자 (안전관리담당자)
(예)토목					○○							○○					○○

2. 안전보건교육 현황

구 분	실시회수	교 육 인 원		비고
		직 원	근로직
계
수시교육
정기교육
특별교육
외부교육

3. 안전점검 현황

구 분	실 적 (회)	비 고
계
자체안전점검
정기안전점검
정밀안전점검
외부안전점검

4 산업안전보건관리비 사용실적

산업안전보건관리비 사용실적 총괄
	건설업체명		공 사 명
	소 재 지		대 표 자
	공 사 금 액	원	공 사 기 간		～
	발 주 자		누계공정률		%
	계 상 된 안전관리비	원
	사 용 금 액
	항 목			누계사용금액
	계
	1. 안전관리자 등 인건비 및 각종 업무수당 등
	2. 안전시설비 등
	3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등
	4. 안전진단비 등
	5. 안전보건교육비 및 행사비 등
	6. 근로자 건강관리비 등
	7. 건설재해예방 기술지도비
	8. 본사사용비
건설업산업안전보건관리비계상 및 사용기준 제10조제1항의 규정에 의하여 위와 같이 사용 내역서를 작성하였습니다. 년 월 일 작 성 자 직책 성명 (서명 또는 인)

※ 월별로 제출된 내용을 취합하고 그 내용을 최종 집계표를 작성하여 제출합니다