제 안 요 청 서

- 2024년 국립민속박물관 어린이박물관 상설전시2

개편 전시연출 용역 -

2024. 3.

구 분	직 책	소 속	성 명	연락처	기 타
사업책임자	학예연구관	어린이박물관과	최명림	02)3704-4504
사업실무자	학예연구사	어린이박물관과	유민지	02)3704-4507

Ⅰ. 사업개요

1. 사업명: 국립민속박물관 어린이박물관 상설전시2 개편 전시연출용역

ㅇ 사 업 명 : 2024년 국립민속박물관 어린이박물관 상설전시2 개편 전시연출 용역

ㅇ 사업기간 : 계약체결일로부터 2024년 10월 29일까지

ㅇ 사업장소 : 어린이박물관 상설전시2 및 로비

ㅇ 사 업 비 : 금494,000,000원(금사억구천사백만원, 부가세 포함)

ㅇ 입찰 및 계약방법 : 제한경쟁/협상에 의한 계약

2. 사업목적 및 방향

○ 오늘날 처한 전 지구적 기후·환경 문제에 대한 어린이 눈높이 교육 필요

○ 어린이들의 환경 감수성 및 환경 소양을 키우기 위한 전시 콘텐츠 제공

3. 사업개요

가. 시설현황 및 사업 연면적

○ 위    치 : 국립민속박물관 어린이박물관 상설전시2 및 로비

○ 전시면적 : 약 444.3㎡

나. 사업범위

○ 전시 기획에 따른 전시 연출 구성 및 설계(4대 보험 및 안전관리비 내역 포함)

○ 새로운 전시 연출을 위한 기존 구조물, 조명, 마감재 철거 및 폐기

○ 전시 연출을 위한 구조물, 조명, 마감재 제작 설치

○ 전시 진열장 제작 설치(벽부형, 독립형/저반사유리 및 안전필름 적용)

○ 전시물 받침대 제작 설치

○ 전시 기획에 따른 캐릭터 및 그래픽 일러스트 제작

○ 전시실 내외부 전시그래픽 제작 설치

○ 어린이 체험용 전시 모형 제작 설치

○ 전시 기획에 따른 체험 영상 제작, 시스템 설계 및 기자재 설치

○ 체험용 미디어 통합 관리 시스템 (HW/SW) 구축(관리 설명서 포함)

○ 체험용 미디어 컴퓨터 관리 편의를 위한 운용 공간 설치

○ 전시실 공간 마감재 연출 개선(바닥, 벽체, 천장 등)

○ 전기, 조명 등 관련 설비 설치(센서, CCTV, 소방등, 온습도계 등 이설 포함)

○ 체험물, 소모품, 등을 보관하기 위한 준비실 설치

○ 기타 사업에 수반되는 행정 소요 및 우리관 요구사항

다. 사업기간 : 계약체결일로부터 2024년 10월 29일(화)까지

※ 개막일 : 2024년 10월 29일(화) 예정

① 발주 및 계약 : 2024. 3. ~ 4.

② 기획 및 설계 : 2024. 5. ~ 2024. 8.

③ 기존 구조물 철거 : 2024. 8. 19. ~ 8. 30.

④ 전시물 제작 설치 및 유물 설치 : 2024. 8. ~ 2024. 10. 25

⑤ 테스트 및 보완(시범운영) : 2024. 10. 25. ~ 10. 28.

⑥ 전시 조성 완료 : 2024년 10월 25일(금)

※ 유물 디스플레이 기간 전까지 유물반입 할 수 있는 전시환경이 마련되어야 함

(준공청소 포함 거의 모든 공정 완료)

⑦ 지침서 작성(준공서류 및 납품서류) : ~ 2024. 11. 5.(화)

⑧ 전시개관 및 유지관리 : 2024. 10. 29.~

※ 하자 보수 보증기간은 검수일로부터 1년까지로 함

라. 사 업 비

○ 사업예산 : 494,000,000원(금사억구천사백만원, 부가세 포함)

○ 창작, 설계, 전시물 제작ㆍ설치, 제세공과금 등 기타부대비용 일체 포함

마. 당선작 대우 : 설계 및 제작ㆍ설치권 부여

4. 입찰 및 낙찰자 결정방법

○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조(협상에 의한 계약)에 의함

5. 입찰자격 : 입찰공고에 따름

① 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 입찰서 제출 마감일 전일까지 다음 분야의 입찰참가자격을 모두 등록한 자.

㉮ 기타자유업(행사대행업, 업종코드 : 9901)

㉯ 실내건축공사업(업종코드 : 4990)

② ①의㉮ 기타자유업(행사대행업)인 경우 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 의거 직접생산확인증명서[세부품명: 전시회 기획 및 대행서비스(세부품명번호 10자리: 8014198801)]를 소지한 자.

③ ①의㉯ 실내건축공사업인 경우 「중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 의한 직접생산확인증명서[세부품명: 전시홍보관 설치 및 디자인서비스(세부품명번호 10자리 : 7215409902)]를 소지한 자.

④ 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중.소기업.소상공인 확인서를 소지한 자

※ 중소기업확인서는 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함

⑤ 단독 또는 공동계약(공동이행방식 또는 분담이행방식)이 가능함.

6. 제안일정

1	조달청 계약요청 의뢰	2024. 3.
2	입찰공고 게시	입찰공고서 참조
3	제안서 및 입찰서 제출 ※ 현장설명회 없음	입찰공고서 참조

7. 질의응답

1) 질의서 접수: 입찰공고 게시 익일부터 3일간(접수 마감 18:00)

2) 질의서 회신: 질의서 접수 마감일로부터 5일 이내

3) 질의처 : 국립민속박물관 어린이박물관과(whitemj821@korea.kr)

4) 질의방법

① 모든 질의는 서면질의서 <서식 17>으로 작성하여 전자우편으로 제출하여야 하며, 질의서에는 질의자의 회사명, 성명을 기재한다.

② 질의 후 전화로 접수 여부를 확인한다.

8. 제출서류

가. 제출요령

1) 제안서는 e-발주시스템을 통해 제출하여야 하며, 제안서를 임시저장 한 이후 반드시 시스템에 저장된 제안서를 다운로드하여 파일 이상여부 확인 후 최종 제출하여 주시기 바랍니다.

2) 모든 서류에는 규정에 의한 것 이외의 표시를 금한다. 동 사항을 위반하여 심사위원회에서 불공정행위로 의결될 경우 실격처리 될 수 있다.

나. 제출서류 : 입찰공고서 반드시 참조

① 정성제안서 1식: 기술제안서(A3 10매/내용: 설계설명서, 설계도, 예정공정표)

② 정량제안서 1식: 사업수행능력 평가서 등(A4/내용 : 서식1-서식16에 해당하는 응모서류)

※ 제안서 등 제출서류는 나라장터를 통해 온라인으로 제출하여야 하며, 제안서류 일체는

PDF 파일 형식으로 제출, 총 용량은 300MB를 초과할 수 없습니다.

구 분		제출서류	관련 서식	비고
기술제안서		① 기술제안서 표지 작성양식	<서식 1>
		② 발표자료(PDF)
사업 수행 능력 평가서	사업 수행 능력	① 사업수행능력평가서 표지	<서식 2>	해당 기관의 전산용 증명원도 가능하나 본 서식의 내용을 포함해야 함
		② 제안사의 일반현황	<서식 3>
		③ 사업수행 실적 증명서	<서식 4>
		④ 사업수행 실적 집계표	<서식 5>
		⑤ 기술인력 보유현황	<서식 6>
		⑥ 투입인력 계획	<서식 7>
		⑦ 신용평가 등급 확인서	<서식 8>
		⑧ 행정처분내용 확인서	<서식 9>
		⑨ 사업수행능력 자가평가표	<서식 10>
	입찰 참가 자격	① 사업자등록증 및 법인등기부등본		해당하는 서류만 제출, 해당 시 제출
		② 경쟁입찰참가자격등록증
		③ 직접생산확인증명서
		④ 서약서	<서식 11>
		⑤ 보안서약서	<서식 12>
		⑥ 청렴계약이행서약서	<서식 13>
		⑦ 개인정보 수집ㆍ이용ㆍ제공 동의서	<서식 14>
	공동 수급	① 제안응모 대표자 선임계	<서식 15>
		② 공동수급표준협정서	<서식 16>
	기타	① 서면질의서	<서식 17>

Ⅱ. 과업내용

1. 개편방향

가. 어린이박물관 전시 개편(안)

ㅇ (전시내용 및 방향)

“밤하늘의 빛나는 별을 보고 싶어요!”

- 과도한 빛(인공조명)으로 인한 어둠의 부족이 생태계의 균형을 깨트리고 있음. 이러한 빛 공해*가 일으키는 문제를 다양한 지구 생명체(동물, 식물, 인간 등) 관점에서 공감하고 이해하는 계기 마련(생명 다양성)

- 지금은 보기 힘든 도시 밤하늘의 ‘빛나는 별’을 미래세대 어린이들에게 보여주기 위해 불을 끄고 ‘깜깜한 밤’을 되찾자는 메시지를 담음

※ 빛 공해: 지나친 인공조명으로 밤에도 낮처럼 밝은 상태가 유지되는 현상. 눈부신 빛이 일상생활은 물론이고 생태계 전반에 영향을 미침에 따라 세계적인 환경 이슈로 떠오름

ㅇ (타겟대상) 6~10세(유치원생~초등학교 저학년생)

ㅇ (공간구성) 다락방과 같은 공간의 물리적 특성을 활용한 전시 공간 구현

ㅇ (캐릭터) 전시실 전체 흐름을 이끌어 가는 핵심 캐릭터 개발 필요

ㅇ (디자인) 다양한 감각 활용으로 전시를 경험할 수 있는 체험 방식과 공간 연출, 그래픽 패널 디자인(유니버설디자인 적용)

ㅇ (마감재) 나무 등 친환경 천연소재 및 재활용 소재 활용, 플라스틱 최소화 등 안전성 고려한 재료 사용

부 및 대주제	소주제	전시 내용
프롤로그 *슬로프와 입구	밤이 찾아와요! “별을 보고 싶어요!!”	- 해가 지고 밤(어둠)이 찾아오는 시간 - “별을 마지막으로 본 것이 언제인가요?”
1부 신비로운 밤	밤은 신비로와요!	- 낮과 밤은 왜 있을까?: 낮과 밤(빛과 어둠) - 해, 달, 별: 일출, 일몰, 달의 주기, 별자리(절기), 은하수
	어두워야 볼 수 있어요!	- 밤(어둠)의 중요성 - 길 찾기(관측): 북극성, 별로 방위와 길 찾기
2부 깜깜했던 밤 (과거)	밤의 어둠을 즐겨요! (밤에 사람들은)	- 밤의 어둠을 즐겼던 사람들 - 일상 속 어둠을 밝힌 빛: 등기구 관련 자료 - 야행夜行(실외): 제등, 조족등, <눈 오는 밤> 등 - 으스름한 밤: 달빛 아래 즐겼던 놀이
	밤에도 우리는 바빠요! (밤에 동·식물들은)	- 밤이 되면 바쁜 동·식물들 - 밤이 되면 활동하는 동·식물 소개
3부 눈부신 밤 (현재)	밤이 사라졌어요! “별이 보이지 않아요!!”	- 밤은 언제 잠이 들지?: 24시간 사회, 잠들지 않는 도시 - 밝고 희뿌연 밤하늘: 빛 공해, 눈부신 빛(인공조명)
	잠을 잘 수 없어요! (밤에 사람들은)	- 잠 못 드는 사람들: 수면 장애, 불면증, 피로, 스트레스, 우울증에 시달리는 사람들, 어린이 성장 저하 등
	감각을 잃었어요! (밤에 동·식물들은)	- 방향 감각을 읽은 동물들(사냥, 번식, 이동 등) - 계절 감각을 잃은 식물들
4부 빛나는 밤 (미래)	불을 꺼요!	- 깜깜한 밤을 되찾기 위한 우리의 실천들 – 불을 끄자!
	“별이 반짝거려요!!”	-“별 보러 가자!”(다락방 테라스 연출)
	잘자요	- 모두가 잠드는 시간: 잠자리 들기

ㅇ (전시구성안)                                        ※ 세부구성안은 별첨1 참조

ㅇ (공간 연출 방향)

- 낮은 천정과 좁은 면적을 보완할 수 있는 새로운 공간 연출 제안(노출천정 및 조명 개선 등)

- 입구 슬로프 및 도입 공간이 메인 공간과 자연스럽게 유기적으로 연결되는 연출 제안

- 안전한 체험 및 교육 몰입도 제고

ㅇ (체험전시물 연출 방향)

- 유아(미취학) 및 어린이(초등저학년)가 두루 함께 즐길 수 있도록 난이도를 고려한 다양한 체험물 개발

- 아날로그와 디지털 체험방식의 장단점을 접목한 체험방식 개발

- 디지털 영상 콘텐츠 및 인터랙티브가 가능한 최첨단 기기 활용

- 체험 공간 구성 및 연출을 위한 전문 일러스트레이터 스텝 구성

※ 색채/그래픽/공간/일러스트 전문 작가 등은 박물관과 협의 후 선정

나. 어린이박물관 로비 개편(안)

ㅇ (대기공간)

- 전시실과 연결되는 입구 로비의 쾌적한 환경 및 관람객 편의를 위한 환경 조성

- 편안한 전시 관람을 위한 사전 준비 공간으로서 부족한 기능을 개선할 수 있도록 방안 검토(휴게의자 및 물품보관함 등 개선)

- 로비 인테리어 개선을 위한 전문가 스텝 구성

※ 박물관과 협의 후 선정

ㅇ (영상콘텐츠)

- 전시 소개, 관람 예절 안내 등 다양한 정보를 모션그래픽을 활용한 영상물로 제공하여 흥미 유발과 관심 유도

※ 프로젝션 맵핑 또는 사이니지용 모니터 등 적절한 영상기기 필요

ㅇ (관람안내 및 사이니지 보강)

- 어린이박물관 전시 및 교육 안내(홍보) 서비스 강화할 수 있는 DID 필요

- 안내 사이니지 및 DID 내에 적용할 수 있는 일관된 시각아이덴티티 필요

※ 어린이박물관 캐릭터를 활용하면서 다양한 어플리케이션에 활용할 수 있도록 변형 필요

ㅇ (파사드) 어린이박물관 외부 유리벽 그래픽 개선 등

다. 어린이박물관 공간 범위

위치	공간면적(㎡)	도면
국립민속박물관 어린이박물관	상설전시2, (344.6㎡) 로비 (99.7㎡) *경사로 및 전시실 입구 공간 포함

※ 본 이미지는 예상도이며, 추후 검토 및 협의에 따라 바뀔 수 있음

Ⅲ. 제안지침

1. 기본지침

가. 기본방향

1) 「국립민속박물관 어린이박물관 상설전시2 개편」의 전시 구성안을 토대로 어린이 눈높이에 맞춘 입체적인 전시·체험 공간 구현과 아날로그와 디지털을 활용한 복합 전시연출 방법(그래픽, 모형, 조명, 영상, 체험, 소리, 인터렉티브, 인테리어 등)을 적용하여 유사 기관과 차별화된 아이디어 및 구현 방법을 제안하여야 한다.

2) 생태, 환경, 빛, 공간, 색채 등 전시 관련 각 분야 전문가의 협업, 자문을 통한 내용을 반영한 공간 연출이 이루어져야 한다.

3) 대상(48개월~초등3학년)에 맞게 전시디자인 및 체험물의 연출과 공간 구성을 한다.

4) 어린이의 안전을 최우선으로 하며, 체험물의 내구성 및 완성도를 높이면서 향후 유지관리에 용이하도록 한다.(※ 어린이놀이시설안전관리법 등 어린이시설 안전기준 준수)

5) 전시 자재는 포름알데히드가 거의 검출되지 않는 최상급 및 친환경자재(친환경페인트, 친환경 석고보드, 패널, 합판 등)를 사용하고 절연, 단연 제품을 반드시 우선 사용하고 불가피할 시 시공 후 적법한 절차와 규정에 따라 보완한다.

6) 친환경적 전시공간과 친환경 천연소재 및 재활용 소재 활용, 플라스틱 최소화 등 저탄소 실천을 위한 방안을 고려한다.

7) 모든 전시물은 외부 제작하여 내부조립을 원칙으로 한다. 현장작업은 최소화하고, 현장에서는 설치ㆍ조립 위주 작업을 실시한다.

나. 일반지침

1) 본 사업의 목적과 제안요구사항을 충분히 숙지하고 현장을 답사하여 조사한 후, 현장여건을 고려하여 계획.

2) 체험물 및 구조물은 관련규정 및 제반규정에 적법하게 제작․설치될 수 있도록 계획

3) 전시물은 예술성, 창작성, 통일성, 기능성을 충족하고 쾌적한 관람환경이 되도록 계획.

4) 어린이 문화 체험시설로서 어린이 및 가족 관람객의 편익과 안전성을 도모하는 계획.

5) 어린이, 청소년 단체관람객의 전시실 관람 시 안정성과 교육성이 고려된 계획 수립.

6) 전시물은 예술성, 창작성, 통일성, 기능성을 충족하고 쾌적한 관람환경이 될 수 있도록 계획 수립.

7) 기존 각종 설비(전기, 통신, 방범, 공조 등)의 목적과 기능이 유지되도록 계획.

2. 세부지침

가. 전시공간

1) 공간구성

○ 공간구성은 전시 기획(안)을 참고하고 작품 설치에 필요한 그래픽, 디스플레이 방법, 보조물 등 모든 제반 사항을 고려한다.

○ 전시장의 관람동선은 원활하고 상호 유기적인 체계가 이루어져야 하며, 전시실 내부 관람객 휴게공간을 고려하여 계획되어야 한다.(전기배선 고려)

○ 전시성격에 맞추어 전시그래픽, 전시보조물을 계획하며, 상징조형물(모형) 등을 통해 전시실 내 분위기 조성을 고려한다.

2) 그래픽, 색채구성

○ 전시 연출에 따라 캐릭터 개발이 필요할 수도 있으며 이미지, 서체 사용 저작권 등 문제가 일어나지 않도록 한다.

○ 친환경 자재를 사용하며, 전반적인 색채구성이 상호 연계성과 차별성이 강조되면서도 전체적 조화를 이루어야 한다.

3) 전시조명설비

○ 전시물의 전체조명 및 집중 조명에 적합한 조명배치와 조명기구를 계획 설치한다.

○ 신규조명 설치 시에는 유물의 종류, 박물관 기존 설비 및 전시기법 등을 고려하여

적정한 시스템을 선택(구입 혹은 대여)하여야 하며, 연색성과 색온도 등을 계획 시

반영한다. (framer 혹은 고보 타입 등 포함)

나. 전시시설물

1) 일반사항

○ 전시실 천장, 벽, 바닥, 파티션, 진열장 설치대, 등의 마감 재료 및 디자인은, 주위시설 및 조명과의 조화, 유물의 안정적 거치 및 보존, 유지 관리의 용이성, 변질 방지 등이 최대한 보장되도록 설계되어야 하며, 수시로 채색과 보수 등 현상 변동을 필요로 하는 설계는 지양한다.

○ 유물 보존 및 관람환경을 고려하여 전시자재는 친환경자재를 사용한다.

○ 최종 마감자재는 선처리 혹은 후처리 방염되어야 하고 그에 따른 시험성적서 등의 증빙 자료 첨부 필수

※ 작품의 안전을 고려해 벽체 및 진열장 구조, 재질이 고려되어야 함

※ 노출전시 필요시 발주처와 협의가 필요하고, 건축환경을 고려하여 공간연출 되어야 함(소형작품은 모두 진열장 전시 필수)

※ 노출시 인제책(작품과의 거리 1,000mm)을 고려 및 보안에 대해서도 제안

※ 대여 소장처의 환경 기준을 적용해 벽체구조 및 재질이 제작되어야 함

○ 전시물의 제작·설치 차후 부품교체, 보수, 철거 등 유지관리에 용이하도록 고려하여 제안한다.

2) 진열장

○ 신규 진열장 계획 시 전시효과와 전시물 보호 기능(보안, 안전, 밀폐성, 관리의 편리성, 개폐 가능)을 충족시킬 수 있는 진열장을 설계하되 시공성, 경제성을 고려하고 전시공간과 조화되도록 제작한다.

○ 전시실 파티션 진열장 등에 설치되는 유리는 파손시 비산되지 않도록 접합유리를 사용하거나, 비산방지필름(안전필름)을 부착한다.

3) 전시보조자료(전시대, 받침대, 패널 등) 설치

○ 전시연출에 필요한 받침대, 전시대, 기타 전시사인물 등은 유물의 특성이 최대한  나타나도록 디자인되어야 하며 전시 성격을 고려하여 연출한다.

○ 유물 받침대와 패널, 설명카드, 배너 등은 유물의 안정적이고 무해한 거치․보존 및 시각 효과와 유지관리의 용이성, 내구성 등을 보장하도록 재질 및 형태, 색채 등이 설계되어야 한다.

4) 모형전시물

○ 전시의 이해를 돕기 위해 모형연출을 사실감 있게 설치 제안한다.

○ 전시물의 실사를 재현․축소 및 확대한 특수 제작물은 내용의 표시, 배치 방법,    설치장소, 크기, 재료, 이미지스케치, 연출방법 등을 제안서에 명시한다.

5) 연출영상물 제작·설치

○ 연출영상물은 전시를 보완하는 내용으로, 최신 기법을 통한 안정적이고 효과적인 설비와 구성이 되도록 계획되어야 한다.

○ 영상물 설치 : 영상케이블, 전기설비, 거치대 등 일체(일부 h/w, s/w 박물관 제공)

다. 제안 유의사항

1) 제안에 반영될 재료 및 특수재료에 대하여는 정부 또는 공인기관에서 인정한 일정기준 이상의 우수재료를 선택하여야 한다.

2) 제안자는 제출한 제안도서에 대하여 모든 책임을 지며 시공도중 제안도서의 미비점이 발견될 시는 수정하여 작업을 해야 하고, 이에 따른 추가비용은 별도로 계상치 않는다.

3) 도면에 표기된 단위는 관련 규정에 의하여 표시하고, 적합한 축적을 반드시 기재한다.

4) 추후에 계약으로 확정된 공사금액에 대한 내역 작성 시, 인건비는 시중노임단가를, 자재 및 재료비는 조달청 발행 가격정보 최근호에 의하되 수록되지 않은 단가는 2개 이상의 물가 정보지(물가정보, 유통물가, 건설자재 등)에 수록된 금액 중 최저가를 적용한다. 그 외의 미수록 단가는 2개사 이상의 견적을 받아, 최저가를 적용한다.(공인된 원가계산기관의 원가계산도 가능함)

5) 본 지침서 이외의 수록되지 아니한 사항은 타 일반 공모의 관례에 의하고, 구성과 관련한 기초 자료는 응모자가 조사 및 검토하여야 한다.

라. 제안 참고자료

1) <별첨1> 전시계획안

2) <별첨2> 전시실 도면

3. 제안서 작성 요령

가. 제안서의 작성지침

1) 제안서에는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항에 대한 해결방안이 제시되어야 한다.

2) 제출된 제안서의 내용은 조달청에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결시의 계약조건의 일부로 간주한다.

3) 발주처는 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

나. 제안서 작성요령

1) 제안서는 한글 및 아라비아숫자 표기, 미터법으로 작성 권장

2) 설계도, 설계설명서, 관리운영계획서, 예정공정표를 합본 제본 권장

3) 제안가격에 대한 세부산출내역서는 우선협상대상자만 기술협상시 수요기관에 제출

4) 설계도 등은 가로방향 작성 권장

다. 제안서 세부내용 (* 붙임1 기술제안서 작성 지침 참조)

작성항목	작 성 내 용	비 고
기술 제안서	1. 전시 컨셉 : 설계 지침에 따른 설계 의도와 종합 연출계획(동선, 전시 구조물, 그래픽 등) 및 시공방법(기법, 자재 포함)을 기술 2. 전시 평면 : 실내조감도, 평면도, 입면도, 상세도(전시품 받침대 등) 3. 전시연출 상세(전시품 연출, 마감재, 색채, 조명 계획, 친환경 계획, 영상‧진열장‧사인 제작 계획 등) 4. 설계에 따른 공정 및 운영관리 ※ 위 내용이 포함되도록 15매 이내로 구성	총 15매 이내 (A3 가로)

4. 유의사항

가. 제안서 제출사항은 입찰공고문 참조(나라장터)

나. 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 한다.

다. 입찰자는 제출된 제안서류에 대한 사실여부 등의 책임을 진다.

라. 제안서의 내용을 객관적으로 입증 또는 설명하기 위해 꼭 필요한 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 한다.

마. 제안서의 모든 내용은 지적 재산권 관련 사항을 주의해서 작성하여야 하며, 지적재산권 관련 문제 발생 시에는 입찰자가 책임을 진다.

바. 제안서 내용은 명확한 용어를 사용하며, ‘~를 제공할 수도 있다’, ‘~이 가능하다’, ‘~를 고려하고 있다’ 등과 같이 불명확한 표현은 사용할 수 없다.

사. 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 이의 경우 입찰참가자는 이에 응해야 한다.

아. 본 사업과 관련 이의 및 이견이 있을 경우 입찰자는 발주처의 해석에 따라야 한다.

자. 본 사업은 발주처의 내부 사정에 따라 변동될 수 있으며, 이 경우에 협의하여 진행한다

차. 제안결과에 따른 산출물의 소유권은 국립민속박물관에 있다.

5. 착수 및 완료(결과보고)

가. 전시설계 및 제작은 계약일로부터 5일 이내에 착수해야 한다.

나. 설계보완은 박물관의 최종 승인을 받아야 한다.

다. 박물관의 지시에 따라 검토를 마친 뒤 제작·인쇄하고 세부지침서에 따른 결과물을 제출해야 한다.

라. 결과물은 계약 만료일까지 박물관에 제출하여 소정의 검수절차를 거쳐야 한다.

마. 박물관이 결과물에 대해 수정․보완해야 할 사항을 요구할 경우 완료 후라도 제작자 부담으로 성실히 수정․보완하여 제출해야 한다.

바. 준공도서 상세내용

1) 도면 및 성과품 도서 2부 및 원본 파일(A4, 설계도면은 A3)

※ 도면(평면도, 최종 설계도면, 전기배선도 등), 내역서, 설계설명서, 시방서,

공정표, 단가산출서, 수량산출서, 각종 계산서 등 발주기관이 요구하는 사항

2) 각종 계산서 및 내역서 2부 및 원본 파일

※ 보험료 및 산업안전보건관리비 사후정산 내역 반드시 포함

3) 설명패널, 그래픽 원본 파일

4) 기타 본 사업과 관련한 내용(조명, 색채, 영상물 등) 및 사업 수행 중 산출된

자료 일체 등 발주기관이 요구하는 사항

※ 디지털 저장매체에 위 결과물을 모두 수록하여 제출함

Ⅳ. 제안서 평가 및 협상

1. 제안서의 평가

가. 평가위원회 구성

1) 제안서의 공정한 기술능력평가를 위해 박물관 내·외부의 전문가로 평가위원회를 구성한다.

2) 평가위원회 위원은 국립민속박물관에서 7인 이상 관련분야 전문가로 선정한다.

3) 평가위원회는 제출된 제안서를 심사하여 종합평가순위를 결정한다.

4) 평가위원의 명단은 공정한 심사를 위해 사전 공개하지 아니한다.

나. 평가방법

1) 평가는 총점 100점 만점을 기준으로 하되 기술능력평가 90점*(기술제안서 80점, 사업수행능력평가서 10점), 입찰가격평가 10점으로 배점하여 평가하고, 종합평가 순위에 따라 우선협상대상자를 정한다. 다만, 기술능력평가점수가 기술능력평가 배점한도의 85% 미만인 자는 협상대상에서 제외한다.

* ‘2024년 어린이박물관 상설전시2 개편 전시연출용역’은 어린이 눈높이 전시에 탁월한 기술성 및 전문성을 가진 업체를 선정하기 위한 기술능력평가가 중요함

2) 기술능력평가와 입찰가격평가점수 결과 고득점자 순으로 협상대상자를 선정한다.

3) 업체별 평가총점을 기준으로 최고점수와 최저점수를 제외한 점수를 합산하여 평균점수를 산출하되, 최고 또는 최저점수가 둘 이상인 경우 하나만 제외한다.

4) 합산점수가 동일한 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 우선으로 하고, 기술능력평가점수도 동일한 경우에는 기술제안서 평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 한다.

5) 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림한다.

6) 사업수행능력 평가는 객관적 지표에 의한 평가로서 정해진 기준에 따라 제출된 자료에 대해 평가점수를 산정(공동수급시 지분율로 평가)

다. 평가결과 발표

1) 평가위원회는 심사내용을 기록한 보고서를 작성하여 평가위원 모두가 서명하고, 발주처에서는 그 결과를 조달청에 제출하여야 한다.(사업 차후 공정성 확보를 위하여 평가위원 실명은 비공개로 처리한다.)

2) 발주처는 제안서 평가 종류 후 평가 결과를 개별업체 통보(평가위원별 항목별 평가점수) 후 전자조달 시스템 또는 수요기관 정보처리장치 등을 통해 공개하며, 평가 결과 공개 시 평가위원명은 비공개로 한다. 단, 제안서 평가 결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가 결과 일체를 공개하지 않는다. 이 경우 전자조달시스템 또는 발주처의 정보처리 장치에 제안서 평가 결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재한다.

라. 기    타

1) 제안서 심사결과 및 세부내용에 대한 질의에는 응답하지 않으며, 응모자는 평가위원 구성, 평가기준, 평가방법, 평가결과에 대해 이의를 제기할 수 없다.

2) 당선작품 발표 후 5일 내에 반출치 아니한 제안도서는 주최자가 임의 파기한다.

2. 평가항목 및 평가기준

가. 제안서의 평가

○ 기술능력평가 90점(기술제안서 평가 80점, 사업수행능력평가 10점), 입찰가격평가 10점으로 배점하여, 총점 100점 만점을 기준으로 평가한다. 평가 순위에 따라 최우수작으로 선정된 업체를 우선협상대상자로 한다.

나. 기술능력평가(안) : 90점(기술제안서 평가 80점+사업수행능력평가 10점)

【정성평가(기술제안서 평가): 80점】

구 분		평 가 항 목		배점
기술제안서 평가	전시콘텐츠 기획 및 제작 계획	전시목적과 전시연출 계획과의 부합성	5	10
		전시콘텐츠 기획의 창의성	5
	전시연출 및 공간구성 계획	전시연출 및 공간조성 계획의 독창성과 적정성	10	30
		어린이 체험 및 놀이 요소의 적정성과 창의성	10
		전시물과 주변환경 시설물의 연계 및 조화	10
	세부연출 계획	전시물 디자인의 독창성(각종 그래픽 및 체험물 등)	10	30
		공간 및 전시물의 마감재, 색채 구성의 적정성	10
		연출 매체와 미디어 활용의 창의성, 구현가능성	10
	관리 및 운영계획	사업수행 공정 및 수행방법의 타당성	5	10
		사후관리 및 운영의 용이성 및 경제성	5
합 계				80

【정량평가(사업수행능력평가): 10점】 ※ 객관적 평가

구 분		평 가 항 목		배점
사업수행 능력평가	제안사 현황	사업 수행 실적 (유사용역 및 시공 실적)*	4	10
		참여인력의 전문성 및 적절성 (전문인력 보유 현황)**	3
		재무구조 및 경영의 안정성(신용평가등급)***	3
합 계				10

◦ 사업수행실적(4점)*

평가 항목	평가요소	배점	평가방법		비 고
			기준	평점
사업 수행 실적	공고일 기준 최근 3년간 당해 용역과 유사한 용역 실적 인정 범위 및 인정 규모에 해당하는 누계 실적	4	A. 100% 이상 B. 100% 미만~70% 이상 C. 70% 미만~40% 이상 D. 40% 미만	4.0 3.6 3.2 2.8	◦ 실적인정범위: - 공공 및 민간 실적(박물관, 미술관, 과학관, 기념관, 전시관 등)의 전시연출 유사용역 및 시공실적 ※ 실적은 준공 또는 납품 완료된 것만 인정

※ 조달청 지침 “조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준” 제1장 제9조 제3항 제2호 「수행실적 평가기준」에 의한 평가

※ 참여인력의 실제 사업수행 능력을 평가하기 위한 지표로 활용하기 위해 사업수행실적을 평가 배점에 반영.

◦ 전문인력 보유 현황(3점)**

평가항목	평가요소	배점	평가방법
참여 기술자	등급 및 인원	3	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
			0.5	0.4	0.3	0.2
			○ 평점 = 인원 × 기술자별 점수 ※ 평점의 합이 최종점수(최고 3점 / 최저 2.1점)

※ 기술자에 대한 등급은 엔지니어링산업진흥법 시행령 <별표 2>의 엔지니어링기술자* 의함

※ 공고일 기준 2개월 이상 해당업체에 근무하고 있는 기술자만 해당 [재직증명서, 공인기관 인증 자격증(해당자), 최종학교 졸업증명서, 국민연금관리공단 확인서 첨부]

◦ 경영상태(3점)***

회사채	기업어음	기업신용	점수
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	3.0
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	2.85
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	2.7
CCC+이하(미제출자 포함)	C 이하(미제출자 포함)	CCC+이하(미제출자 포함)	2.1

※ 조달청 지침 “조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준” 제1장 제9조 제3항 제1호 「경영상태 평가기준」의 「기업신용평가등급」(회사채에 대한 신용평가등급에 준함)에 의한 평가

※ 기업신용평가등급 : 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 발행하는「신용평가 등급 확인서」 다만, 「조달청 신용평가등급 조회 시스템」 또는 「중소기업제품 공공구매정보망」에 의하여 신용평가등급 조회가 가능한 경우에는 동 시스템 조회결과에 의해 평가할 수 있다.

※ 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

다. 입찰가격 평가(10점)

○ 입찰가격 평가 평점산식은 기획재정부 계약예규, 「협상에 의한 계약 체결 기준」 별표에 따름

3. 기   타

가. 유의사항

1) 상기 기술한 내용 외에 평가관련 사항은 공개하지 아니한다.

2) 실적증명은 첨부양식을 원칙으로 하되, 기 발행 받은 것은 1년 이내 시 유효하다.(입찰공고일 기준)

3) 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출해야 한다.

4) 계약 후 발주기관과 협의하여 수정, 보완 또는 추가 조정하며 필요한 경우 발주처의 의견을 반영하여야 함

5) 기타 명시되지 않은 사항은 ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 등 관련 규정을 준용해야 한다.

6) 전시계획의 설계내역 중 과잉설계, 부실설계, 중복설계 등의 부분에 대해서는 발주기관의 요구에 따라야 한다.

나. 저작권 및 사용권

1) 제안사가 제안하는 내용 및 디자인에 대한 소유권(지식재산권, 기타 법적 소유권 등)은 발주기관과 제안사가 공동으로 소유하는 것을 원칙으로 한다.

2) 사업추진과정에서 산출되는 모든 자료 및 납품내역에 재산권 침해 등으로 분쟁이 발생하는 경우 제안사가 모든 법적 책임을 진다.

3) 발주기관은 사업추진과정에서 수정·보완 및 변경에 대한 일체의 권한을 가진다.

<서식 1> 기술제안서 작성 양식(표지)

																						80
		2024년 국립민속박물관 어린이박물관 상설전시2 개편 전시연출 용역																								30p, 장평 90%
		제 안 서																								72p, 장평 100%
										2024년 월 일										16
										110
							인식명칭					-											16
							32					16		16		16		16			16
							60

주) 1. 표지크기 : A3

2. 단위는 ㎜

3. 문자는 굴림체, 흑색사용

4. 글자크기 : 제목 30, 72호, 날짜. 22호, 식별번호 22호

<제목 : 국립민속박물관 어린이박물관 상설전시2 개편 전시연출용역 제안서>

5. 좌우간격은 중앙 정렬함

<서식 2> 사업수행능력평가서 작성 양식(표지)

「2024년 국립민속박물관 어린이박물관

상설전시2 개편 전시연출용역」

사업수행능력 평가서

2024.    .     .

업 체 명 :  (대표사)

대 표 자 :

주    소 :

전화번호 :            (FAX :              )

작 성 자 :            (연락처 : 휴대폰 / 이메일 기재)

<서식 3>

제안사의 일반현황

1. 기본사항

업 체 명		대표자
주 소		관할세무서
전화번호		팩스번호
사업자번호		업 종
면허/허가/ 등록증보유현황
총종업원수		매출액 (최근년도)
부채비율(%) (타인자본/자기자본X100)
유동비율(%) (유동자산/유동부채X100)
자 본 금

2. 회사연혁

연월일	내 용	비 고

주) 1. 자격보유회사는 면허증, 허가증, 등록증 사본 첨부

2. 제작공장 보유시에는 공장등록증 사본 첨부

3. 특허보유현황은 관련 특허 개수를 면허증, 허가증, 등록증 보유현황에 표시하고 특허증 사본 첨부

<서식 4>

실적증명서

신 청 인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처		국립민속박물관
	증명서용도		국립민속박물관 어린이박물관 상설전시2 개편 전시연출용역 실적증명용
	사 업 규 모
사업수행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦				100%
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적		비 고
					비율(%)	실적(원)
			～
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2024년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급부서 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함.

<서식 5>

사업수행 실적 집계표

구 분	공 사 명		공 사 기 간	준공금액	발 주 처	실적확인이 가능한 발주 기관의 전화	비 고
①최대실적 (1건)
	소 계
②기타 실적
	소 계
합 계 (①+②)

주)  공고일 기준 최근 3년간 공공 및 민간실적(박물관, 미술관, 과학관, 기념관, 전시관 등)의 전시연출 유사용역 및 시공실적(실적은 준공 또는 납품 완료된 것만 인정)

<서식 6>

기술인력 보유현황

구분	일련 번호	등 급	기 술 분 야	자 격 종 목	성 명	등록일 (취득일)	경 력 기 간	등록번호	비 고
실내건축 기 술 자
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○○
기타

주) 1. 기술자의 구분은 엔지니어링산업진흥법 제31조 규정에 의한 엔지니어링사업 대가의 기준에 따르며 <별첨5>참조, 공고일 기준 2개월 이상 입사한 자로 본 사업에 참여할 기술자만 명기

2. 분야별 기술자 기재순서는 평가 시 참고할 수 있도록 순위별로 기재

3. 자격증, 최종학력증명서, 경력증명서 및 4대 보험 확인서 첨부

<서식 7>

투입인력 계획

1. 사업수행 조직표

				사업총괄 책임자
oo 분야			oo 분야				oo 분야			oo 분야
책임자 :			책임자 :				책임자 :			책임자 :

2. 투입인력 총괄 현황

구 분	성 명	직위	담당업무	투입기간 (M/M)	최종학력 (학교명)	해당분야 자격증	해당분야 업무경력	비 고
상주								책임자
비상주

주) 1. 투입인력은 반드시 본 사업에 투입가능한 인력으로 구성하여야 하며, 개인별 보유자격 및 경력사항의 허위작성이 판명될 경우, 평가 후 일지라도 계약업체 선정을 무효화 할 수 있음

2. 투입인력은 책임자 1명을 포함하여 작성요망

<서식 8>

신용평가 등급 확인서

발행번호 :

업 체 명		기업 신용 등급
대 표 자
법인등기부등본 (생년월일)
사업자 등록번호
주 소
재무결산기준
등급 평가일
등급 유효기간

귀 사의 의뢰에 따라 작성한 기업신용등급인증용 기업신용등급을 아래와 같이

통보합니다.

교부일  2024 .   .   .

신용평가기관 :                           인

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함.

<서식 9>

행정처분내용 확인서

※ 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기

구 분		처분 사유 (관련법령)	처분 일시	처분기간	비 고
영업정지 또는 입찰참가제한

※ 최근 3년간 회사(수급자)가 관계법령에 의해 입찰참가 제한처분 또는 영업정지 처분된 사실기재

<서식 10>

사업수행능력 자가평가표

항 목	세 부 항 목				배 점	평 점	비 고
사업수행실적	누계실적	사업비 100% 이상			4.0점
		사업 비 70%이상~100%미만			3.6점
		사업 비 40%이상~70%미만			3.2점
		사업 비 40%미만			2.8점
		상 한 점 수			4점
기술능력	특급기술자				각0.5점
	고급기술자				각0.4점
	중급기술자				각0.3점
	초급기술자				각0.2점
	상 한 점 수				3점
경영상태	회사채		기업어음	기업신용 평가등급	-	-	-
	A+, A0, A-, BBB+,BBB0		A2+, A20, A2-, A3+, A30	A+, A0, A-, BBB+,BBB0	3.0점
	BBB-, BB+, BB0, BB-		A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	2.85점
	B+, B0, B-		B+, B0, B-	B+, B0, B-	2.7점
	CCC+ 이하		C 이하	CCC+ 이하	2.1점
	상 한 점 수				3점
합 계					10점

※ 모든 증명자료는 ‘사실과 상위 없음’을 날인해 붙임으로 첨부해야 함. 증명첨부서류에 페이지를 명시하고, 위의 비고란에 증명첨부서류 페이지를 표시함

※ 기술자에 대한 등급은 산업통상자원부 공고 “엔지니어링산업진흥법 시행령”의 엔지니어링기술자(제4조 관련) 등급 및 자격 기준에 의함

※ 「신용정보의 이용 및 보호에 관한법률」 제4조 제1항 제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의 3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가 등급으로 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가함. 다만 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으나 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가함

<서식 11>

서 약 서

국립민속박물관에서 추진 중인 「2024년 국립민속박물관 어린이박물관 상설전시2 개편 전시연출 용역」 입찰에 참여한 당사는 국립민속박물관의 제안요청서를 성실히 준수하고 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 불이익을 감수 할 것이며, 응모와 관련한 응모 작품 제출, 심사, 낙찰, 계약 결과 등에 대하여 어떠한 이의 없이 귀 관의 결정에 따를 것을 확약하고 이 서약서를 제출합니다.

2024년   월    일

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

국립민속박물관장 귀하

<서식 12>

보 안 서 약 서

귀 관의 「2024년 국립민속박물관 어린이박물관 상설전시2 개편 전시연출용역」 사업과 관련된 제반사항을 준수하고 보안유지에 최선을 다할 것이며, 만일 이를 소홀히 하여 발생되는 모든 사항에 대하여 발주처의 어떤 조치에도 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2024 년   월    일

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

국립민속박물관장 귀하

<서식 13>

청렴계약이행서약서

당사는 「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로 OECD 뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 국립민속박물관에서 시행하는 「국립민속박물관 어린이박물관 상설전시2 개편 전시연출용역」 입찰에 참여함에 있어 당사 및 하도급업체(하도급업체와 직․간접적으로 업무를 수행한 자 포함)의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다. 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하여 낙찰을 받은 자는 국립민속박물관에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 않겠으며, 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 국립민속박물관에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 1년 동안 참가하지 않고, 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰자격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합하는 자는 국립민속박물관에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 6월 동안 참가하지 않으며, 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결․계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 재단 임·직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하였을 때에는 다음 각호 각목의 1에 해당하는 기간 동안 국립민속박물관에서 시행하는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

1) 입찰․낙찰․계약체결 또는 계약이행(준공이후도 포함)과 관련하여

가. 1억원 이상의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 2년

나. 1천만원 이상 1억원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 1년 6월

다. 1천만원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 1년

2) 입찰 또는 낙찰자의 결정과 관련하여

가. 1억원 이상의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 1년 미만

나. 1천만원 이상 1억원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 9월

다. 1천만원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 6월

3. 입찰, 계약체결, 계약이행과 관련하여 관계 공무원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사착공 전에는 계약취소, 공사착공 이후에는 발주처에서 전체 또는 일부 계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관련 국립민속박물관 직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하고 업체의 임․직원(하도급업체나 하도급업체와 직․ 간접적으로 업무수행 하는 자를 포함)과 대리인이 관련 재단 임·직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력하고, 제보된 위반  사항에 대하여 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정한 행위가 있는 것으로 판명된 경우 뇌물 제공한 업체는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

5. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 국립민속박물관에서 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

6. 본건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 법령에 위반되는 하도급(일괄 하도급, 무면허 하도급, 재하도급)을 하지 않겠으며, 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호 신뢰를 바탕으로 한 약속으로써 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 계약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰 참가자격제한, 계약해지 등 국립민속박물관의 조치와 관련하여 당사가 국립민속박물관을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2024년      월      일

서약자 : ○  ○  ○ 회사

대  표 : ○  ○  ○ (서명 또는 날인)

※ 인감증명서의 인감을 날인함    ↟

국립민속박물관장 귀하

[서식 14]

개인정보 수집･이용･제공 동의서
소속 회사	성명	직위	생년월일	동의 여부	서명
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
위 사람은 국립민속박물관의 「2024년 국립민속박물관 어린이박물관 상설전시2 개편 전시연출 용역」의 입찰과 관련하여, 아래와 같이 본인 개인정보의 수집･이용･제공에 동의합니다. 가. 수집･이용･제공 목적 - 국립민속박물관이 수행하는「국립민속박물관 어린이박물관 상설전시2 개편 전시연출용역」입찰 참여에 따른 입찰서류 확인을 위해 최소 정보를 수집하는데 활용 나. 수집･이용･제공하는 개인정보의 항목 - 제안사 대표자의 성명, 전자우편, 생년월일, 전화번호, 직장주소, 학력, 경력, 은행/ 계좌번호, 휴대폰번호 등 - 참여인력의 성명, 소속/직책, 연령, 학력, 경력 등 - 입찰참가 신청 제출자의 성명, 직위, 생년월일, 주소, 전화번호, 전자우편 등 다. 개인정보의 보유 및 이용･제공기간 - 본 동의서가 작성된 때로부터 원 입찰참가 서류 관리를 위한 보유기간까지(10년) 라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익 - 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있음 - 거부에 따른 불이익 : 계약체결 대상에서 제외 2024년 월 일 국립민속박물관장 귀하

<서식 15>

대표자 선임계

사업명: 2024년 국립민속박물관 어린이박물관 상설전시2 개편 전시연출 용역

본인은 국립민속박물관 어린이박물관에서 주관하는 「2024년 국립민속박물관 어린이박물관 상설전시2 개편 전시연출 용역」을 위한 제안에 관한 모든 권한을 공동제안 대표자에게 위임합니다.

2024.     .

○ 공동제안 대표자

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                (인)

○ 공동제안자

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                (인)

국립민속박물관장 귀하

<서식 16>

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2024년      월      일

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동수급체의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

국립민속박물관장 귀하

<서식 16-1>

공동수급표준협정서(분담이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사ㆍ물품 또는 용역에 대한 계획ㆍ시공 등을 위하여 일정 분담내용에 따라 나누어 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자:      )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자:      )

②공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리의무관계가 남아 있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실ㆍ근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 분담내용) ①각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

가) ㅇㅇㅇ주식회사 : 기타자유업(행사대행업, 업종코드 : 9901) (      %)

나) ㅁㅁㅁ주식회사 : 실내건축공사업(업종코드 : 4990) (      %)

②제1항의 분담내용은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청한 경우

제10조(공동비용의 분담) 본 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담공사금액의 비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조(구성원 상호간의 책임) ①구성원이 분담공사와 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

②구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조(권리ㆍ의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리ㆍ의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당 계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당계약을 이행하지 아니하여 해당 구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

②구성원중 일부가 파산 또는 해산, 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력공시액등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족하여야 한다. <개정 2010.9.8.>

③제2항 본문의 경우에는 제11조제2항을 준용한다.

제14조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발행하였을 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2024년      월      일

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동수급체의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

국립민속박물관장 귀하

<서식 17>

서 면 질 의 서

발송일시		2024년 월 일
수신자	부 서	국립민속박물관 어린이박물관과
	주 소	서울특별시 종로구 삼청로 37
질의자	성 명	(인)
	소 재 지
	연 락 처	전화) Email)
질 의 내 용
질의 내용 ※ 질의는 대표사의 대표자만 할 수 있으며, 제안요청서를 다시 한 번 확인하시고 질의하여 주시기 바랍니다. ※ 제안요청서 쪽수를 함께 표시해주시고, 명료하게 작성바랍니다.